서해선 복선전철 공정률(2021년 1월)

□ 공정현황

분야		공정률(%)
계		71.7
설계		58.4
감리		44.0
용지		93.9
노반	1공구	87.1
	2공구	89.6
	3공구	90.1
	4공구	89.9
	5공구	91.2
	6공구	78.4
	7공구	97.3
	8공구	91.7
	9공구	83.8
	10공구	85.1
	기타	71.9
	소계	86.2
궤도		36.8
건물		10.7
전력		13.5
통신		5.3
신호		4.1
차량기지		44.2
부대		53.9