Ⅰ. 사 업 개 요

[ 노선도 ]

○ 사업내용 : 169.5㎞ 신선 건설

- 동대구~부산 124.2km, 대전․대구도심 45.3km(지상건설)

* 대전도심 18.2km, 대구도심 27.1km(대구남연결선 4.4km ‘10년 개통)

- 역사 7개역(증축 3개역 포함) 및 차량기지 중정비시설

* 5개 역사 완료, 대전역 설계중, 동대구역 증축 시공 중

○ 사 업 비 : 7조 7,496억원

○ 사업기간 : 2002~2014년(대구이남 2010년, 대전․대구도심 2014년)

○ 대구이남 : 2010.11. 1 개통 완료

Ⅱ. 공정 현황

□ 공정추진실적

❍ '11. 6월말 공정 : 77.6% (목표 77.2% 대비 100.51%)

❍ ‘11년 월별/구간별 공정계획 및 실적

(단위:%)

구 분		2011. 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2단계 합계	계획	74.7	74.9	75.5	76.0	76.5	77.2	77.7	78.3	78.9	79.5	80.1	81.1
	실적	74.7	75.3	75.8	76.2	76.7	77.6
	대비	100.0	100.5	100.4	100.3	100.3	100.5
도심 구간	계획	40.4	40.9	42.3	43.3	44.5	45.8	46.8	48.0	49.4	50.4	51.8	54.0
	실적	40.4	41.6	42.5	43.5	44.6	46.9
	대비	100.0	101.7	100.5	100.5	100.2	102.9
대전 도심	계획	41.6	42.2	43.5	44.7	45.9	47.5	48.5	49.8	51.5	52.7	54.3	56.7
	실적	41.7	43.0	44.3	45.1	46.2	48.4
	대비	100.2	101.9	101.8	100.9	100.7	101.9
대구 도심	계획	40.2	40.6	42.0	42.9	43.9	45.0	46.0	46.9	48.0	49.0	50.2	52.0
	실적	40.2	41.1	41.8	42.9	44.0	46.2
	대비	100.0	101.2	99.5	100.0	100.2	102.6
연결선	계획	3.5	3.5	3.7	3.9	5.7	7.6	9.5	11.4	13.1	14.7	16.4	17.9
	실적	3.5	3.6	3.6	3.8	5.2	5.2
	대비	100.0	102.8	97.3	97.4	91.2	68.4
대구이남	실적	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0