2023년 사업실명제 대상사업 사업내역서

사업실명제

등록번호

2023-22

담당부서

작성자

민자

(건설본부 / 광역민자철도처)

(기영현/042-607-4024/kyh@kr.or.kr)

재정

(건설본부/토목설계처)

(김영선/042-607-4604/l0002550@kr.or.kr)

정 책 명

수도권 광역급행철도 B노선

사업개요

및

추진경과

ㅇ 노선도

ㅇ 사업개요

- 사업목적 : 수도권 주민들의 교통복지 증진과 교통난 해소를 위해 주요 거점역을 30분대에 연결하는 광역급행철도망 구축

- 사업기간 : 2020년 ~ 2030년

- 총사업비 : 6조 4,005억원

· (민자구간) 3조 8,421억원, (재정구간) 2조 5,584억원

ㅇ 주요내용

- (사업내용) 인천 인천대입구~남양주 마석 간 82.7km, 정거장 14개소

· 민자구간(L=62.8㎞) : 인천대입구역~용산역, 상봉역~마석역 (정거장 10개소, 차량기지 1개소)

· 재정구간(L=19.9㎞) : 용산역~상봉역(정거장 4개소)

- (서비스수준) 표정속도 80km/h 이상

ㅇ 추진경과

- 민자구간

· ’11. 4. : 제2차 국가철도망 구축계획(2011~2020)에 반영

· ’11.12.∼’14. 2. : 예비타당성조사* 실시(KDI)

* (B/C) A노선 1.33, B노선 0.33, C노선 0.66

· ’19. 8. : 예타통과(3기 신도시 개발계획 반영 시 B/C 1.00, AHP 0.540)

· ’20. 1.∼’21. 8. : 타당성조사 및 기본계획 용역

· ’21. 8. : 민자·재정 구간 분리 추진 결정

* (민자) 인천대입구∼용산, 상봉∼마석 (재정) 용산∼상봉

· ’22. 7. : 민자구간 민간투자시설사업기본계획(RFP) 고시

· ’22. 11. : 민자구간 민간투자시설사업기본계획(RFP) 재고시

· ’23. 1. : 우선협상대상자 선정

* (가칭)수도권광역급행철도B노선㈜ [대표사 : 대우건설 컨소시엄]

- 재정구간

· ’19.8.	: 예비타당성 통과 (B/C 1.00, AHP 0.540)

· ’22.3.	: 기본계획 고시

· ’22.4.	: 대형공사 등의 입찰방법 심의(1~4공구 입찰방법(T/K) 결정)

· ’22.8.	: 1~4공구 설계시공일괄입찰(T/K) 발주

· ’22.8.~10. : 1~3공구 T/K 유찰 (3회)

· ’22.9.	: 4공구(T/K) 기본설계 착수

· ’22.11.	: 대형공사 등의 입찰방법(변경) 심의[1~3공구 입찰방법 변경 T/K→기타)]

· ’22.11.	: 1~3공구(기타) 노반 설계 입찰 공고

· ’23. 1.	: 1~3공구(기타) 노반 설계 착수

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

구 분	성명		직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
건설본부	손병두		본부장	’22.8.29. ∼ 현재	건설본부 사업 업무 총괄
	민자구간	송혜춘	처장	’22.8.29. ∼ 현재	광역민자철도처 업무 총괄
		박범준	부장	’22.11.30. ∼ 현재	GTX-B 민자구간 사업관리 업무총괄
	재정구간	이명석	처장	’22.9.26. ∼ 현재	토목설계처 업무 총괄
		김준걸	부장	’22.11.30. ∼ 현재	GTX-B 재정구간 업무총괄

다른기관 또는

민간인 관련자

ㅇ 국토교통부 : 수도권광역급행철도과장 안재혁, 사무관 백정호, 사무관 박정호

ㅇ 재정구간 설계사

- 1공구 : ㈜유신

- 2공구 : 서현기술단㈜

- 3공구 : ㈜동명기술공단종합건축사사무소

추진실적

민자구간

ㅇ 우선협상대상자 선정 후 실시협약 체결을 위한 협상 추진(’23. 1. ~ )

재정구간

ㅇ 1~3공구(기타) 노반 설계 중(’23. 1. ~ )

ㅇ 4공구(T/K) 실시설계적격자 선정 예정(’23. 2월중)