보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	자료배포일 2024. 2. 29. (목)	총 매수 2매
	배포부서 홍보실 (042-607-3085)
담당부서 건설본부 토목설계처 / 처장 이명석, GTX-B(TF)부장 김준걸 (042-607-3389)
신임 이성해 이사장, GTX-B 추진현황 점검 - “GTX-B 용산~상봉” 착공준비 상황 점검, 안전하고 편리한 GTX 만들 것 -

□ 국가철도공단 이성해 이사장은 29일(목) GTX-B 합동사무실을 방문하여 정부의 핵심 국정과제인 GTX-B의 사업추진현황 점검에 나섰다.

○ 이 이사장은 GTX-B 재정구간(용산∼상봉)이 `24년 상반기 착공을 목표로 추진함에 있어 “서울 도심을 관통하는 GTX-B(용산∼상봉)의 안전한 공사를 위해 기존 구조물의 안전성 확보를 최우선으로 하고, 무엇보다 이용객들이 최대한 편리하게 환승할 수 있도록 고려하여 설계에 반영해야 한다.”고 당부했다.

□ 또한, 국가철도공단 이성해 이사장은 “GTX-B 노선은 A, C노선과 함께 수도권 교통여건 개선의 핵심축인 사업으로 자부심을 갖고 착공 전 설계 마무리에 최선을 다해주길 바란다.”고 현장사무실 관계자들을 격려했으며,

○ “GTX-B 착공은 지역주민들이 오랫동안 기다려온 만큼 상반기 착공에 차질이 없도록 후속 절차를 철저히 이행하여, ‘빠르고 안전하고 편리한 GTX 시대’를 열어 국민들에게 출퇴근의 여유를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다.”고 밝혔다.

□ 참고로, 수도권의 만성적인 교통난 해소를 위해 주요 거점 지역을 30분대에 연결하는 GTX-B노선은 인천대입구∼남양주 마석을 잇는다.

○ 그중 재정사업으로 추진하는 용산∼상봉 구간은 총사업비 2조 7,584억 원을 투입하여 용산∼상봉 간 본선 19.95km와 상봉∼중앙선 간 연결선 4.27km, 정거장 총 4개소(용산, 서울역, 청량리, 상봉)를 신설할 예정이며, ‘24년 상반기 착공을 목표로 ’23년 1월 설계에 착수하여 현재 공사 발주를 위한 설계 마무리 단계에 있다.

* GTX-B노선(인천대입구∼마석, 82.7km) 중 용산∼상봉구간은 재정사업(19.95km), 인천대입구∼용산, 상봉∼마석 구간은 민자사업(62.75km)으로 추진 중

참고		GTX-B 재정구간 (용산~상봉) 사업개요

□ 사업 목적

❍ 수도권 주민들의 교통복지 증진과 만성적인 교통난 해소를 위해 주요
거점역을 30분대에 연결하는 광역급행철도망 구축

< 약  도 >

❍ 사 업 명 : 수도권광역급행철도 B노선(용산~상봉) 건설사업

❍ 사업규모 : GTX-B 재정구간(용산~상봉) 19.95km 복선전철 신설

❍ 총사업비 : 27,584억원 (국고 70%, 지방비 30%)

❍ 사업기간 : 2022년 ~ 2030년

❍ 공사기간 : 착공일로부터 70개월(시운전 포함)

❍ 선로용량

[日 / 편도]

구분	GTX-B 신설노선		기존 경춘선	비고
	민자구간 (인천대입구~용산)	재정구간 (용산~상봉)	민자구간 (상봉~마석)
	GTX-B	GTX-B 및 EMU-260공용	GTX-B, EMU-260, 전동차공용
GTX차량	160회	160회	128회
중앙선·강릉선	-	21회 (중앙선10회+강릉선11회)	-
경춘선	-	32회	91회 (EMU 32회+전동차 59회)
계	160회	213회	219회
선로용량	270회	266회	238회
여유용량	110회	53회	19회

□ 추진경위

❍ ’14. 2 : 수도권광역급행철도 예비타당성조사 (B/C=0.84)

❍ ’19. 8 : 수도권광역급행철도(GTX-B) 건설사업 예비타당성조사 완료 (B/C=1.00)

❍ ’22. 3 : 기본계획 고시(국토교통부고시 제2022-139호)

❍ ’22. 4 : 대형공사 등의 입찰방법 심의

* 전 공구(제1∼4공구) 설계·시공일괄입찰방식(T/K) 결정

❍ ‘22. 8 : 전 공구 T/K(제1~4공구) 입찰공고

* 1∼3공구 2회 유찰로 입찰공고 재시행(9月)하여 사업추진

❍ ’22. 9 : 제4공구(T/K) 기본설계 착수

❍ ’22.10. ~ 11. : 공단 정책협의회 개최

* 1∼3공구 입찰방법 변경(T/K → 기타) 추진 결정

❍ ’22.11 : 제1~3공구(기타) 노반 기본 및 실시설계 용역 입찰공고

❍ ’23. 1 : 제1~3공구(기타) 노반 기본 및 실시설계 용역 기본설계 착수

❍ ’23. 2 : 제4공구(T/K) 실시설계적격자 선정(KCC건설) 및 실시설계 착수

❍ ’23.12 : 제4공구(T/K) 1구간(작업구#3, 우선착공 분)실시계획 승인 및 공사착공

❍ ’24. 1 : 제1~3공구 노반 실시설계 단가 적정성 심사 완료(조달청)

□ 향후 계획

❍ `24. 3 : 제4공구(T/K구간) 착공 예정

❍ `24. 6 : 제1~3공구(기타공사 구간) 착공 예정(‘24.4월 입찰공고 예정)

[ GTX-B 노선도 ]

< 약도 >

< 노선도 >