'09. 11월 공정

경부고속철도 2단계 건설

사업추진현황

2009.  12.   .

	한국철도시설공단

Ⅰ. 사 업 개 요

[ 노선도 ]

○ 사업내용 : 169.5㎞ 신선 건설

- 동대구~부산 124.2km, 대전․대구도심 45.3km(지상건설)

- 역사 7개역(증축 3개역 포함) 및 차량기지 중정비시설

○ 사 업 비 : 7조 7,361억원

○ 사업기간 : 2002~2014년(대구이남 2010년, 대전․대구도심 2014년)

○ 사업비 집행계획

(단위 : 억원)

구 분	총소요	‘08까지	‘09예산	‘10예산(안)	‘11년이후
계	77,361	35,389	14,309	9,519	18,144
국 고	37,577	16,532	4,685	2,500	13,860
자 체	39,784	18,857	9,624	7,019	4,283

* ‘09년 자체예산 750억원 추가집행 예정(’10년 예산 선집행)

Ⅱ. 사업비 및 공정 현황

□ 사업비 집행실적

❍ '09.11월까지 1조 1,961억원(83.6%) 집행

(계획 1조 655억원 대비  112.3%)

(단위:억원)

분 야	총사업비 ('09.5.22)	'08년 까지 ('08까지공정)	'09년 예산 ('09까지공정)	집 행 금 액
				계 ('09년대비)	전월까지	금 월
총 계	77,362	35,389 (45.7%)	14,308 (64.2%)	11,961 (83.6%)	11,746	215
설 계	1,559	1,566	57	40	35	5
감 리	2,257	1,059	315	235	233	2
용 지	9,421	5,421	1,934	1,424	1,386	38
노 반	40,719	22,116	4,129	3,990	3,865	125
궤 도	5,119	1,445	1,630	1,270	1,270	0
건 물	3,515	333	1,318	983	942	41
전 력	5,764	1,107	1,912	1,502	1501	1
통 신	2,606	200	580	431	431	0
신 호	3,856	1,131	1,057	812	810	2
차량기지	2,165	758	1,330	1,241	1,241	0
연구개발	273	176	30	20	20	0
부 대	108	77	16	13	12	1

□ 공정추진실적

❍ '09. 11월말 공정 : 64.5% (목표 64.4% 대비 100.2%)

❍ ‘09년 월별/구간별 공정계획 및 실적

(단위:%)

구 분		2009. 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	계획	49.9	51.9	53.1	54.4	55.9	58.4	59.6	60.7	61.6	63.1	64.4	65.9
	실적	50.3	51.9	53.3	54.4	55.5	58.4	59.5	60.7	61.6	63.3	64.5
	대비	100.8	100.0	100.4	100.0	99.3	100.0	99.8	100.0	100.0	100.3	100.2
대구 이남	계획	67.6	70.1	71.5	73.2	74.7	76.8	78.7	80.1	81.3	82.8	83.9	85.8
	실적	68.6	70.1	71.8	73.2	74.8	76.8	78.8	80.2	81.3	83.0	84.2
	대비	101.5	100.0	100.4	100.0	100.1	100.0	100.1	100.1	100.0	100.2	100.4
도심 구간	계획	17.3	18.4	19.5	20.5	22.1	25.6	26.0	26.5	27.1	29.0	30.9	31.8
	실적	16.9	18.4	19.7	20.5	20.8	25.6	25.7	26.4	27.1	28.9	30.2
	대비	97.7	100.0	101.0	100.0	94.1	100.0	98.8	99.6	100.0	99.7	97.7

※ 2010년 완공구간 추진일정

구 분	대구～부산구간	대구 남연결선 구간	비 고
노반 공사	2009. 7 완료	2010. 2 완료
궤도 공사	2010. 2 완료	2010. 3 완료
전차선 공사	2010. 4 완료	2010. 5 완료
신호․통신 공사	2010. 3 완료	2010. 5 완료
역사 공사	2010.12 완료	-
종합시험 및 시운전	2010. 6 ～ 12	2010. 6 ～ 12

❍ 분야별 세부공정현황

(단위:%)

분 야	구간	'08년까지 (A)	'09년계획	'09년 추진실적				총 누계 (A+B)
				금월	금월까지
					계획	실적(B)	대비
총 계	계	49.2	65.9	1.2	15.2	15.3	100.7	64.5
	대구이남	66.8	85.8	1.2	17.1	17.4	101.8	84.2
	도심구간	16.4	31.8	1.3	14.5	13.8	95.2	30.2
용 지	계	57.5	85.7	0.4	27.7	15.2	54.9	72.7
	대구이남	97.3	100	-	2.7	2.0	74.1	99.3
	도심구간	47	81.9	0.5	34.3	18.6	54.2	65.6
노 반	계	54.2	62.9	0.5	8.2	10.1	123.2	64.3
	대구이남	83.5	92.5	0.4	8.8	11.6	131.8	95.1
	도심구간	2.3	10.5	0.7	7.1	7.6	107.0	9.9
	(10-3B)	35.8	80.9	5.7	38.8	49.7	128.1	85.5
궤 도	계	27.5	58.7	3.2	29.3	28.8	98.3	56.3
	대구이남	36.2	69.1	4.2	30.6	27.6	90.2	63.8
	(4공구)	52.4	81.6	3.5	29.2	27.3	93.5	79.7
	(5공구)	2.9	71.9	12	63.2	52.1	82.4	55.0
	도심구간	0.2	25.6	0.1	24.9	32.7	131.3	32.9
건 물	계	9.2	42.1	3.9	29.1	28.6	98.3	37.8
	대구이남	11.9	51.6	4.3	35.6	35.6	100.0	47.5
	도심구간	-	9.6	2.4	7.3	4.8	65.8	4.8
전 력	계	24.3	66.3	1.9	34	34.3	100.9	58.6
	대구이남	30.2	81.6	2.3	41.6	42.4	101.9	72.6
	도심구간	-	2.9	0.1	2.5	0.6	24.0	0.6
통 신	계	7.7	29.8	1.7	17.8	15	84.3	22.7
	대구이남	9.8	36.9	2.1	22	18.7	85.0	28.5
	도심구간	-	4.1	0.2	2.6	1.7	65.4	1.7
신 호	계	35.2	68	1.7	26	25.4	97.7	60.6
	대구이남	46	88.2	2.2	32.9	33	100.3	79.0
	도심구간	-	5.8	0.2	3.5	0.9	25.7	0.9
차량기지	대구이남	39.6	97	3.7	57.4	57.4	100.0	97.0