2024년 사업실명제 대상사업 사업내역서

사업실명제

등록번호

2024-11

담당부서

작성자

(건설본부 / 고속일반철도처)

(강수영/042-607-3485/7531ksy@kr.or.kr)

정 책 명

인덕원∼동탄 복선전철 건설사업

사업개요

및

추진경과

ㅇ 사업개요

- 사업목적 : 수도권 서남부지역의 광역교통기능 확충으로

광교·영통·동탄2신도시 등 대규모 택지 개발에

따른 교통체증 해소

ㅇ 사업기간: 2015 ∼ 2026

ㅇ 총사업비: 4조 68,229백만원

ㅇ 주요내용

- T/K 2개 공구 착공, 기타 10개 공구 실시설계 중

ㅇ 추진경과

- 2011. 4. ∼ 2011. 11.: 예비타당성조사

- 2012. 3.    : 기본계획 착수(2012. 10. 중지)

- 2012. 10. ∼ 2014. 11.: 타당성 재조사

- 2018. 3.    : 기본계획 고시

* 국토교통부고시 제2018-181호

- 2018. 9. ∼ 2020. 2.  : 노반 기본설계

- 2019. 7. ∼ 2021. 1.  : T/K구간(1, 9공구) 실시설계

- 2020. 5. ∼ 현재     : 기타공사 구간 실시설계 시행 중

- 2021. 4. 26. : T/K 1, 9공구 공사 계약 체결 및 착수

- 2021. 10. 27.: T/K 1, 9공구 사업실시계획승인

* 국토교통부고시 제2021-1193호

- 2022. 9. ∼ 2023. 7. : 사업계획 적정성 재검토(KDI)

- 2023. 12. 29.: 사업 실시계획 승인(2∼8, 10∼12 공구)

* 국토교통부고시 제2023-830호

- 2023. 12. : 노반 제2∼8, 10∼12공구 착수

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

ㅇ 사업관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
본사 건설본부	손병두	본부장	’22.8.29.∼현재	건설본부 소관사업 업무총괄
	한상연	처 장	’23.1.18.∼현재	고속일반철도처 소관사업 업무총괄
	황병복	부 장	`23.7.17.∼현재	수도권부 소관사업 업무총괄
지역 강원본부	최원일	본부장	‘23.12.1.∼현재	수도권본부 소관사업 업무총괄
	김대한	단 장	‘23.7.17.∼현재	수도권사업단 소관사업 업무총괄
	윤태정	부 장	‘22.11.9.∼현재	토목2부 소관사업 업무총괄

다른기관 또는

민간인 관련자

국토교통부
철도건설과장	오송천	담당사무관	김용래

ㅇ 공구별 업체 현황

구 분	제1공구(T/K)	제2공구	제3공구	제4공구
설계사	㈜유신	㈜대한콘설탄트	㈜제일엔지니어링	㈜동부엔지니어링
시공사	SK에코플랜트㈜	지에스건설㈜	극동건설㈜	롯데건설㈜
감리사	㈜대한콘설탄트	㈜케이알티씨	㈜천일
구 분	제5공구	제6공구	제7공구	제8공구
설계사	㈜이산	㈜동일기술공사	㈜유신	㈜동명기술공단
시공사	디엘이앤씨㈜	대보건설㈜	㈜한양	㈜에이치제이중공업
감리사	동부엔지니어링㈜		㈜동일기술공사	㈜선구엔지니어링
구 분	제9공구(T/K)	제10공구	제11공구	제12공구
설계사	㈜동명기술공단	㈜동해종합기술공사	㈜삼안	㈜태조엔지니어링
시공사	㈜한화건설	디엘건설㈜	두산건설㈜	현대산업개발㈜
감리사	㈜삼보기술단	동명기술공단		㈜서현

추진실적

ㅇ 2020. 2.  : 노반 기본설계 완료

ㅇ 2021. 1.  : 턴키구간 실시설계 완료

ㅇ 2021. 4.  : 턴키구간 공사 착수

ㅇ 2022. 9. ∼ 2023. 7. : 사업계획 적정성 재검토(KDI)

ㅇ 2023. 12. : 기타구간 공사 착수