정보통신분야

ITP/ITC 개정(안)

2011. 2

전기사업단

(정보통신처)

ITP(Inspection & Test Plan) 및 ITC(Inspection & Test Checklist) 운용요령

○ 목 적

정보통신분야에 대한 검사/시험 계획(ITP) 및 점검표(ITC)를 공단의 품질방침에 적합하게 작성, 적용될 수 있도록 함으로서 통신공사 품질향상을 기하기 위함

○ ITP 및 ITC 작성

- 번호부여 및 작성 방법 : 시관절-44(검사 및 시험계획서) 참조

- 사용단위는 도면이나 시공기준을 적용한다.

- ITP 및 ITC는 표준 공종에 대한 것이며, 추가되는 공종이 있으면 추가하여 작성한다.

- ITP/ITC는 사업별 특성을 감안하여 누락부분이나 추가부분을 작성하여 감리의 승인 후 사용한다.

- ITP 및 ITC의 개정은 현장 품질관리계획서의 절차를 따른다.

※ 기타 공단 절차서(시관절-44, 검사 및 시험계획서) 참조

○ ITP 및 ITC 운용

- 감리는 현장 출장 시 반드시 해당 작업의 ITC를 지참하여 현장에서 즉시 검측하여야 한다.

- ITP 및 ITC의 내용 및 양식은 현장 여건에 맞게 변경사용이 가능하다.

- 본 ITP 및 ITC의 내용을 참고로 하여 사업별 특성 및 현장여건에 맞게 추가․  변경 작성하여 사용하여야 한다.

- 시공허용오차가 있는 경우(시설규정 등)는 그 기준과 측정치를 기록하고, 없는 경우, 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 관련없음은 NA로 표기한다.

- 점검내용이 불합격(중부적합)인 경우 부적합 보고서를 발행하여 관리(붙임1 참조)하며, 경미한 부적합(경부적합)인 경우 명세(붙임2 참조)를 작성하여 적어도 조정이 끝남과 동시에 모두 해결되어야 한다.

․ 중부적합 : 기능상 지대한 영향을 미쳐 재시공 되어야 하는 부적합

․ 경부적합 : 재조정이나 추가 조치로 해결가능한 부적합(사소한 것도 모두 기록할 것)

※ 품경절-12(계약자 부적합관리) 참조

○ 사진촬영 및 실명기록

- 사진촬영

․ 완공 후 확인이 곤란한 공종(매몰부위, 고소작업부위 등)은 작업전,중,후를 촬영(A4용지에 3컷)하여 별도 보관해야하며, 추적관리를 위하여 반드시 해당 점검표 번호를 기입하여 보관한다.

․ 그 외의 공종 중 감리나 발주자가 필요하다고 판단되는 공종은 추가하여 관리할 수 있다

- 작업 실명기록

․ITC 1장당 1장의 실명기록부를 기본으로 하고 통신케이블 접속 실명기록부는 붙임양식에 따르고 현장 실명표는 시방에 따라 관리하며, 이외 시공은 실명기록부만 관리하고 실명표는 사용치 않는다..

․실명기록부는 별도 보관하며, 추적관리를 위하여 해당 점검표 번호를 기입하여 보관한다.

※ 시관절-15(공사, 감리 실명관리) 참조

붙임 : 1. 부적합 관리대장 1부.

2. 경부적합 관리대장 1부.

3. 사진대지 양식 1부.

4. 실명기록부 양식 1부.  끝.

<붙임 1>

		부적합 관리대장 (Nonconformance Control Log)			□ 공문 □ NCR □ FAN □ CAR		대장관리부서 / 조직
보고서 번호	발행일		부적합 발생조직	부적합내용	처리기한	일 정		특기사항
						회신일	종결일

<붙임 2>

		경부적합 관리대장
일련번호	발행일		발생점검표번호	경부적합내용	처리기한	처리일시		비고
						시공사	감리

<붙임 3>

사진대지

검사점검표 번호 :

		필요시 내용 기록
작업명 :	촬영일 :
		필요시 내용 기록
작업명 :	촬영일 :
		필요시 내용 기록
작업명 :	촬영일 :

<붙임 4>

실명기록부

검사점검표 번호					작업명
작업일자					시공사명
작업책임자	/		감리	/				/

시공자	성명	서명	비고