2024년 사업실명제 대상사업 사업내역서

사업실명제

등록번호

2024-04

담당부서

작성자

(건설본부 / 고속일반철도처)

(이형준/042-607-4724/leebro888@kr.or.kr)

정 책 명

동해선 포항~삼척 철도건설사업

사업개요

및

추진경과

ㅇ 사업개요

- 환동해권 철도망 구축으로 국가기간철도망 확충 및 동해안 지역개발 촉진

- 급증하고 있는 강릉·태백권 및 경북권의 관광수요 분담과 동남권~동해안권의 연계로 국가철도망 구축

ㅇ 사업기간 : 2002 ~ 2024

ㅇ 총사업비 : 3,428,882백만원

ㅇ 주요내용

- 포항~삼척 간 166.3km 철도건설

* (1단계) 포항∼영덕 44.1km, (2단계) 영덕∼삼척 122.2km

ㅇ 추진경과

- 1996. 7.～1997. 5. : 타당성조사(철도청)

- 2000. 3.～2000.12. : 기본계획(철도청)

- 2003.12.～2006.12. : 노반 실시설계(6,17공구 제외)

- 2008. 3.20. : 사업 실시계획 승인(1~3공구)

- 2009. 4.27. : 사업 실시계획 승인(4~16공구)

- 2009.12.～2011. 3. : 간이 타당성재조사

* 개별사업의 수요분석(‘00∼‘03) 결과와 국가철도망구축계획(‘04.12) 수요분석 결과 30% 이상 수요 감소로 타당성재조사

- 2013. 1.～2013.10. : 노반 실시설계(6,17공구)

- 2013. 9.～2014. 4. : 노반 보완실시설계(7~16공구)

- 2015. 7.17. : 사업 실시계획 승인(17공구)

- 2018. 1.26. : 1단계(포항~영덕) 구간 개통

- 2019. 8. 8. : 2단계(영덕~삼척) 구간 전력, 통신, 신호공사 착수

- 2019.10. 4. : 2단계(영덕~삼척) 구간 궤도공사 착수

- 2020. 6.30. : 2단계(영덕~삼척) 구간 건축공사 착수

- 현 재      : 전 분야 시공 중

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

ㅇ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
본사 건설본부	손병두	본부장	’22.8.29.∼현재	건설본부 소관사업 업무총괄
	한상연	처 장	’23.1.18.∼현재	고속일반철도처 소관사업 업무총괄
	강윤수	부 장	`23.7.17.∼현재	남부권부 소관사업 업무총괄
지역 강원본부	곽연수	본부장	‘23.12.1.∼현재	영남본부 소관사업 업무총괄
	홍석진	단 장	‘23.7.17.∼현재	영남권사업단 소관사업 업무총괄
	엄종우	부 장	‘22.1.2.∼현재	토목부 소관사업 업무총괄

다른기관 또는

민간인 관련자

국토교통부
철도건설과장	오송천	담당사무관	김은철

ㅇ 공구별 업체 현황

구 분	제1공구	제2공구	제3공구	제4공구	제5공구
설계사	서영엔지니어링	도화	동일기술공사	동명기술공단	KRTC(5,6공구)
시공사	대우건설	GS건설	포스코건설	코오롱글로벌	GS건설
감리사	수성엔지니어링	대한콘설탄트		삼안	평화엔지니어링
구 분	제6공구	제7공구	제8공구	제9공구	제10공구
설계사	KRTC(5,6공구)	유신		동명기술공단
시공사	KCC건설	동부건설	대우건설		대림건설
감리사	태조엔지니어링		서현기술단		동명(10,11공구)
구 분	제11공구	제12공구	제13공구	제14공구	제15공구
설계사	신성엔지니어링		태조엔지니어링		KRTC(15,16공구)
시공사	SK건설	현대건설	GS건설	극동건설	대우건설
감리사	(10,11공구)	서현기술단		동명기술공단
구 분	제16공구	제17공구
설계사	KRTC(15,16공구)	유신
시공사	한신공영	두산건설
감리사	천일

추진실적

ㅇ 2006. 12.: 노반분야 실시설계 완료

ㅇ 2014. 4. : 노반분야 보완 실시설계 완료

ㅇ 2014. 12.: 노반분야 공사 착공

ㅇ 2018. 1. : 1단계(포항~영덕) 구간 개통