서해선 복선전철 공정률(2021년 10월)

□ 공정현황

분야		공정률(%)
계		81.3
설계		58.5
감리		58.1
용지		95.6
노반	1공구	91.9
	2공구	96.4
	3공구	92.9
	4공구	95.4
	5공구	98.2
	6공구	88.2
	7공구	98.0
	8공구	93.3
	9공구	90.6
	10공구	91.8
	기타	86.1
	소계	93.0
궤도		66.6
건물		66.7
전력		31.9
통신		28.0
신호		26.0
차량기지		44.2
부대		56.9