보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다	자료배포일 2014. 5.22(목)	총 매수 3 매
	배포부서 홍보실(042-607-3082)
담당부서 수도권본부 건설기술처/ 처장 양종대, 부장 장형식(02-788-5291)
한국철도시설공단은 ‘14. 5.22(목) 해럴드생생뉴스 “철도시설공단의 ‘이상한’ 공사?” 보도내용에 대하여 아래와 같이 밝힙니다.

□ 현재 철거공사가 진행 중인 구)의정부변전소는 당초 설계된 가시설공법으로 시공이 곤란하여, 안전하고 경제적인 공법으로 변경하기 위해 일정 시간이 소요된 것은 사실이나, 전(前) 하도급사인 (주)두오건설산업이 무리한 공법변경을 지속적으로 요구하여 발생한 사항이며,  ([첨부] “기사내용 추가 설명자료” 참조)

* 타절 : 공사를 수행하는 자가 능력이 없거나 불법수주, 부도 등의 사유로 지속적인 공사 수행능력이 없다고 판단되어 공사를 중단하는 행위

□ 전(前) 하도급사는 계약 타절 이후에 장비로 공사장 진입로를 차단하는 등 공사추진을 방해하여, 원도급사에서 의정부 경찰서에 업무방해로 고소한 상태이고, ‘14.4월부터 공사를 재개 후 현재 변경된 공법으로 설계 중으로, 올해 8월말까지 공사를 완료할 계획임.

○ 전 하도급사가 공사중지가처분 소송을 제기하였으나 기각됨

(‘14.5.20 의정부지방법원 2014카합117)

□ 현재 공단 감사실에서 감사 진행 중으로, 감사결과 책임소재에 따라 조치 예정임.

첨부 : 기사내용 추가 설명자료 1부

[첨부]

기사내용 추가 설명 자료

① 공사에 사용된 부자재(용접봉)가 시방서 규격에 맞지 않으며, 수차례 문제 제기를 하였으나 답이 없었음

□ 전 하도급사인 (주)두오건설산업은 가시설 공법변경을 요구하며 일방적으로 공사를 중지(’13.11.20)하고 시공사의 수차례에 걸친 공사재개 지시를 계속 거부하자, 원도급사가 하도급계약을 타절 후 신규 하도급사가 공사를 재개하는 과정에서, 착오로 일부 규격에 맞지 않는 용접봉이 반입(’14.3.21)된 적이 있음

□ 전 하도급사가 문제 제기하여 사실을 확인한 후 문제된 용접봉은 즉각 전량 반출(’4.3.26) 하였으며, 기 시공 부위는 비파괴검사결과(’14.4.22, 5.12(2일간), 서울검사주식회사) 이상 없었으나, 보강을 위해 추가용접을 시행하였음.

② 철거순서를 무시하고 벽체보다 바닥을 우선 철거하여(바닥70%철거) 벽면이 쓰러지면 바로 옆 철로 지반이 무너질 수 있음

□ 바닥 콘크리트 선철거(현재 약30%진행)는 건물 중앙부 H-Pile 시공을 위한 것이며, 이는 설계에 반영된 공정대로 공사가 진행된 것으로 “철거순서를 무시했다”는 주장은 사실과 다름

○ 구조안전 검토결과(’14.4월, 한국종합건축사사무소 구조기술사) 안전성에 문제가 없는 것으로 판명되었고, 해당 현장을 취약개소로 지정하여 지속적인 모니터링을 시행 중이며, 계측기를 이용해 주기적으로 측정한 결과 현재까지 전혀 이상 없음.

③ 하도급사(두오)에서 공기단축을 위한 공법변경을 수차례 요청했으나 원도급사와 발주처에서 불허

□ 전 하도급사(두오)가 변경 요구한 공법은 공사비가 과도하게(당초 15억원→70억원, 약55억원 증가) 소요되어, 비용절감방안 등을 검토하던 중 ‘두오’건설이 일방적으로 공사를 중지(‘13.11.20)했음.

※ 공단이 적용 예정인 공법은 사업비가 7억원이 증가되는 것으로 검토되었으며,

원도급사 및 감리단은 '두오건설‘이 사업비 증가를 목적으로 무리하게 공법변경을 요구하면서 문제를 제기한 것으로 판단하고 있음