경춘선 노반, 건축분야 공정율 현황

□ 총체 공정률 : 86.0%

2010.09월말 기준

구 분	공 정 율(%)								비 고
	1공구	2공구	3공구	4공구	5공구	6공구	7공구	8공구
노 반	91.60%	97.2%	준공	97.01%	97.48%	97.74%	92.20%	94.75%

구 분	공 정 율(%)								비 고
건 축	갈매	퇴계원	사릉	금곡	평내호평	마석	대성리	청평
	54.6%	56.5%	90.8%	86.2%	준공	영업이전완료	89.0%	영업이전완료
	상천	가평	경강	백양리	강촌	김유정	남춘천	춘천
	90.7%	92.1%	90.3%	78.0%	94.0%	88.1%	81.4%	85.0%