서해선 복선전철 공정률(22년 11월말 기준)

분야		공정률(%)
계		90.2
설계		84.9
감리		69.0
용지		97.3
노반	1공구	96.6
	2공구	99.9
	3공구	99.4
	4공구	95.2
	5공구	99.7
	6공구	92.8
	7공구	100.0
	8공구	100.0
	9공구	97.1
	10공구	94.9
	기타	90.9
	소계	96.7
궤도		83.5
건물		83.4
전력		73.8
통신		50.1
신호		51.6
차량기지		58.4
부대		61.6