경춘선 노반, 건축분야 공정율 현황

□ 총체 공정률 : 80.2%·

2010.05월말 기준

구 분	공 정 율(%)								비 고
	1공구	2공구	3공구	4공구	5공구	6공구	7공구	8공구
노 반	79.0%	89.5%	준공	93.74%	95.4%	94.6%	88.8%	92.45%

구 분	공 정 율(%)								비 고
건 축	갈매	퇴계원	사릉	금곡	평내호평	마석	대성리	청평
	9.7%	3.0%	64.7%	39.4%	준공	영업이전완료	42.0%	영업이전완료
	상천	가평	경강	백양리	강촌	김유정	남춘천	춘천
	37.5%	66.8%	51.5%	19.0%	55.0%	49.3%	38.5%	53.3%