2024년 사업실명제 대상사업 사업내역서

사업실명제

등록번호

2024-03

담당부서

작성자

(건설본부 / 고속일반철도처)

(하동원/042-607-3966/10003413@kr.or.kr)

정 책 명

이천∼문경 철도건설사업

사업개요

및

추진경과

ㅇ 사업개요

- 사업목적: 경기, 충청, 경북의 중부내륙과 수도권의
연계교통편의 제공 등을 위하여 사업추진

ㅇ 사업기간: 2005 ∼ 2025

ㅇ 총사업비: 2조 550,088백만원

ㅇ 주요내용

- 이천∼문경 간 93.2km 단선전철 건설

ㅇ 추진경과

- 2002. 7. ∼ 2003. 6. : 예비타당성조사

- 2007. 9. ∼ 2010. 10.: 이천∼충주 노반 기본설계

- 2011. 3.            : 실시설계 용역 착수(1∼5공구)

- 2011. 8. ∼ 2012. 8. : 타당성재조사 시행(KDI)

- 2014. 7.            : 실시설계 완료(1,3,4공구)

- 2014. 12. 20.       : 제1, 3, 4공구 노반공사 착공

- 2015. 6.            : 제5공구 노반공사 착공

- 2015. 8.            : 제2공구 노반공사 착공

- 2017. 5.            : 제8공구 노반공사 착공(T/K)

- 2017. 6.             : 제6공구 노반공사 착공(T/K)

- 2018. 5.            : 제7,9공구 공사 착공

- 2021. 12.           : 1단계(이천∼충주) 개통 완료

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

ㅇ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
본사 건설본부	손병두	본부장	’22.8.29.∼현재	건설본부 소관사업 업무총괄
	한상연	처 장	’23.1.18.∼현재	고속일반철도처 소관사업 업무총괄
	안성진	부 장	`23.1.18.∼현재	중부권부 소관사업 업무총괄
지역 충청본부	김윤양	본부장	‘22.9.1.∼현재	충청본부 소관사업 업무총괄
	백효순	단 장	‘24.2.19.∼현재	충청권사업단 소관사업 업무총괄
	김정석	부 장	‘22.1.17.∼현재	토목3부 소관사업 업무총괄

다른기관 또는

민간인 관련자

국토교통부
철도건설과장	오송천	담당사무관	김은철

ㅇ 이천∼문경 1단계 시공 구간(제1∼5공구)

구 분	제1공구	제2공구	제3공구	제4공구	제5공구
설계사	㈜유신	㈜벽산	㈜동부	㈜수성	㈜KRTC
시공사	계룡건설㈜	극동건설㈜	㈜한양	㈜KCC	고려개발㈜
감리사	㈜삼보기술단		㈜유신		㈜선진

ㅇ 이천∼문경 2단계 시공 구간(제6∼9공구)

구 분	제6공구(T/K)	제7공구	제8공구(T/K)	제9공구
설계사	현대건설㈜	㈜동명기술공단	SK건설㈜	㈜유신
시공사		삼부토건㈜		두산건설㈜
감리사	㈜동명기술공단	㈜동명기술공단	㈜천일	㈜삼보기술단

추진실적

ㅇ 2002. 7. ∼ 2003. 6.: 예비타당성조사

ㅇ 2006. 11. 28.: 기본계획 고시

* 건설교통부고시 제2006-499호

ㅇ 2014. 12. 22.: 사업실시계획 승인 고시

* 국토교통부고시 제2014-833호

ㅇ 2014. 12. ∼ 2018. 5.: 노반공사 착공(1∼9공구)

ㅇ 2021. 12. 31.: 1단계(이천∼충주) 개통 완료