보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	자료배포일 2017. 7. 11.(화)	총 매수 2매
	배포부서 홍보실 (042-607-3082)
담당부서 기술본부 차량처TF / 처장 최종호, 종합시운전부장 김형룡 (042-607-4522)
철도공단, 인천공항 T2연결철도 주요 공정완료...정밀점검 시작! - 2018 평창동계올림픽 선수단과 응원단 수송을 위해 완벽한 개통 약속 -

□ 한국철도시설공단(이사장 강영일)은 인천국제공항 제2여객터미널 연결철도(6.4km)의 주요공정을 6월 30일(금) 완료하고, 시운전열차투입을 위한 철도시설물 전반에 대한 정밀점검을 7월 12일(수)∼14일(금) 3일간 실시한다고 밝혔다.

○ 공단은 (주)공항철도 등 철도유관기관의 전문 인력들과 함께 사전점검 팀을 구성하여 노반, 궤도, 전차선, 신호 등 11개 분야 236개 항목에 대하여 시운전열차가 안전하게 운행할 수 있는지 집중적으로 점검한다.

□ 인천국제공항 제2여객터미널 연결철도 사업은 현재 운행 중인 공항철도 선로를 제2여객터미널까지 6.4km를 연장하여 건설하는 사업으로,

○ 이번 정밀점검 결과 시운전열차의 운행에 지장이 없다고 판단되면 8월 21일(월)부터 9월 4일(월)까지 공항철도 차량AREX(Airport Railroad Express)와 KTX를 투입하여 총 121종의 시설물검증을 시행하게 된다.

○ 또한, 9월 11일부터는 실제 영업상황을 가정한 영업시운전을 9월 말까지 시행하여 열차운행체계의 적정성, 운행관리 능력과 여객편의설비를 점검하고, 기관사의 노선숙지 훈련도 병행하여 안전하고 보다 완벽한 개통을 철저하게 대비할 예정이다.

□ 철도공단 최종호 차량처장은 “본 사업은 인천국제공항 제2여객 터미널 개항에 대비하고, 2018 평창 동계올림픽 기간 중 우리나라를 방문하는 선수단과 응원단이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 안전과 품질을 철저히 검증하여 완벽하게 개통하겠다”고 말했다.