2023년 사업실명제 대상사업 사업내역서

사업실명제

등록번호

2023-10

담당부서

작성자

(시설본부/시설개량처)

(김정호/042-607-3787/0223kjh@kr.or.kr)

사 업 명

경부선 상동~밀양간 밀양강교 교량개량공사

사업개요

및

추진경과

ㅇ 노선도

ㅇ 사업개요

- 사업목적 : 밀양강을 횡단하는 밀양강교를 개량해 재해예방을 통한 안전성 및 기존 교량 노후화에 따른 시설개량으로 열차의 안전운행 확보

- 공사위치 : 경상남도 밀양시 용평동 일원

- 공사규모 : 1,160억원

- 공사기간 : 2017.12. ~ 2025.5. (90개월)

ㅇ 주요내용

- 총 연장 : L=2,620m

·토공 : 깍기 11만㎥, 쌓기 14만㎥

·교량 : 2개소/696m(밀양강교 656m, 용평교 40m)

·가교 : 3개소/821m

·철거 : 기존교량 철거 2개소, 기존노선 철거

·기타 : 경비처소 2개소 이전·신축

ㅇ 추진경과

- 2016.02~2017.07.   노반·궤도 실시설계 완료

- 2017.12.   노반공사 계약 및 착수

- 2018.01.   건설사업관리용역 계약 및 착수

- 2018.03   사업실시계획 승인

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

ㅇ 사업관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
시설본부	신형하	본부장	‘21. 5.20.∼현재	시설본부 사업 업무총괄
	윤증원	처장	‘22. 1.17.∼현재	시설개량사업 업무총괄
	김 훈	부장	‘23. 1.18∼현재	시설개량 사업관리
영남본부	김공수	본부장	ˊ22. 5. 2.∼현재	영남본부 소관사업 총괄
	김용배	단장	ˊ22.11. 9.∼현재	시설관리단 소관사업 총괄
	김병령	부장	ˊ21.10.25.∼현재	시설개량사업 총괄

다른기관 또는

민간인 관련자

ㅇ 감리사 : 동부엔지니어링(주) 외 2개사

ㅇ 시공사 : 코오롱글로벌(주) 외 1개사

ㅇ 설계사 : ㈜동명기술공단종합건축사사무소 외 2개사

추진실적

ㅇ ‘19. 6. 밀양강교 교대 A1 구체 완료

ㅇ ‘20. 4. 용평교 교대 A1, A2 및 슬래브 완료

ㅇ ‘19.12~‘20. 4. 밀양강교 S2~S9 거더 거치 완료

ㅇ ‘20. 5. 밀양강교 S4 슬래브 타설 완료

ㅇ ‘20. 6. 밀양강교 교각 P1~P11 구조물 완료

ㅇ ‘20. 7. 순성토 운반 및 쌓기 156,606㎥ 완료

ㅇ ‘21.12. 밀양강교 교대 A2 구조물 및 B(함) 공사

ㅇ ’21.4.~‘21.11. : SB아치교 보완설계 및 검증･평가 용역

ㅇ ’22.11. 밀양강교 S8, 10 실물시험시공(슬래브 타설) 완료