보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	자료배포일 2017. 8. 28.(월)	총 매수 2매
	배포부서 홍보실 (042-607-3082)
담당부서 기술본부 차량처 / 처장 최종호, 종합시운전부장 김형룡 (042-607-4522)
철도공단, 수색~서원주 고속화 구간 시험운행 나선다 - 최고속도 230km/h까지 증속 예정...11월 말까지 종합시험운행 완료 -

□ 한국철도시설공단(이사장 강영일)은 2018 평창 동계올림픽대회 수송지원을 위해 고속화를 추진하고 있는 수색∼서원주 기존선(108.4km)에 8월 28일(월) 새벽부터 시운전열차를 투입하여 종합시험운행을 시작했다고 밝혔다.

○ 공단은 철도유관기관 전문 인력들과 함께 종합시험팀을 구성하여, 전철전력·신호·차량 3개 분야 14개 항목에 대하여 시운전 열차가 최고 230km/h로 안전하게 운행할 수 있는지 집중적으로 점검하게 된다.

□ 수색∼서원주 기존선 고속화 사업은 KTX 등 고속열차가 최고속도 230km/h로 운행할 수 있도록 기존 시설물을 현대화하는 사업으로,

○ 영업열차가 현재 운행 중인 구간임을 감안하여, 열차가 운행되지 않는 야간시간대에 시운전열차를 단계적으로 증속하여 최고 230km/h까지 운행하면서 8월 28일(월)부터 10월 13일(금)까지 28일 동안 신호체계 시험 등 시설물 검증을 시행한다.

○ 시설물 검증이 끝나면, 10월 24일부터 11월 말까지 실제 영업상황을 가정하여 인천국제공항∼수색∼서원주∼강릉 전 구간(236.5km)에 KTX 열차를 투입하여 운행체계 적정성·운행관리능력·관제시스템 등을 점검하고 기관사의 노선숙지훈련을 병행하여 안전하고 완벽한 개통에 철저하게 대비한다.