서해선 복선전철 공정률(22년 5월말 기준)

분야		공정률(%)
계		85.2
설계		58.0
감리		63.5
용지		95.8
노반	1공구	98.1
	2공구	96.1
	3공구	99.3
	4공구	90.9
	5공구	95.5
	6공구	90.8
	7공구	99.7
	8공구	99.5
	9공구	94.7
	10공구	90.8
	기타	90.2
	소계	94.2
궤도		78.4
건물		80.5
전력		59.8
통신		29.3
신호		41.1
차량기지		58.4
부대		58.7