보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	자료배포일 2015. 06. 30.(화)	총 매수 2 매
	배포부서 건설기술처 전기PM부 (033-810-5161)
담당부서 강원본부 건설기술처 / 처장 김용두, 부장 구욱현 (033-810-5161)
원주-강릉 철도건설사업, 전기분야 공사 본격 추진! - 전체 공정율 42%.. 2017년말 개통으로 평창올림픽 성공개최 지원 -

□  한국철도시설공단 강원본부(본부장 최정환)는 6월말 원주∼강릉 복선전철 사업 중 전기분야(전철전력, 전차선로, 전력설비) 공사계약이 모두 체결됨에 따라 7월부터 본격적으로 전기공사를 추진할 계획이라고 밝혔다.

○ 철도공단은 원주-강릉 철도건설 전기분야 공사에 총 3천240억원의 예산을 투입해, 열차운행에 필요한 전기(2만5,000V)를 공급하기 위한 전철전원, 전차선로, 전력설비를 2017년 상반기까지 설치할 예정이다.

□ 강원본부 관계자는 “2018년 평창 동계올림픽의 성공개최 지원을 위하여 최선을 다해 고품질의 편리한 철도를 건설하겠다.”고 전했다.

□  한편, 원주∼강릉 철도건설 사업은 현재 선행 공정인 노반공사가 정상적으로 추진 중에 있으며, 궤도공사도 올해 상반기에 착수하는 등 전체 공정율이 42%에 이르고 있다.

참고		원주~강릉 철도건설 전기분야 공사 개요

□ 사업개요

1공구

2공구

3공구

서원주

둔내

진부

강릉

○ 사업내용 : 원주~강릉 철도건설 전기설비 신설

○ 사업기간 : 2015. 6월 ~ 2018. 3월

○ 총사업비 : 3,240억원

□ 계약현황

(금액단위:백만원)

구 분		1공구	2공구	3공구
계약금액	전철전원	3,029	16,214	8,066
	전차선	21,685	16,285	14,087
	전 력	10,627	9,385	15,038