대구이남(2010년 개통구간)  상세현황

[대구～부산간 본선]

❍ 공사규모(주요물량)

- 용 지 :  6,909필지 / 5,494천㎡

- 노 반 : 토공 28.8㎞,  교량 22.1㎞, 터널 73.3㎞

- 궤 도 : 궤도부설 267.077㎞, 분기기부설 39틀

- 전 력 : 전차선 가선 636㎞, 특고압케이블 2,057㎞

- 신 호 : 케이블(2,688㎞), ATC(1,013개소)

- 통 신 : 전선관로(196㎞), 케이블(399㎞)

❍ 공정현황

구 분		수 량	현재진도 (‘10.10월)	완 료 예정일	2010년													비고
					1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
노반	토공, 교량, 터널	1식	100%	완료														‘09.12월
궤도	궤도, 분기기	1식	100%	완료														‘10. 2월
전차선	전차선, 전력 송변전	1식	100%	완료														‘10. 4월
신호	IXL, ATC 등	1식	100%	완료														‘10. 5월
통신	광․동케이블 무선설비 등	1식	100%	완료														‘10. 4월
종합 시험 운행	사전점검	대구～울산～부산		완료														‘10.4.5 ～5.19
	시설물 검증시험 (KTX 투입)	궤도․전차선 검증시험		완료														6.3～7.15
		통합검증시험		완료														8.1～9.30
	영업시운전	모의영업시운전 영업설비운용점검		완료														10.1～10.31
영업	개 통			완료														‘10.11월

❍ 분야별 공정 추진현황

◇ 설  계

분 야	추 진 일 정	주 요 내 용	추 진 현 황	비 고
노 반		노반 실시설계	완료
궤 도	'04. 8 ~ '06. 6	궤도 실시설계	완료
건 물	'06.10 ~ '07.12	신설 4개역, 증설 3개역 실시설계	완료
시스템	'04. 6 ~ '08.10	전력․통신․신호 실시설계	완료
차 량	'07. 6 ~ '09. 6	고양․부산기지 2단계 실시설계완료	완료

◇ 용  지

구 분		총 대상	'09년까지 (A)	'10년		총 누계 (A+B)	잔 량
				계 획	실적(B)
면적 (천㎡)	계	5,417	5,070.5	127	57.7	5,128.2	288.8
	대구~부산	5,305	4,962.5	123	53.7	5,016.2	288.8
	역사부지	112	108	4	4	112	0

ㅇ 대구~부산간('10년 계획 : 127천㎡ 매수)

- 금월 누계 557.7천㎡ 매수

＊잔량 매수계획 : ‘10. 9월말 - 134필지, 127㎡ 수용재결신청 완료

‘10. 11월초 - 251필지, 92㎡ 수용재결신청 예정

( 수용재결 진행중  72㎡ )

◇ 노반공사

(단위:%)

구 분	'09 까지 (A)	'10 까지 계획	'10년 공정				총 누계 (A+B)	비고
			10월 실적	금월 까지
				계획	실적(B)	대비
계	95.3	100	0.1	4.5	4.6	102.2%	99.9

ㅇ 12-1공구(진입도로)

- 신흥천교

․ 하부 2기 시공완료

․ 상부 1경간 시공완료

- 토공 진입도로

․ 절토 317,068㎥중 10,296/317,068㎥ 시공

․ 성토 165,456㎥중 5,679/165,456㎥ 시공

- BOX 구조물

․ 통로박스 2개소 완료

․ 수로박스 2개소 완료

ㅇ 14-3공구

- 수직구 #1번 지하 9층 완료, 공사완료(‘10.10월)

- 수직구 #2번 지하 8층 완료, 공사완료(‘10.9월)

- 수직구 #3번 지하 10층 완료, 공사완료(‘10.10월)

◇ 궤도공사

구 분		총계	'09 까지 (A)	'10 계획	'10년 공정					총 누계 (A+B)	비고
					8월 까지	금월 실적	금월 까지
							계획	실적(B)	대비
공정<%>		100	71.5	100	28.3	0.1	26.0	28.4	109.2%	99.9
대구이남	장대레일 (km)	251.5	193.3	58.2	251.5	-	-	-	-	444.8
	재설정 (km)	113.2	76.2	37.0	113.2	-	-	-	-	189.4
	레일연마 (km)	251.3	-	251.3	251.3	-	-	-	-	251.3
	분기기 (틀)	41	29	12	41	-	-	-	-	70.0
중간역	장대레일 (km)	7.6	-	7.6	7.6	-	-	-	-	7.6
	분기기 (틀)	10	-	10	10	-	-	-	-	10.0

ㅇ 궤도4공구(대구~울산간)

- 장대레일 부설 완료(133.5km),  장대레일 재설정 완료(76.2km)

- 레일연마 133.5km 시공완료, 분기기 부설 완료(23틀)

- 흡음판설치 : 총 4,577m(‘10.10.30 완료)

ㅇ 궤도5공구(울산~부산간)

- 장대레일 부설 완료(118.0km),  재설정 완료(37.0km)

- 레일연마 117.8km 시공완료, 분기기 부설 완료(18틀)

- 흡음판설치 : 총 3,342m(‘10.10.26 완료)

ㅇ 오송역구간

- 분기기 부설 F18.5 4틀 F46 2틀 완료

- 궤도부설 3.6km 완료

- 자갈살포 13,285㎥ 중 10,882㎥ 완료

ㅇ 김천구미역구간

- 분기기 부설 F26 4틀 완료

- 궤도 부설 4.0km 완료

- 자갈살포 및 다짐 10,037㎥ 중 7,872㎥ 완료

◇ 전력․전차선공사

구 분		총계	'09 까지 (A)	'10까지 계획	'10년 공정				총 누계 (A+B)	비고
					금월 실적	금월 까지
						계획	실적(B)	대비
공정<%>		100	72.9	100	0.3	20.1	27.0	134.3%	99.9
주요물량	전철주/ 하수강(본)	6,288	6,274	14	-	-	-	-	6,288
	전차선/ 조가선(km)	635.8	432.2	203.6	-	-	-	-	636

ㅇ 전철전원

- (대구구간) 대구SS․김천PP․금구PP․구지PP 공사 완료

- (울산구간) 울산S/S․반곡PP․화곡PP․방내PP․당리S/P 공사완료

- (부산구간) 보은S/P․평산P/P․용연PP․사직PP․금정PP․부산진SSP공사완료

ㅇ 전차선

- 전철주 시공 완료(2,388본)

- 하수강 시공 완료(3,900본)

- 가동브래킷트 시공 완료(6,282본)

- 급전선보호선 시공 완료(565km)

- 전차선 시공 완료(635.8km)

ㅇ 배 전

- 전선관로(318,650조), 특고압케이블(846.9km) 공사완료

- 저압케이블 : 1,156.9km 공사완료

◇ 통신공사

구 분		총계	'09 까지 (A)	'10까지 계획	'10년 공정				총 누계 (A+B)	비고
					금월 실적	금월 까지
						계획	실적(B)	대비
공정<%>		100	38.5	100	0.8	49.4	61.4	124.3%	99.9
주 요 물 량 (km)	전선관로	196.1	196.1	-	-	-	-	-	196.1
	광케이블	257.7	248.1	9.6	-	-	-	-	257.7
	동케이블	140.9	132.6	8.3	-	-	-	-	140.9

ㅇ 전선관로 포설 완료(196.1km)

ㅇ 광케이블 시공완료(257.7km)

ㅇ 동케이블 시공완료(140.9km)

ㅇ 전송설비

- 파장분할다중화장치 :  28대 중  28대 시공(완료)

- 광전송장치 : 107대 중 107대 시공(완료)

- 채널다중화장치 : 146대 중 146대 시공(완료)

- 디지털회선분배장치 : 16대 중 16대 시공(완료)

- 디지털클럭공급장치 : 9대 중 9대 시공(완료)

- 전원장치 : 58대 중 58대 시공(완료)

ㅇ 열차무선설비

- 중앙제어센터설비 시공 완료(구로)

- 중계기지국설비 시공 완료(15국소)

- 차상설비 시공 완료(46편성)

ㅇ 역무용통신설비

- 교환기, 여객안내서버, 영상감시설비, 정보통신망설비, 통합망관리시스템, 관제전화설비, 전기시계, 부대설비 : 4개역 시공 완료(안내표시기 제외)

◇ 신호공사

구 분		총계	'09 까지 (A)	'10까지 계획	'10년 공정				총 누계 (A+B)	비고
					금월 실적	금월 까지
						계획	실적(B)	대비
공정<%>		100	79.2	100	0.3	16.8	20.7	123.2%	99.9
주요물량	케이블(km)	2,688	2,688	-	-	-	-	-	2,688
	ATC(개소)	1,011	659	354	-	-	-	-	1,011
	IXL(개소)	44	14	30	-	-	-	-	44

ㅇ 케이블 포설 완료(2,688km)

ㅇ ATC 1,011개소 시공완료

ㅇ IXL 44개소 시공완료

ㅇ 안전설비 198개소 시공완료

ㅇ 접지설비 시공 완료(662개소)

□ 대구남연결선(10-3B공구)

[ 노선도 ]

❍ 공사개요

- 공사기간 : '07. 7 ～ '10. 5

- 공사규모(주요물량)

․노  반 : 토공 2,424m, 터널 3개소(658m), 교량 1개소(1,288m)

․궤  도 : 궤도부설 8.0km, 분기기부설 3틀

․시스템 : 전차선 22.1km, 신호케이블 23.3km, 통신케이블 16.7km

- 공  정 : 96.8%(‘10.10월 현재)

❍ 공정현황

구 분		수 량	현재진도 (‘10.10월)	완 료 예정일	2010년												비고
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
궤도	궤도부설	8.0km	100%	완료
	분기기부설	3틀		완료
전차선	전차선,전력,송변전	1식	100%	완료
신호	케이블/ATC	1식	100%	완료
통신	전선관로, 광ㆍ동케이블	1식	100%	완료

□ 오송역

❍ 공사개요 - 위치 : 충북 청원군 강외면 오송리 350번지 일원 - 기간 : '08.6 ～ '10. 10 - 규모 : 지하1층, 지상3층 (연면적 20,034㎡) - 공정 : 99.5%(‘10.10월 현재) ․계획 99.5% 대비 100%

■ 공정현황

구 분		수 량	현재진도 (‘10.10월)	완 료 예정일	2010년												비고
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
노반	교 량	30span	100%	완료
	승강장	1,192m		8월
궤도	궤도부설	3.642km	100%	완료
	분기기부설	6틀		완료
건축	골조공사	지하 1층 지상 3층	100%	완료
	마감공사	25,963m2		완료
	기계설비	1식		완료
	광장조성	1식		완료
전차선	전차선,전력,송변전	1식	84.5%	12월
신호	케이블/ATC	1식	100%	완료
통신	전선관로, 광ㆍ동케이블	1식	100%	완료

□ 김천구미역

■ 공사개요 - 위치 : 경상북도 김천시 남면 옥산리 790번지 일원 - 기간 : '08.7 ～ '10. 9 - 규모 : 지하1층, 지상2층 (연면적 7,101㎡) - 공정 : 99.9%(‘10.10월 현재) ․계획 99.9% 대비 100%

■ 공정현황

구 분		수 량	현재진도 (‘10.10월)	완 료 예정일	2010년												비고
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
노반	교 량	74span	100%	완료
	승강장	50m		8월
궤도	궤도부설	3.996km	100%	완료
	분기기부설	4틀(＃26)		완료
건축	골조공사	지하 1층 지상 2층	100%	완료
	마감공사	1식		완료
	기계설비	1식		완료
	광장조성	1식		완료
전차선	전차선,전력,송변전	1식	100%	완료
신호	케이블/ATC	1식	100%	완료
통신	전선관로, 광ㆍ동케이블	1식	100%	완료

□ 신경주역

❍ 공사개요 - 위치 : 경상북도 경주시 건천읍 화전리 1010번지 일원 - 기간 : '07.7 ～ '10. 8 - 규모 : 지하1층, 지상2층 (연면적 31,275㎡) - 공 정 : 100%(‘10.10월 현재) ․계획 100% 대비 100%

❍ 공정현황

구 분			수 량	현재진도 (‘10.10월)	완 료 예정일	2010년												비고
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
건축	골조공사		지하1층 지상2	100%	완료													종합 보수 센터
	마감공사	벽체	13,181 ㎡	100%	완료													“
		천장	13,224 ㎡	100%
		바닥	19,251 ㎡	100%
	기계설비		1식	100%	완료													“
	광장조성	포장	19,300㎡	100%	완료													“
		조경	1식	100%

□ 울산역

❍ 공사개요 - 위치 : 울산광역시 울주군 삼남면 신화리 471번지 일원 - 기간 : '08.8 ～ '10. 9 - 규모 : 지하1층, 지상4층 (연면적 8,490㎡) - 공정 : 100%(‘10.10월 현재) ․계획 100% 대비 100%

❍ 공정현황

구 분			수 량	현재진도 (‘10.10월)	완 료 예정일	2010년												비고
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
건축	골조공사		지하1층 지상4층	100%	완료
	마감공사	벽체	20,831 ㎡	100%	완료
		천장	14,764 ㎡	100%
		바닥	24,221 ㎡	100%
	기계설비		1식	100%	완료
	광장조성	포장	323,464㎡	100%	완료
		조경	1식	100%

□ 부산역

❍ 공사개요 - 위치 : 부산광역시 동구 초량동 1187-1번지 일원 - 기간 : '09.03 ～ '10. 10 - 규모 : 지하1층, 지상3,4층 (연면적 61,900㎡, 증축 18,893㎡) - 공정 : 100%(‘10.10월 현재) ․계획 100% 대비 100%

❍ 공정계획

구 분			수 량	현재진도 (‘10.10월)	완 료 예정일	2010년												비고
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
건축	골조공사		지상3,4층 옥상층	100%	완료
	마감공사	벽체	7,264㎡	100%	완료
		천장	8,004㎡	100%
		바닥	7,656㎡	100%
	기계설비		1식	100%	완료
	광장조성		1식	100%	완료

□ 부산진/부산역 구내개량

❍ 공사개요

- 사업구간 : 부산진～부산역 442.23km～444.50km(L=2.27km)

- 공사기간 : '09.1 ～ '10. 10

- 공사규모(주요물량)

․노  반 : 터파기 11,487㎥, U형측구 1,894m, 집수정 12개소

․궤  도 : 궤도부설 7.09km, 분기기부설 70틀

․시스템 : 전차선 90.2km, 신호케이블 140.2km, 통신 지장설비1식

- 전체공정 : 98.1%(‘10.10월 현재)

❍ 공정현황

구 분		수 량	현재진도 (‘10.10월)	완 료 예정일	2010년												비고
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
궤도	궤도부설	7.09km	93.1%	10월
	궤도철거	5.87km		10월
	분기기부설	68틀		11월
	분기기철거	70틀		11월
전차선	전차선,전력,송변전	1식	99.4%	11월
신호	케이블포설	140.2km	99.9%	10월
	ATC	99개소		10월
	IXL	81대		10월
통신	지장통신 설비이설	1식	100.0%	완료

* 고속인입선 개통구간 지장공사는 ‘10.5월 완료

□ 경부고속철도와 동해남부선 연결

[ 노선도 ]

❍ 단계별 시공계획

구 분	계	1단계 : 접속구간	2단계 : 연결선
연 장	L=4.09km	L=0.142km	L=3.948km (연결구간 : 2.828km, 신호장 : 1.120km)
사업비	1,887.3억	59.6억원 (노반:19.4, 시스템:35.1, 용지:5.1)	1,827.7억원 (노반:1,087.6, 시스템:598, 용지:142.1)

❍ 추진계획

- 접속구간(1단계)은  ’10.5월 완료

- 연결선(2단계)은 ‘10.10월까지 기본설계를 완료하고, 동해남부선 완공예정인 ‘14.12월 완공계획으로 추진

❍ 접속구간 공정계획(전체 : 100%)

구 분		수 량	진 도 (‘10.10월)	완 료 예정일	2010년												비고
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
궤도	궤도부설	86m	100%	완료
	분기기부설	2틀		완료
전차선	전차선,전력,송변전	1식	100%	완료
신호	케이블/ATC	1식	-	완료
통신	전선관로, 광ㆍ동케이블	1식	100%	완료