보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	자료배포일 2015. 04. 27.(월)	총 매수 1 매
	배포부서 홍보실 (042-607-3082)
담당부서 건설본부 고속철도처 / 처장 정천덕, 부장 이종범 (042-607-4722)
한국철도시설공단은 ‘15. 4.27일 조선일보에서 보도한 “경남기업 법정관리로…수서發 KTX 개통 또 미뤄질 듯” 기사에 대해 아래와 같이 밝힙니다.

□  수도권고속철도(수서∼평택) 건설사업 중 경남기업에서 건설 중인 노반 제1-2공구가 법정관리 회생절차 개시(`15.4.7.) 후 채권․채무가 동결됨에 따라 일부 하도급사의 터널공사가 중단(`15.4.2)되어 공정추진에 지장을 초래하고 있음.

* 경남기업 잔여 시공물량 : 콘크리트라이닝 및 도상콘크리트 타설, 수직구 1개소 등

ㅇ 작업현장 정상화를 위해 공단 수도권고속철도건설단에 비상상황반을 설치(`15.3.27.)하고 법정관리인 및 공동도급사 방문 면담(3회)등을 통해 잔여공사 추진 방안과 하도급사 간담회 개최(3회)등으로 공사재개 독려 및 설득 중에 있음.

□ 공단에서는 작업 중단된 구간의 공정을 만회하기 위하여 우선 궤도공사 장대레일 부설방법을 변경하여 추진 중에 있으며, 콘크리트라이닝 거푸집 추가 제작, 궤도․전차선 등 후속공정 시공방안 재검토 등 공정만회방안 마련 중으로 완공일정에 차질 없도록 적극 노력하고 있음.

<붙 임> 노반 제1-2공구 공사개요

□ 계약현황

ㅇ 공 사 명 : 수도권고속철도(수서∼평택) 제1-2공구 노반신설 기타공사

*  총연장 5.387km(개착BOX 0.387km, 터널 5km), 수직구 1개소, 작업구 1개소

ㅇ 공사기간 :  12. 1. 3 ∼ ’15.12.20 (48개월)

ㅇ 공사금액 : 100,112 백만원

* 기집행 77,398백만원, 2015년 집행잔액 : 22,714백만원

ㅇ 공 정 율 : 78.5 %

ㅇ 원도급사 : 경남기업(66.66%), 영도건설(16.67%), 청광종합(16.67%)

- 하도급사 : 노반(범양이엔씨, 정희씨앤씨), 궤도(궤도공영)

□ 추진경위

ㅇ ‘15. 3.24 : 공사대금 적기지급을  위한 대책수립 요구(공단→경남기업)

ㅇ ‘15. 3.24 : 원활한 공사추진을 위한 협조 요청(공단→하도급사)

ㅇ ‘15. 3.27 : 경남기업 기업회생절차(법정관리) 신청

ㅇ ‘15. 3.30 : 보전처분과 포괄적 금지명령(서울중앙지법 제25부 파산부)

ㅇ ‘15. 3.31~4.1 : 하도급사(범양이엔씨, 정희씨앤씨) 대표이사 면담

ㅇ ‘15. 4. 2 : 건설단, 공동도급사(영도건설, 청광종합) 대책회의

ㅇ ‘15. 4. 7 : 기업회생절차 개시결정(서울중앙지법 제25부 파산부)

ㅇ ‘15. 4.10 : 공동도급사(청광종합건설) 회장 면담

ㅇ ‘15. 4.14 : 하도급사(정희씨앤씨) 대표이사 면담

ㅇ ‘15. 4.23 : 공동도급사(청광종합건설) 회장 면담