Ⅰ. 호남고속철도 사업개요

1. 개요

목포

(임성리)

익

산

43㎞820

오

송

0㎞

정

읍

광주

송정

● 신설역(2)

● 개량역(4)

■ 차량기지(1)

경부

고속철도

천안아산

대전

서울

공

주

89㎞520

131㎞750

182㎞250

1공구

47km720

230㎞990

■

군산선

전라선

경전선

부산

서대전

논산

김제

장성

함평

무안

차량기지

2공구

17km540

3공구

19km96

4공구

21km970

5공구

19km680

6공구

19km900

7공구

29km700

8공구

22km760

기본설계

48km74

호남선

ㅇ 사업구간 : 오송~목포간 230.9㎞

ㅇ 사업기간 : 2006~2017년

오송~광주송정 2014년, 광주송정~목포 2017년까지 완공

ㅇ 사업비 : 기본계획('09.4.16) 11조 3,382억원/총사업비('09.10.23) 12조 1,017억원

ㅇ 효과 :  철도수송능력 향상과 빠른 교통체계 구축으로 반나절생활권 실현, 충청․호남지역의 균형발전 촉진

2. 투자계획

(단위 : 백만원)

총소요	기투자 (‘06~’08년)	2009년	2010년	2011년	12년이후
12,101,694	150,750	292,000	945,043	2,128,978	8,584,923
국고 : 6,050,847 자체 : 6,050,847	150,750 0	140,000 152,000	310,000 635,043	1,045,500 1,083,478	4,464,597 4,120,326
	기본설계 완료 노반 실시설계착수	노반실시설계완료 용지매수 노반공사착수	실시설계 (건축, 전기) 노반공사(계속)	노반공사(계속)	준 공

Ⅱ. 호남고속철도 공정 현황

1. 공정 추진 실적

		‘09년 까지	‘10년				누계			비고
			당월	금년누계
				계획	실적	대비	계획	실적	대비
계		2.6	0.5	0.9	0.9	100.0	3.5	3.5	100.0
기본/실시설계		47.2	0.1	0.3	0.3	100.0	47.5	47.5	100.0
공 사 감 리		0.6	0.5	1.0	1.0	100.0	1.7	1.7	100.0
용 지 보 상		26.1	3.5	5.7	5.7	100.0	31.7	31.7	100.0
공사	계	1.3	0.3	0.2	0.2	100.0	1.5	1.5	100.0
	노 반	1.3	0.3	0.5	0.5	100.00	1.8	1.8	100.0
	궤 도	-	-	-	-	-	-	-	-
	건 물	-	-	-	-	-	-	-	-
	전 력	-	-	-	-	-	-	-	-
	통 신	-	-	-	-	-	-	-	-
	신 호	-	-	-	-	-	-	-	-
	차량기지	-	-	-	-	-	-	-	-
차 량 구 입		-	-	-	-	-	-	-	-

<지연사유> 없음