2023년 사업실명제 대상사업 사업내역서

사업실명제

등록번호

2023-14

담당부서

작성자

(시스템본부/시스템계획처)

(고정원/042-607-3513/jwko@kr.or.kr)

정 책 명

동해선(포항~동해) 전철화

사업개요

및

추진경과

ㅇ 노선도

L=12.4km

L=45.0km

L=110.2km

L=73.9km

ㅇ 사업개요

- 사업목적 : 부전~강릉간 전기차 일관 수송체계 구축으로 한반도 동측의 여객 및 화물수송 주요철도망 역할 수행 및 장래 남북철도 연계 대비 선로기능 향상

- 사업기간 : 2019 ∼ 2024년

- 총사업비 : 4,411억원

ㅇ 주요내용

- 포항~동해간 172.8km 단선 비전철 → 단선 전철화

ㅇ 추진경과

- ’16. 6. : ｢제3차 국가철도망구축계획｣에 포항~동해 전철화 반영

- ’18. 4. : 예비타당성 조사(기획재정부, B/C=0.59, AHP 0.468)

- ’19. 1. : ｢국가균형발전 프로젝트｣ 예비타당성 조사 면제사업 선정

- ’19. 3.~19. 7. : 사업계획 적정성 검토(기획재정부)

- ‘19.12.~20. 8. : 분야별 설계 시행

- ’20. 9. : 총사업비 협의조정(실시설계 결과) 완료

- ‘20.12. : 전차선로 신설공사 착공

- ‘22. 3. : 사업실시계획 변경 승인

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

ㅇ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 처  장 이인희

- 최종 결재자 : 이사장 김상균

구 분	성명	직급	수행기간	담당업무
시스템본부	이인희	본부장	`20.05∼현재	시스템본부 업무 총괄
	홍석진	처장	‘21.04∼현재	전철화사업 총괄
	박충원	부장	’23.01∼현재	전철화사업 담당
영남본부	김공수	본부장	ˊ22.05.∼현재	영남본부 관내 업무 총괄
	윤영호	단장	ˊ22.01.∼현재	사업단 업무 총괄
	김종민	부장	‘23.01.~현재	동해선 전철화 총괄
	김민수	부장	ˊ21.10.∼현재	동해선 전철화 시스템업무 총괄
	문병주	부장	‘20.09.~현재	동해선 전철화 궤도업무 총괄
	신진도	부장	‘19.09.~현재	동해선 전철화 건축업무 총괄

다른기관 또는

민간인 관련자

ㅇ 국토부 철도국 : 철도건설과장 오송천, 사무관 김은철

ㅇ 계약상대자

구 분	설계	공사	감리
궤 도	㈜케이알티씨	상경토건(주) 100%	서현기술단60% 동명기술공단40%
건 축	㈜종합건축사사무소근정, 주식회사 혜원까지종합건축사사무소	㈜동양(60%) ㈜보광(40%)	㈜한국종합건축사사무소 동양컨설턴트㈜ (100%)
		청암종합건설㈜(70%) ㈜디에이건설(30%)
			㈜백립종합건축사사무소 동양종합엔지니어링(주) (100%)
		백선건설㈜(55%) ㈜티시스(45%)
송변전	동산엔지니어링(주), ㈜디투엔지니어링, 세종기술(주)	샤론일렉콤(주) (55%) ㈜보광전설(45%)	㈜한국코아엔지니어링(60%) ㈜한국이알이시 (40%)
		(합)명신건설(60%) ㈜에스엠(40%)
		풍성건설(주)(45%) 성호전기소방(주)(30%) 태조전기(주)(25%)	벽산파워(주) (100%)
		㈜대전사(51%) 나라전기(주)(49%)
전력	㈜배산엔지니어링, 벽산파워(주), ㈜디투엔지니어링	우신전설(주)(60%) ㈜성우전설(40%)	㈜한국코아엔지니어링(60%) ㈜한국이알이시 (40%)
		㈜우진이앤씨(51%) 수범전기(주)(49%)
		벽산전기(40%) ㈜한백이앤씨(30%) 정화통신(주)(30%)	벽산파워(주) (100%)
		㈜대흥디씨티(40%) 신원종합개발(주)(30%) ㈜일구소방(30%)
전차선	㈜배산엔지니어링, 벽산파워(주), ㈜디투엔지니어링	㈜대림(60%) ㈜이앤엠테크 (10%) ㈜신한이엘(30%)	㈜한국이알이시 (70%) ㈜신우디엔시 (30%)
		승아전기(주)(65%) (유)다온일렉스(10%) ㈜창원기전(25%)
		㈜에이스원이앤씨 (50%) ㈜은성전기(15%) 대선이엔씨(주)(10%) 금산산업(15%) ㈜제이경성(10%)
			㈜디투엔지니어링 (100%)
		우민전기(주)(70%) ㈜티제이이엔지(30%)
		(유)일석(60%) ㈜우람(10%) ㈜호은전력(10%) ㈜세건이티씨(20%)
		합자회사 부원전기(60%) 옵티멀에너지서비스 주식회사(10%) 정웅전기공사(30%)
신 호	신우이엔지 주식회사	㈜보원엔지니어링 (70%) ㈜경산전설(30%)	신우이엔지(주) (100%)
		대선이엔씨(주) (70%) ㈜세광전력(30%)
통 신	대한엔지니어링(주)	㈜웨이브컴(62%) ㈜미래정보기술(38%)	㈜세영60% ㈜세영통신40%

추진실적

ㅇ ’18. 4. : 예비타당성 조사(기획재정부, B/C=0.59, AHP 0.468)

ㅇ ’19. 1. : ｢국가균형발전 프로젝트｣ 예비타당성 조사 면제사업 선정

ㅇ ’19. 3.~19. 7. : 사업계획 적정성 검토(기획재정부)

ㅇ ˊ20.12.  : 전차선로 신설공사 착공

ㅇ ˊ22. 12. : 사업실시계획 변경 승인(‘22.12→’24.12)