호남선 익산~부용간 만경강제2교 개량공사

교량기초 특정공법 심의대상 공모

2022. 03.

만경강제2교 교량개량공사 사업개요

L=970m

□ 사업개요

○ 사업내용 : 현 교량(단선 병렬 555m) 상선 우측에 복선교량(615m) 신설

○ 사업목적 : 일반철도 노후화된 교량을 개량하여 철도 안전운행을 확보

- 하천설계기준을 만족하도록 하천제방 이격 거리 및 경간장 충분히 확보

○ 사업비 / 사업기간 : 1,199억원 / 2018~2027

□ 추진경위

○ ’18.02. : 2018년도 철도시설개량사업 세부시행계획 승인

○ '18.06. : 실시설계 착수

○ '19.12. : 단선(상선) 개량에서 복선 개량으로 사업계획 변경

○ '21.06. : 교량상부거더(10경간) 특정공법 심의 시행

○ '21.06. : 설계자문 시행(임시선 배제하고 현 교량 우측에 복선교량 신설)
○ ‘21.09. ~ `22. 1. : 하천관리기관 하천점용허가 사전 협의

□ 향후계획

○ ’22.07 : 실시설계 준공

□ 교량 계획

구 분	설계 계획
평 면
종 단

* 위 삽도는 현황 참고를 위한 것으로 시공전 준공성과품 확인이 필요함.

□ 말뚝 적용 현황

구분	적용 형식	규격	길이 (m)	본수
교각 (12개소)	강관말뚝(SDA)	Φ609-12t	13.2~21.8	918본

□ 교량 기초공 특정공법 심의 대상

분 야	공 종	심의 대상	비 고
교 량	기초공	교각-12개소

□ 적용범위 및 기타

구 분	적 용 범 위
말뚝설치	⦁공사기간을 고려하여 양방향 동시 진행을 실시 할 것. ⦁시공사, 가설교량 설치업체(특정공법 시행 후 선정업체)와의 협의를 통하여 공사기간을 준수 하도록 할 것. ⦁말뚝설치는 우기(수방기간)전까지 실시 할 것.
기 타	⦁말뚝설치는 야간에 실시하고 수방기간을 고려하여 5개월내 시공이 가능 하도록 장비운영을 실시 할 것. ⦁월 20일(야간작업시 4시간, 열차차단시간 고려)기준으로 작업 및 장비운영을 편성 할 것. ⦁말뚝설치에 대한 공정표를 평가전 제출 할 것. ⦁제공되는 공정표(첨부1)는 공정편성을 위한 참고용으로 시공전 준공성과품을 재확인 할 것. ⦁말뚝 안정성 확보 및 기존선에 근접하여 시공되는 점을 고려하여 시공성이 확보되고, 기존 공법대비 경제적이고 유지관리에 유리한 공법이어야 할 것. ⦁공법심의 이후 각종 심의 결과에 따른 검토 조건 변경이 될 경우 정산이 필요할 수 있음.

특정공법 공모 절차

□ 공모에 참여하고자 하는 업체는 업체명, 심의대상 특정 공법 및 담당자를 표기한 공모 참여 의사를 이메일 (공단 담당자 : 박근영 대리 pgy3378@kr.or.kr ☎062-602-5239)로 2022.3.17.(목) 18시까지 회신

□ 공모에 참여하는 업체는 설계사(별도 알림)와 사전 협의하여 특정 공법 심의자료를 2022.3.24.(목) 18시까지 공문으로 제출해야 합니다.

(유선으로 제출 확인 필요)

- 세부 절차 및 설계자료는 설계사에서 별도 제공 예정

□ 첨부1. 예정공정표