구운역(가칭) 환기구#1 무진동굴착 공법 적용

특정공법 심의대상 공모

2025. 3.

I		사업개요

[노선약도]

□ 사업개요

ㅇ (사업구간) 수원시 권선구 구운동~금곡동 구간 위치(구운오거리)

ㅇ (사업내용) 구운역 신설(터널정거장, 외부출입구 1개소 등)

ㅇ (사 업 비) 약 927억원(수원시 전액 부담)

ㅇ (사업기간) 2024년 ~ 2029년(5년)

ㅇ (사업주체) 수원시 전액 부담 사업으로 설계·시공 국가철도공단 시행

□ 추진경위

ㅇ ’20. 9. ~ ‘21.12.	: 구운역(가칭) 추가설치 등 타당성조사(수원시)

ㅇ ’21.12.	: 신분당선 광교~호매실 건설사업 기본계획고시(국토부)

ㅇ ’22. 5.	: 구운역(가칭) 추가설치 건의(수원시→ 국토부)

ㅇ ’22. 5.	: 추가설치 건의에 따른 타당성 검증 요청(국토부→ 공단)

ㅇ ’22.12. ~ ‘23.10.	: 타당성 검증용역 시행(공단)

ㅇ ’24. 5.	: 신분당선 광교~호매실 턴키공사(제1∼3공구) 착수

ㅇ ’24. 5.	: 신분당선 구운역(가칭) 신설 승인(국토부)

ㅇ ’24. 6.	: 사업 실시계획 고시(국토교통부 고시 제2024-314호)

ㅇ ’24. 7.	: 구운역(가칭) 신설 위·수탁 협약 체결(공단↔수원시)

Ⅱ		공모 내용

□ 개 요

ㅇ 구운역(가칭) 환기구#1 무진동굴착 공법에 대하여 공정하고 투명한 절차를 통한 특정공법 선정을 위해 공모를 시행하고자 함

□ 공모 대상 공종 및 물량

ㅇ 다음의 무진동굴착 공법에 대하여 공모하고자 함

특정공법				대상물량
대분류	중분류	세분류	구간	적용연장(m)	적용수량(m3)
터널 (1개)	진동저감공법	무진동 굴착공법	구운역(가칭) 환기구#1	10	1,400

* 물량은 현장여건 등에 따라 변경(증감, 삭제) 될 수 있음(시험발파 후 무진동굴착공법 적용 여부 판단 예정)

□ 지원 방법

ㅇ 공모에 참여하고자 하는 업체는 참여 의향서(업체명, 심의대상 특정공법, 보유 공법의 명칭, 특허권 기간 등을 정확히 기재)를 기한 내 아래 담당자 이메일(이태관 과장, tglee@kr.or.kr) 로 제출

구분	담 당 자	사무실	E-mail
자료 제출처	국가철도공단 수도권본부 광교호매실사업단TF 이태관 과장	02-788-5555	tglee@kr.or.kr

* 제출기한 : 2025.04.09.(수) 18:00 (수신시간 기준)

* 제출여부 미확인에 따른 누락의 책임은 참여사에 있음

ㅇ 문의사항은 국가철도공단 수도권본부 광교호매실사업단TF 이태관 과장(02-788-5555)에게 문의

□ 유의사항

① 참여의향서 제출을 한 특정공법을 대상으로 심의대상 6개 후보 공법을 선정한 후 최종평가를 통해 1개의 특정공법 선정 예정

② 단계별 평가 진행(1차 평가, 숏리스트 선정, 2차 평가 등)을 위하여 제출된 각종 증빙서류(대표자, 자회사․그룹사 등의 관계 확인서류, 특허권 및 신기술 등 권리관계 확인서류, 장비 실보유현황 확인서류 등) 중 평가기준에 영향을 미칠 수 있는 내용이 사실과 다르거나 누락된 것이 확인될 경우 선정된 공법을 취소할 수 있음

③ 특허 전용·통상실시권자와 신기술 사용협약자는 특허권자 또는 신기술 보유자의 특허·신기술 사용 동의서를 반드시 제출해야 함

- 특허권이 없거나, 공단과의 협약 체결 시점(2025년 하반기, 변경될 수 있음)전까지 특허권(특허권자), 신기술 보호기간(신기술 보유자), 특허권자 또는 신기술 보유자와의 사용협약 기간(특허 전용통상실시권자 또는 신기술 사용협약자) 등이 만료되는 경우에는 특허 또는 신기술로 불인정하여 평가 대상에서 제외(결격 처리)

- 특정공법 공무일 기준 특허권 등 권리에 가압류, 가처분이 설정되어 있을 경우 결격처리

⑤ 참여의향서를 제출한 업체에게 제시하는 안내자료 상의 공사 물량 등은 본 공사 계획 자료로 추후 공사추진 과정에서 따라 물량 등이 변경(증감, 삭제)될 수 있음(시험발파 후 무진동굴착공법 적용 여부 판단 예정)

⑥ 금회 선정된 특정공법이 구운역(가칭) 환기구#1 시공 전, 해당공법으로 공사한 타 사업 구조물에 구조적 문제 등 하자가 발생하면 구운역(가칭) 환기구#1 공사추진 과정에서 타 공법으로 변경될 수 있음

⑦ 1·2차·최종서류 제출기한 미준수 시, 결격(심의에서 배제)

Ⅲ		1차 평가 및 숏리스트 선정기준 등

□ 숏리스트 선정 방안

1) 선정기준

ㅇ 1차 평가 결과 점수가 높은 순으로 숏리스트(6개 이하) 구성

ㅇ 결격사유(특허권 기간, 전용․통상실시권 등)가 있는 경우 순위에서 제외

2) 숏리스트 구성을 위한 1차 평가 시 동점 처리 방안

ㅇ 참여의향서 제출 공법을 대상으로 1차 평가 시행 및 순위 결정 과정에서 동점 공법 발생할 경우, 동점 공법별 시공실적을 기반으로 산출한 비교지표 값으로 공법 순위 차등 결정

* 실적 비교지표 값 = 총 실적 금액 / 총 실적 건수

ㅇ 동점 공법간 실적 비교지표 값이 동일할 경우, 해당 특허 및 신기술 유효기간의 적정성(사업기간 내 만료유무 등), 여유 기간 등을 기반으로 공법 순위 차등 결정

□ 1차 평가 항목 및 배점

구 분	평가항목	배점	비 고
시공성 (70)	① 무진동 적용구간 암종별(패턴별) 시공가능 여부	20	상대평가
	② 세부 시공순서 및 시공방법 등(시공 난이도)	25	상대평가
	③ 무진동 적용구간 굴착 공기	25	상대평가
안정성 (20)	④ 시공 중 막장면 안정성 확보	15	상대평가
	⑤ 시공 중 긴급 상황 발생 시 조치 계획	5	상대평가
시공실적 (10)	⑥ 최근 5년간 시공실적	5	상대평가
	⑦ 건설 신기술 인증(국토부 신기술 지정)	5	절대평가
합 계		100

Ⅳ		최종 평가 및 공법 선정 등

□ 기술평가(80점)

ㅇ 공단 특정공법위원회에서 의결된 아래의 “평가항목 및 배점”을 적용하여 평가 시행(심사심사처 주관)

- 기술평가 등을 위한 기술심의 위원회 구성 및 운영 등에 관한 사항은 심의 담당부서(심사심사처)에서 별도 방침으로 결정

<최종평가(기술심의) 중 기술평가 항목 및 배점>

심의대상 공종	평가항목	배점	비 고
무진동굴착	안 전 성	25
	시 공 성	45
	유지보수성	-
	민 원 성	25
	경관, 환경 및 생애주기비용	5
	합 계	100

□ 가격평가(20점)

ㅇ 심의 당일 제출하는 가격 견적서를“특정공법 선정 매뉴얼”에 따라 평가를 시행하여 가격점수 평가(광교호매실사업단TF 주관)

- 각 업체는 산출내역서 작성 시, 공단에서 제공한 설계도서 및 수량조서 내용을 반영해야하며, 광교호매실사업단TF(설계사)는 심의 요청 전 제출된 자료를 사전 검증

* 단가는 최신 물가로 작성하되, 단가 작성이 곤란한 항목은 공란 처리

- 각 업체는 내역 작성 시 산출근거*와 수량을 반드시 기재하여야 하고, 설계사가 적정성을 검증 한 후 참여 업체간 상호교차 확인

* 표준시장단가, 표준품셈 및 공단 KRQP-CODE 활용

- 2차 서류접수 시 설계사 검증 완료된 내역(수량, 단가)와 심의 당일에 제출하는 내역이 다를 경우 가격점수“0점”처리

* 업체 최종선정 이후 누락된 항목이 확인되면 증액은 인정되지 않으며, 견적서 내 항목별 단가 조정하여 반영

< 가격평가 방법 >

□ 가격점수 = 20점 – 감점(소숫점 3째 자리에서 절사)

균형가격 이상 비율	감점	비 고
5% 까지	3점
20% 이상	15점

* 균형가격은 최고.최저가격을 제외한 추천공법의 평균 가격을 말하며 추천공법이 4개 이하일 경우 전체 평균가격 적용

ㅇ 가격평가 결과 제출(요청부서→심의 주관부서)

- (심의 전까지) 최종 추천공법에 대하여 표준시장단가, 표준품셈 및 공단 KRQP-CODE 등 적용단가 및 수량 검증

* 추후 심의 시행 시 표준시장단가, 표준품셈, 공단 KRQP-CODE로 구성된 단가는 검증결과와 동일한 단가로 견적서 작성

** 수량 및 단가 검증결과에 따른 수량은 변경하지 않는 것이 원칙

- (심의 당일) 별도의 장소(심의장 外)에서 감사실(또는 청렴지킴이) 입회하에 공법사가 직접 밀봉상태의 가격견적서를 제출

□ 건설 신기술 가점(3점)

ㅇ 국토교통부 “신기술지정증서”로 확인

□ 공법 선정

ㅇ 가격평가(20점) + 기술평가(80점) + 건설신기술(3점)의 합산점수가 높은 업체를 선정

Ⅴ		추진계획

□ 단계별 추진일정

	①	□		②	□		③	□		④	□		⑤	□		⑥	□		⑦
공모 (공단 홈페이지)			참여의향서 접수			1차 서류 접수			검증 및 숏리스트 선정			수량조서 제공 / 2차 서류접수			기술심의 요청			최종평가 및 낙찰자 선정
3.27.~4.9. (14일)			4.3.~9. (7일)			4.10.~4.16. (7일)			4.17.~4.24. (8일)			4.25.~5.2. (8일)			(미정)			심의 당일
(재공모 시) 재공모에 해당되는 공종만 기존 일정에서 1주일(7일) 순연하여 추진

* 상기 일정은 추진 상황에 따라 변경될 수 있음