보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	자료배포일 2015. 04. 10.(금)	총 매수 2매
	배포부서 홍보실 (042-607-3082)
담당부서 강원본부 시설지원처 / 처장 이영주, 부장 곽연수 (033-810-5081)
철도공단, 중앙선 도담~영천 철도건설사업 토지보상 시행 - 충북 단양군 및 경북 안동시 대상.. 올해 350억원 투입 -

□ 한국철도시설공단 강원본부(본부장 최정환)는 중앙선 도담～영천 철도건설사업에 편입된 충북 단양군과 경북 안동시 일대 토지 및 지장물에 대한 감정평가를 마치고 4월말부터 용지보상협의 착수한다.

○ 이번에 단양군과 안동시 대상 보상물량은 토지 393필지와 지장물 288건으로, 향후 영주시에 대한 감정평가가 완료되면, 올해 약350억원을 보상할 예정이다.

○ 강원본부는 올해 1월 사업실시계획이 승인 후, 2월까지 편입토지 및 지장물 조사를 완료하였고 3월까지 보상계획에 대한 열람과 보상협의회 개최를 통해 지역주민 의견수렴을 거쳐, 토지소유자가 추천한 감정평가업체를 포함한 3개 평가업체를 선정해 감정평가를 시행하였다.

□ 철도공단은 용지보상이 착수됨에 따라 중앙선 도담～영천 철도건설사업이 본격적으로 추진되며, 2018년까지 약 3조 6천억원을 투입해, 중앙선 전 구간을 전철화할 계획이다.

□ 최정환 본부장은 "주민과의 소통을 통해 원활한 보상업무를 진행하겠다."고 전하며, “경북내륙지역의 여객 및 물류발전을 위해 고품질의 철도를 건설해 보답하겠다.”고 밝혔다.

■ 도담～영천 사업현황 및 보상계획

□ 사업개요

○ 사업내용 : 도담～영천 복선전철 건설사업

[도담～안동(72.2km) 복선, 안동～영천(75.9km) 단선]

○ 사업기간 : 2010 ～ 2018년

○ 총사업비 : 3조 6,474억원

○ 실시계획승인 :□15년 1월 2일(국토부고시 2014-884호)

□ 추진경위

○ ‘09.12～’10. 6 : 예비타당성조사 시행(B/C 0.8, AHP 0.557)

○ ‘10. 9～’11.12 : 타당성조사 및 기본계획 시행 (B/C 0.86)

○ ‘12. 4. 3     : 기본계획 고시

○ ‘12.11.28     : 노반 기본 및 실시설계 계약체결

○ ‘13. 1.31     : 턴키공사 실시설계적격자 선정 (1,2,6,11공구)

○ ‘13.11. 4     : 턴키공사 6공구 공사계약 체결

○ ‘14. 1.10     : 턴키공사 1,2공구 공사계약 체결

□ 보상계획

○ ’15. 3월 : 1, 6공구 감정평가, 보상협의 및 2공구 보상계획 공고

○ ’15. 4월 : 1,6공구 협의보상(1공구 202필지, 6공구 191필지)

○ ’15. 5월 : 2공구(461필지) 협의보상

○ ’15. 7월 : 1,2,6공구 미매수 토지 재결신청 및 3～5공구 협의보상

○ ’15. 9월 : 3～5공구 미매수 토지 재결신청

○ ’15.11월 : 1, 2, 6공구 수용재결 및 공탁완료(12월)