보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	자료배포일 2017. 8. 04.(금)	총 매수 2매
	배포부서 홍보실 (042-607-3082)
담당부서 수도권본부 시설관리처 / 처장 오세영, 승강장안전시설TF부장 강대식 (02-788-5411)
8월 4일(금) 경인일보에서 보도한 <전역사 스크린도어 설치...연내완료 사실상 불가능>기사에 대하여 아래와 같이 밝힙니다.

□ 한국철도시설공단(이사장 강영일)은 ’15년부터 채권발행으로 우선투자(3,100억 원)하여 광역철도 이용객의 안전 확보와 쾌적한 승강장 환경을 조성하기 위하여 승강장안전문이 설치되지 않은 광역철도 10개 노선 126개역에 대하여 ’17년까지 설치를 완료로 추진 중에 있음.

ㅇ 승강장안전문 설치사업의 공정율은 계획(42%) 대비 93.6%로 모든 현장이 열차 운행선 구간에서 야간에만 시행(작업시간 01:00∼04:30, 3시간 30분)됨에 따라 안전성 및 작업시간 확보가 어려운 실정임.

ㅇ 안전문 설치 대상 126개역 중 121개역은 금년 말까지 완료할 예정이며, 경부선 3개역(성균관대, 화서, 의왕역)은 승강장 구조물이 40년 이상으로 노후 되어, 승강장 구조물의 안전성 확보를 위하여 부득이 구조물 보강공사를 선 시행 후 설치와 경원선 2개역(월계, 녹천역)은 철도이설사업(서울시 수탁사업)과 중복됨에 따라 다소 늦어질 예정임.

ㅇ 우리공단은 수도권 광역철도 승강장안전문 설치가 계획된 공기 내에 완료되어 전동차를 이용하는 승객들의 안전이 확보되도록 최선의 노력을 다하겠음.