KRQP C-04040

Rev.11, 14. January 2026

연약지반

2026. 1.

REVIEW CHART

개정 번호	개정 일자	개정사유 및 내용(근거번호)	작성자	검토자	승인자
0	2014.12.31	신규제정	류완상	김대원 백효순	이동렬
1	2015.12.31	2015년 하반기 건설공사표준품셈 변경분 반영	백진호	손병두 백효순	이동렬
2	2016.04.30	2016년 상반기 건설공사표준품셈 변경분 반영	백진호	손병두 백효순	김영하
3	2016.12.31	2016년 하반기 건설공사표준품셈 등 변경분 반영	백진호	손병두 백효순	김영하
4	2017.05.29	2017년 상반기 건설공사표준품셈 등 변경분 반영	이진균	이만수 백효순	김영하
5	2017.09.12	2017년 하반기 건설공사표준품셈 등 변경분 반영	이진균	이만수 백효순	김영하
6	2018.03.19	2018년 상반기 건설공사표준품셈 등 변경분 반영	이진균	조순형 백효순	김영하
7	2019.04.02	2019년 상반기 건설공사표준품셈 등 변경분 반영	이진균	민병균 박진용	손병두
8	2021.05.18	2021년 상반기 건설공사 표준품셈 등 변경분 반영	한익표	이창현 심형환	최원일
9	2021.12.29	공단 명칭, CI 변경분 반영	한익표	이창현 심형환	유성기
10	2023.03.31	2023년 상반기 건설공사표준품셈 등 변경분 반영	한익표	안기성 이창현	김종호
11	2026.01.14	2025년 건설공사표준품셈 변경분, 감사처분 반영	임승빈	박진용 지연희	(代)우기하

KRQP C-04040

목   차

Ⅰ. 수량조서(예시)	1

Ⅱ. 수량산출(예시)	3

1. 표   토   제   거	3

2. 여 성 토 흙 쌓 기	3

3. 여 성 토  철   거	3

4. 배수 유도관 설 치	4

5. 매   트   깔   기	4

6. 연약지반 처리공법	5

7. 품  질  관  리 비	6

Ⅲ. 단가산출(예시)	7

RECORD HISTORY	18

Ⅰ. 수량조서(예시)

KRQP C-10100

-  -

-  -

번 호	공 종	규 격	단위	수 량	비 고
1	표토제거	습지불도저,13ton	㎡	1
2	여성토흙쌓기
a	하부노반다짐	토사	㎥	1
b	유용토운반
b-1	유용토운반	무대,토사	㎥	1
b-2	유용토운반	불도저,토사	㎥	1
b-3	유용토운반	덤프,토사,15ton	㎥	1
b-4	유용토운반	덤프,토사,24ton	㎥	1
c	순성토운반
c-1	순성토운반	덤프,토사,15ton	㎥	1
c-2	순성토운반	덤프,토사,24ton	㎥	1
3	여성토철거
a	땅깎기	토사,기계,소규모	㎥	1
b	땅깎기	토사,기계,중규모	㎥	1
c	땅깎기	토사,기계,대규모	㎥	1
4	배수유도관설치
a	배수유도관설치	S형다발관,D150mm	m	1
b	강관부설 및 접합	D600mm	m	1
c	강관절단	D600mm	개소	1
d	부직포설치	300g/㎡	㎡	1
5	매트깔기
5.1	샌드매트부설	T = 0.50m	㎥	1
5.2	P.P매트부설
a	P.P매트부설	50 kN/m	㎡	1
b	P.P매트부설	70 kN/m	㎡	1
c	P.P매트부설	100 kN/m	㎡	1
5.3	P.E.T매트부설
a	P.E.T매트부설	150 kN/m	㎡	1
b	P.E.T매트부설	200 kN/m	㎡	1
c	P.E.T매트부설	250 kN/m	㎡	1
6	연약지반처리공법
a	샌드드레인	D400mm	m	1
b	모래다짐말뚝	D700mm	m	1

번 호	공 종	규 격	단위	수 량	비 고
c	플라스틱보드드레인	PBD	m	1
d	메나드드레인	수평,D50mm	m	1
e	메나드드레인	수직,D50mm	m	1
f	장비 조립 및 해체	PBD천공기	회	1
g	장비 조립 및 해체	다짐말뚝,외부 반출/반입	회	1
h	장비 조립 및 해체	다짐말뚝,작업구간 이동	회	1
7	품질관리비
a	Mat시험비	20,000㎡마다	회	1
b	Sand MAT시험비	1,000㎥마다	회	1
c	드레인보드시험비	20,000㎡마다	회	1
d	실내토질시험비		식	1

Ⅱ. 수량산출(예시)

1. 표토제거 - 습지불도저,13ton(㎡)

1) 연약지반 구간 쌓기재료로 부적합한 지표를 두께 0.20m만큼 수량에 반영한다.

2) 연약지반에서 표토제거로 발생된 토사는 사토하는 것을 원칙으로 한다.

2. 여성토 흙쌓기

연약지반 구간에 침하로 인하여 생기는 수량을 반영하며, 침하토 수량은 예상침하량을 계산치에 의해 산출하여 토공입적표상에 수량을 반영한다.

1) 하부노반다짐 - 토사(㎥)

① 쌓기물량은 다짐상태의 수량으로 산출한다.

2) 유용토 운반 - 무대,토사(㎥)

토공분배표상 운반거리가 20m 미만인 물량 중 토사의 수량이다.

3) 유용토 운반 - 불도저,토사(㎥)

토공분배표상 운반거리가 20～60m 미만인 물량 중 토사의 수량이다.

4) 유용토 운반 - 덤프,토사(㎥)

① 토공분배표상 운반거리가 60m 이상인 물량 중 토사의 수량이다.

② 도로 및 현장여건에 따라 덤프15톤 및 24톤 적용

5) 순성토 운반 - 덤프,토사(㎥)

① 반입토량 중 토사의 수량이다.

② 도로 및 현장여건에 따라 덤프15톤 및 24톤 적용

③ 토취장 사용료 또는 원상복구가 필요한 경우 별도로 산출한다.

3. 여성토철거

1) 땅깎기 – 토사,기계(㎥)

① 모든 수량은 자연상태의 체적으로 산출하며, 규모에 따라 분리 적용한다.

② 철거한 수량은 본선 쌓기에 유용하며, 운반비는 유용토운반에서 계산한다.

2) 공사규모의 구분은 다음에 준하여 적용한다.

대규모	중규모	소규모
공사수량이 100,000m3 이상인 경우	공사수량이 100,000m3 미만인 경우	공사수량 10,000m3 미만인 경우 또는 작업공간이 협소 등 장비운영이 원활하지 않은 경우
※ 공사수량이란 시설물(교량, 터널 등) 및 지형조건(하천, 도로, 철도 등)에 의해 단절되는 토공 작업구간의 시공량을 말하며, 공사기간 및 현장여건을 감안하여 공사규모를 판단한다.

4. 배수유도관설치

가. 배수유도관 설치 - S형다발관,D150mm(m)

1) 샌드매트 설치구간에 배수기능을 검토하여 필요한 구간에 선로중심 및 횡방향으로 설치한다.

2) 배수유도관의 설치연장으로 수량을 산출한다.

3) 소켓관의 수량은 별도로 산출하지 않는다.

나. 강관부설 및 접합 - D600mm(m)

강관의 설치연장으로 수량을 산출한다.

다. 강관절단 - D600mm☓6mm(개소)

절단개소로 수량을 산출한다.

라. 부직포설치 - 300g/㎡(㎡)

(1) 배수뒷잡석이나 드레인보드를 부직포로 감싸는 수량이다.

(2) 배수뒷잡석이나 드레인보드의 겉면적으로 수량을 산출한다.

(3) 드레인보드에 부직포를 설치시는 부직포를 100mm 겹치게 한다.

5. 매트깔기

가. 샌드매트부설 - T=0.50m(㎥)

1) 연약지반 구간의 샌드매트 두께는 콘지수, 주행성, 배수성을 종합적으로 검토하여 0.50～1.20m 범위내에서 산출한다.

2) 쌓기 비탈면 끝단에서 양쪽으로 샌드매트 두께만큼 여유있게 산출한다.

3) 샌드매트의 수량은 다짐상태의 수량을 기준으로 한다.

나. P.P매트 부설

1) P.P매트 부설 - 50 kN/m(㎡)

2) P.P매트 부설 - 70 kN/m(㎡)

3) P.P매트 부설 - 100 kN/m(㎡)

가) P.P매트는 쌓기 비탈면 끝단에서 4.0m씩 여유있게 산출한다.

나) 현장봉합의 겹이음은 구입제품에 포함된 수량이다.

<그림 1> Sand Mat 및 P.P Mat 부설(예시)

다. P.E.T매트 부설

1) P.E.T매트 부설 - 150 kN/m(㎡)

2) P.E.T매트 부설 - 200 kN/m(㎡)

3) P.E.T매트 부설 - 250 kN/m(㎡)

가) 연약지반 구간에 단계성토시 적용한다.

나) 현장봉합의 겹이음은 구입제품에 포함된 수량이다.

다) 모든 수량은 수평거리로 산출한다.

<그림 2> P.E.T Mat 부설(예시)

6. 연약지반처리공법

가. 샌드드레인 - D400mm(m)

1) 연약지반 구간에 적용하며 심도는 샌드매트층을 포함한다.(항타 및 인발시)

2) 모래수량은 샌드매트층을 제외한 수량이다.

나. 모래다짐말뚝 - D700mm(m)

1) 연약지반 구간에 적용하며 심도는 샌드매트층을 포함한다.(항타 및 인발시)

2) 모래수량은 샌드매트층을 제외한 수량이다.

다. 플라스틱보드 드레인 - PBD(m)

1) 플라스틱보드 드레인의 길이는 시공관리를 위하여 샌드매트 상단에서 0.50m가 노출되도록 산출한다.

2) 평균타입심도는 N치별로 구분하여 산출한다.(N치 5미만, 5이상)

라. 메나드 드레인 - 수평,D50mm(m)

마. 메나드 드레인 - 수직,D50mm(m)

메나드 드레인의 설치연장으로 수량을 산출한다.

바. 장비 조립 및 해체 - PBD천공기(회)

시공조건(외부 반입/반출)에 따라 조립 및 해체 수량을산출한다.

사. 장비 조립 및 해체 – 다짐말뚝,외부 반출/반입 (회)

1) 최초 장비의 외부 반출/반입되는 수량을 산출한다.

아. 장비 조립 및 해체 – 다짐말뚝,작업구간 이동(회)

1) 시공조건(작업구간 내 해체 후 이동조립)에 따라 반복되는 경우 계상한다.

2) 최초 장비 조립·해체 공종과 중복되지 않도록 산출한다.

7. 품질관리비

가. Mat 시험비

P.P Mat 및 P.E.T Mat 재료량을 기준으로 20,000㎡당 1회 적용한다.

나. Sand Mat 시험비

모래 재료량을 기준으로 1,000㎥당 1회 적용한다.

다. 드레인보드 시험비

드레인보드 재료량을 기준으로 20,000㎡당 1회 적용한다.

라. 실내 토질시험비

천공하여 얻은 시료에 대해 토질시험 실시수량을 1식으로 계상한다.

Ⅲ. 단가산출(예시)

- 단가적용시 현장여건에 따라 작업효율, 적용장비, 운반거리 등을 고려하여야 하며, 건설공사 표준 품셈의 개정, 공단기준의 변경 등을 반영한 최신의 품을 적용하여야 한다.

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
1	표토제거 (T = 0.20m)	㎡	1. 습지불도저(13ton) D = 20m , L = 1.25 , E = 0.40 , H = 0.20m q0 = 1.50㎥ , e0 = 0.96(운반거리 20m) V1 = 40m/분(전진1단), V2 = 48m/분(후진1단) q1 = 1.50㎥×0.96 = 1.44㎥ , f = 1/1.25 = 0.8 Cm = 20m/40m/분+20m/48m/분+0.25분 = 1.17분 Q1 = (60분×1.44㎥×0.80×0.40)/1.17분 = 23.63㎥/hr Q = 23.63㎥/hr/0.20m = 118.15㎡/hr	[공통]8-2-1 불도저
2	여성토 흙쌓기
a	하부노반다짐 (토사)	㎥	1. 작업조건 1) 토공 장비에 의한 포설, 다짐 작업을 포함한다. 2) 재료의 함수비 조절을 위한 살수작업을 포함한다. 3) 다짐도 90% 이상 4) 체적환산계수를 기 반영한 다짐상태의 토량을 적용한다. 5) 일당 시공량 Q = 1,150㎥/일 2. 인건비 1) 특별인부: 1인/일 / Q㎥/일 3. 중기사용료 1) 모터그레이더(일반용,3.6M): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일 2) 진동롤러(자주식,10ton): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일 3) 굴착기(0.6㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일 4) 물탱크(살수차,16,000ℓ): 0.5대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일	[공통] 3-4-1 흙쌓기
b	유용토운반
b-1	유용토운반 (토사,무대)	㎥	땅깎기(토사) 집토비에서 계상
b-2	유용토운반 (토사,불도저) (ℓ=20～60m미만)	㎥	1. 중기사용료(불도저32ton) D = 60m-20m = 40m, L = 1.25 f = 1/1.25 = 0.8 E = (0.70+0.60)/2 = 0.65 , q0 = 5.50㎥ V1 = 52m/분(전진2단) , V2 = 58m/분(후진2단) e0 = 0.88(운반거리40m), q1=5.50㎥×0.88 = 4.84㎥ Cm = 40m/52m/분+40m/58m/분+0.25분 = 1.71분 Q = (60분×4.84㎥×0.8×0.65)/1.71분 = 88.31㎥/hr	[공통]8-2-1 불도저

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
b-3	유용토운반 (토사,덤프) (D/T=15ton, ℓ = 60m이상)	㎥	1. 적재(로더(타이어),3.50㎥) q1 = 3.50㎥, L = 1.25 f = 1/1.25 = 0.8 , Es = 0.60 , K = 1.00 t1 = 9초 , t2 = 14초 , lo = 8m , m = 1.8초/m Cms = 1.8m×8m+9초+14초 = 37.4 초 Q = (3600초×3.50㎥×1.00×0.8×0.60)/37.40초 = 161.71㎥/hr 2. 운반(덤프15ton+자동덮개) T = 15ton , rt = 1.60ton/㎥ , E = 0.90 qt = 15ton/1.60ton/㎥×1.25 = 11.72㎥ N = 11.72㎥/(3.50㎥×1.00) = 3.35회 t1 = 37.40초×3.35회/(60분×0.60) = 3.48분 t2 = (0.06㎞/15㎞/hr+0.06㎞/20㎞/hr)×60분 = 0.42분 t3 = 0.80분 , t4 = 0.42분, t5 = 0.50분, t6 = 1.50분 Cmt = 3.48분+0.42분+0.80분+0.42분+0.50분+1.50분 = 7.12분 OH = 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 60분×11.72㎥×0.8×0.90/7.12분 = 71.11㎥/hr ※ 도로 및 현장여건에 따라 덤프15톤 및 24톤 적용	[공통]8-2-5 로더 [공통]8-2-8 덤프트럭
b-4	유용토운반 (토사,덤프) (D/T=24ton, ℓ = 60m이상)	㎥	1. 적재(로더(타이어),3.50㎥) q1 = 3.50㎥, L = 1.25 f = 1/1.25 = 0.8 , Es = 0.60 , K = 1.00 t1 = 9초 , t2 = 14초 , lo = 8m , m = 1.8초/m Cms = 1.8m×8m+9초+14초 = 37.4 초 Q = (3600초×3.50㎥×1.00×0.8×0.60)/37.40초 = 161.71㎥/hr 2. 운반(덤프24ton+자동덮개) T = 24ton , rt = 1.60ton/㎥ , E = 0.90 qt = 24ton/1.60ton/㎥×1.25 = 18.75㎥ N = 18.75㎥/(3.50㎥×1.00) = 5.36회 t1 = 37.40초×5.36회/(60분×0.60) = 5.57분 t2 = (0.06㎞/15㎞/hr+0.06㎞/20㎞/hr)×60분 = 0.42분 t3 = 0.80분 , t4 = 0.42분, t5 = 0.50분, t6 = 1.50분 Cmt = 5.57분+0.42분+0.80분+0.42분+0.50분+1.50분 = 9.21분 OH = 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 60분×18.75㎥×0.8×0.90/9.21분 = 87.95㎥/hr ※ 도로 및 현장여건에 따라 덤프15톤 및 24톤 적용	[공통]8-2-5 로더 [공통]8-2-8 덤프트럭

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
c	순성토운반
c-1	순성토운반 (토사,덤프) (D/T=15ton, ℓ = 60m이상)	㎥	1. 적용기준 1) 벌개제근(별도) 2. 깎기 및 집토(불도저운반 32ton) D = 20m , L = 1.25 , E = (0.65+0.55)/2 = 0.60 V1 = 40m/분(전진1단) , V2 = 43m/분(후진1단) q0 = 5.50㎥ , e0 = 0.96(운반거리20m) q1 = 5.50㎥×0.96 = 5.28㎥, f = 1/1.25 = 0.80 Cm = 20m/40m/분+20m/43m/분+0.25분 = 1.22분 Q = (60분×5.28㎥×0.80×0.60)/1.22분 = 124.64㎥/hr 3. 적재(로더(타이어),3.50㎥) q1 = 3.50㎥, L=1.25,f=1/1.25=0.80, Es=0.60, K=1.00 t1 = 9초, t2 = 14초, lo = 8m, m = 1.8초/m Cms = 1.8m×8m+9초+14초 = 37.4 초 Q = (3600초×3.50㎥×1.00×0.80×0.60)/37.40초= 161.71㎥/hr 4. 운반(덤프15ton+자동덮개) T = 15ton , rt = 1.60ton/㎥ , E = 0.90 qt = 15ton/1.60ton/㎥×1.25 = 11.72㎥ N = 11.72㎥/(3.50㎥×1.00) = 3.35회 t1 = 37.40초×3.35회/(60분×0.60) = 3.48분 t2 = (0.01㎞/15+0.01㎞/20+0.05㎞/35㎞/hr×2)×60분 = 0.24분 t3 = 0.80분 , t4 = 0.42분, t5 = 0.50분, t6 = 1.50분 Cmt = 3.48분+0.24분+0.80분+0.42분+0.50분+1.50분 = 6.94분 OH = 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할때는 적 재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 60분×11.72㎥×0.80×0.90/6.94분 = 72.95㎥/hr ※ 도로 및 현장여건에 따라 덤프15톤 및 24톤 적용	[공통]8-2-1 불도저 [공통]8-2-5 로더 [공통]8-2-8 덤프트럭
c-2	순성토운반 (토사,덤프) (D/T=24ton, ℓ = 60m이상)	㎥	1. 적용기준 1) 벌개제근(별도) 2. 깎기 및 집토(불도저운반 32ton) D = 20m , L = 1.25 , E = (0.65+0.55)/2 = 0.60 V1 = 40m/분(전진1단) , V2 = 43m/분(후진1단) q0 = 5.50㎥ , e0 = 0.96(운반거리20m) q1 = 5.50㎥×0.96 = 5.28㎥, f = 1/1.25 = 0.80 Cm = 20m/40m/분+20m/43m/분+0.25분 = 1.22분 Q = (60분×5.28㎥×0.80×0.60)/1.22분 = 124.64㎥/hr 3. 적재(로더(타이어),3.50㎥) q1 = 3.50㎥, L=1.25,f=1/1.25=0.80, Es=0.60, K=1.00 t1 = 9초, t2 = 14초, lo = 8m, m = 1.8초/m Cms = 1.8m×8m+9초+14초 = 37.4 초 Q = (3600초×3.50㎥×1.00×0.80×0.60)/37.40초= 161.71㎥/hr 4. 운반(덤프24ton+자동덮개) T = 24ton , rt = 1.60ton/㎥ , E = 0.90 qt = 24ton/1.60ton/㎥×1.25 = 18.75㎥ N = 18.75㎥/(3.50㎥×1.00) = 5.36회	[공통]8-2-1 불도저 [공통]8-2-5 로더 [공통]8-2-8 덤프트럭

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
			t1 = 37.40초×5.36회/(60분×0.60) = 5.57분 t2 = (0.01㎞/15+0.01㎞/20+0.05㎞/35㎞/hr×2)×60분 = 0.24분 t3 = 0.80분 , t4 = 0.42분, t5 = 0.50분, t6 = 1.50분 Cmt = 5.57분+0.24분+0.80분+0.42분+0.50분+1.50분 = 9.03분 OH = 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 60분×18.75㎥×0.80×0.90/9.03분 = 89.70㎥/hr ※ 도로 및 현장여건에 따라 덤프15톤 및 24톤 적용
3	여성토 철거
a	땅깎기 (토사,기계,소규모)	㎥	1. 작업조건 1) 토공 장비에 의한 깎기, 집토 작업을 포함한다. 2) 일당 시공량 Q = 310㎥/일 2. 중기사용료 1) 굴착기(1.0㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일	[공통] 3-2-3 흙깎기 (기계)
b	땅깎기 (토사,기계,중규모)	㎥	1. 작업조건 1) 토공 장비에 의한 깎기, 집토 작업을 포함한다. 2) 일당 시공량 Q = 560㎥/일 2. 중기사용료 1) 불도저(19ton): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일	[공통] 3-2-3 흙깎기 (기계)
c	땅깎기 (토사,기계,대규모)	㎥	1. 작업조건 1) 토공 장비에 의한 깎기, 집토 작업을 포함한다. 2) 일당 시공량 Q = 930㎥/일 2. 중기사용료 1) 불도저(32ton): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일	[공통] 3-2-3 흙깎기 (기계)
4	배수 유도관 설치
a	유도관 설치 (S형다발관,D150㎜)	m	1. 재 료 비 1) S형다발관(D150㎜):1.02m 2) 소켓관(D150㎜):1개/4m/개 = 0.25m 2. 설 치 비 1) 배 관 공:0.017인/개/4m/개 = 0.0043인/m 2) 보통인부:0.017인/개/4m/개 = 0.0043인/m	'2008 건설표준품셈 19-13-1 나선형 소켓접합

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
b	강관부설 및 접합(D600㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5ton 트럭20㎞이내) 1) 적 재 : 10.5ton/대/0.545/ton/본 = 19회/대 - 묶 기 : 30초/회×19회/대 = 570초/대 - 회 전 : 30초/회×19회/대 = 570초/대 - 풀 기 : 30초/회×19회/대 = 570초/대 계 : (570.00초/대+570.00초/대+570.00초/대)/60분 = 29분/대 2) 운반비 q1 = 6.00m/본×19회/대 = 114m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 29분/대(적재), t3 = 29분/대(적하), t4 = 0.42분대, t6 = 1.5분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차)×60분= 68.57분/대 Cm = 29분/대+68.57분/대+29분/대+0.42분/대+1.50분/대 = 128.49분/대 OH = 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 128.49분/대/(60분×1.00×0.90)/114.00m대 = 0.021hr/m 3) 하차비(10ton 크레인) q0 = 6.00m/본, f = 1.00, E = 0.50 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30처/본(풀기) Cm = 30초/본/+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90.00초/본/(3600초×1.00×0.50)/6.00m/본 = 0.008hr/m 4) 인건비(트럭위1인+트럭아래1인) ∴ 1일 실작업시간 : 480분/일/60분/hr = 8hr/일 보통인부 : 2인/일/8hr/일×0.008hr/m = 0.002hr/m 2. 강관부설 1) 재료비(D600mm×6T) : 1.05m 2) 고재대 : 535.86kg/본/6.0m/본×0.05m = 4.465kg 3) 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 6본/일 ① 배관공(수도) : 2인/일 / Q 본/일 / 6.00m/본 ② 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 6.00m/본 ③ 양중장비 (예시:크레인 10ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 6.00m/본 ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다. 3. 강관접합(A종 예시) 1) 노무비 ∴ 일당 시공량 Q = 5.0개소/일 - 용접공 : 2인/일 / Q 개소/일 / 6.00m/본 2) 공구손료 및 경장비(용접기, 발전기 등)의 기계경비 : 인력품의 6% ※ 용접접합에 필요한 자재는 별도 계상한다. 4. 강관도장(외부) : 필요시 적용 1) 재료비 : 설계수량 적용 2) 노무비 - 도 장 공 : 0.30인/개소/6.00m/본 = 0.050인/m - 보통인부 : 0.07인/개소/6.00m/본 = 0.012인/m	[토목]6-3-1 강관부설 [토목]6-3-2 강관용접접합 [토목]6-3-3 강관도장

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
c	강관 절단 (D600㎜)	개소	1. 강관절단 (A종 예시) 1) 용접공:0.46인/개소 2. 공구손료 및 경장비(절단장비 등)의 기계경비 : 인력품의 2%	[토목]6-3-4 강관절단
d	부직포설치 (300g/㎡)	㎡	1. 재 료 비 1) 부직포(300g/㎡):1.05㎡ 2) 잡재료비(재료비의 2%) 2. 인건비 1) 특별인부 : 0.07인/100㎡ = 0.0007인/㎡ 2) 보통인부 : 0.04인/100㎡ = 0.0004인/㎡ 3) 굴착기(0.40㎥) : 0.10hr/100㎡ = 0.001hr/㎡ 4) 공구손료 및 경장비(봉합기)의 기계경비:인력품의 4%	[공통]5-2-1 매트부설
5	매 트 깔 기
5.1	샌드매트깔기 (T = 0.50m)	㎥	1. 모래 구입 및 운반 1) 두 께:0.50m 2) 시공면적:1.00㎡ 3) 보정계수:0.20 4) 모 래 량:(1.00㎡×0.50m×(1+0.20))/0.50m = 1.2㎥ 2. 장비사용료(습지불도저 13ton) D = 20m , L = 1.15 , C = 0.90 , E = 0.70 q0 = 1.50㎥ , e0 = 0.96(운반거리20m) V1 = 55m/분(전진2단) , V2 = 70m/분(후진2단) q1 = 1.50㎥×0.96 = 1.44 ㎥ , f = 0.90/1.15 = 0.78 Cm = 20m/55m/분+20m/70m/분+0.25분 = 0.9분 Q = (60분×1.44㎥×0.78×0.70)/0.90분 = 52.42㎥/hr 3. 살수비(물탱크 5500ℓ) q1 = 5500ℓ , E = 0.90 , L = 1.0㎞ , V = 15㎞/hr OMC = 13%(최적함수비) , NMC = 8%(자연함수비) t1 = 5분(흡입준비) , t3 = 10분(흡입시간) t4 = 5분(살수대기) , t5 = 20분(살수시간) t2 = 1.0㎞/15㎞/hr×2×60분 = 8분(운반시간) Cm = 5분+8.00분+10분+5분+20분 = 48분 Q1 = 60분×5500ℓ×0.90/48.00분 = 6187.5ℓ/hr Ws = (1600㎏/㎥×100)/113 = 1415.93㎏/㎥ W = 1415.93㎏/㎥×(0.13-0.08) = 70.8㎏/㎥(살수량) Q = 6187.50ℓ/hr/70.80㎏/㎥ = 87.39㎥/hr 4. 다짐(진동롤러,자주식 10ton) V = 4㎞/hr , W = 1.90m , E = 0.60 f = 1.00 , N = 6회 , D = 0.30m Q = (1000×4㎞/hr×1.90m×0.30m×0.60×1.00)/6회 = 228㎥/hr	[공통]8-2-1 불도저 [공통]8-3,4 물탱크 [공통]8-2-9 롤러
5.2	P.P 매트부설
a	P.P 매트부설 (T = 50 kN/m)	㎡	1. 재료비 1) P.P 매트 : 1.10㎡(할증) 2) P.P로프(9mm) : 0.98m 3) 모래주머니 : 0.64개 4) 철근(D19mm) : 0.19m 2. 설치비 1) 특별인부 : 0.0009인/㎡ 2) 보통인부 : 0.0005인/㎡ 3) 굴착기(0.40㎥) : 0.0015hr/㎡ 4) 공구손료 및 경장비(봉합기)의 기계경비:인력품의 4%	[공통]5-2-1 매트부설

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
b	P.P 매트부설 (T = 70 kN/m)	㎡	1. 재료비 1) P.P 매트 : 1.10㎡(할증) 2) P.P로프(9mm) : 0.98m 3) 모래주머니 : 0.64개 4) 철근(D19mm) : 0.19m 2. 설치비 1) 특별인부 : 0.0009인/㎡ 2) 보통인부 : 0.0005인/㎡ 3) 굴착기(0.40㎥) : 0.0015hr/㎡ 4) 공구손료 및 경장비(봉합기)의 기계경비:인력품의 4%	[공통]5-2-1 매트부설
c	P.P 매트부설 (T = 100 kN/m)	㎡	1. 재료비 1) P.P 매트 : 1.10㎡(할증) 2) P.P로프(9mm) : 0.98m 3) 모래주머니 : 0.64개 4) 철근(D19mm) : 0.19m 2. 설치비 1) 특별인부 : 0.0009인/㎡ 2) 보통인부 : 0.0005인/㎡ 3) 굴착기(0.40㎥) : 0.0015hr/㎡ 4) 공구손료 및 경장비(봉합기)의 기계경비:인력품의 4%	[공통]5-2-1 매트부설
5.3	P.E.T 매트부설
a	P.E.T 매트부설 (T = 150 kN/m)	㎡	1. 재료비 1) PE.T 매트 : 1.10㎡(할증) 2) P.P로프(9mm) : 0.98m 3) 모래주머니 : 0.64개 4) 철근(D19mm) : 0.19m 2. 설치비 1) 특별인부 : 0.0009인/㎡ 2) 보통인부 : 0.0005인/㎡ 3) 굴착기(0.40㎥) : 0.0015hr/㎡ 4) 공구손료 및 경장비(봉합기)의 기계경비:인력품의 4%	[공통]5-2-1 매트부설
b	P.E.T 매트부설 (T = 200 kN/m)	㎡	1. 재료비 1) PE.T 매트 : 1.10㎡(할증) 2) P.P로프(9mm) : 0.98m 3) 모래주머니 : 0.64개 4) 철근(D19mm) : 0.19m 2. 설치비 1) 특별인부 : 0.0009인/㎡ 2) 보통인부 : 0.0005인/㎡ 3) 굴착기(0.40㎥) : 0.0015hr/㎡ 4) 공구손료 및 경장비(봉합기)의 기계경비:인력품의 4%	[공통]5-2-1 매트부설
c	P.E.T 매트부설 (T = 250 kN/m)	㎡	1. 재료비 1) PE.T 매트 : 1.10㎡(할증) 2) P.P로프(9mm) : 0.98m 3) 모래주머니 : 0.64개 4) 철근(D19mm) : 0.19m 2. 설치비 1) 특별인부 : 0.0009인/㎡ 2) 보통인부 : 0.0005인/㎡ 3) 굴착기(0.40㎥) : 0.0015hr/㎡ 4) 공구손료 및 경장비(봉합기)의 기계경비:인력품의 4%	[공통]5-2-1 매트부설

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
6	연약지반 처리공법
a	샌드 드레인 (D400㎜,L=20m이하)	m	1. 작업조건 1) 총 본 수:1000본(설계수량) 2) 샌드매트천공길이:500m/1,000본=0.5m/본(설계수량) 3) 샌드드레인천공길이:10,000m/1,000본=10.0m/본(설계수량) 4) 총천공길이:10,500m(설계수량) 5) 본당천공길이:10,500m/1,000본=10.5m/본 2. 시공능력 T1(준비시간:본 작업전 이동, 위치잡기) = 2분 T2(시공시간) = 10.5m(천공길이)×0.6분/m= 6.3분 f = 0.8 , T = (2분+6.3분)/0.8 = 10.38분/본 Q = 60분×10.5m/10.38분/본 = 60.69m/hr 3. 작업조 편성 1) 보링공:1인/8hr/60.69m/hr = 0.0021인/m 2) 특별인부:1인/8hr/60.69m/hr = 0.0021인/m 3) 보통인부:1인/8hr/60.69m/hr = 0.0021인/m 4. 장비편성 1) 진동파일해머(90㎾):60.69m/hr 2) 크레인(무한궤도)(50ton):60.69m/hr 3) Leader(31m):60.69m/hr 4) Casing(22m):60.69m/hr 5) 공기압축기(10.3㎥/min):60.69m/hr 6) 발전기(350㎾):60.69m/hr 7) 로더(1.34㎥):60.69m/hr 8) 부속장비(스킵버킷,공기탱크,자동기록장치 등)의 기계경비 및 소모자재(용접봉,호스 등) : 인력품의 9%로 계상 5. 모래 구입 투입 1) 모래 구입 및 운반 ∴ 수량산출:(π×0.40m^2/4×10.00m×1.10(할증))/10.50m = 0.132㎥/m 2) 모래투입(로더(타이어),1.34㎥) : 장비편성에 포함 6. 장비조립․해체 조건 1) 천공길이:10,500m(설계수량) 2) 장비조립․해체횟수:2회(설계수량) 3) 장비횟수당 평균길이:10,500/2회 = 5,250m/회 7. 장비조립및해체 1) 인 건 비 ① 기계설비공:1인/회×3일/5,250m/회 = 0.0006인/m ② 특별인부:2인/회×3일/5,250m/회 = 0.0011인/m ③ 용 접 공:1인/회×3일/5,250m/회 = 0.0006인/m 2) 중기사용료 크레인(무한궤도)(25ton):1대/회×3일×8hr/일/5,250m/회 = 0.0046hr/m	2020년 건설표준품셈 [공통]5-2-4 모래말뚝

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
b	모래다짐말뚝 (D700㎜,L=20m이하)	m	1. 작업조건 1) 총 본 수:1000본(설계수량) 2) 샌드매트천공길이:500m/1,000본=0.5m/본(설계수량) 3) 샌드콤팩션천공길이:10,000m/1,000본=10.0m/본(설계수량) 4) 천공길이:10,500m(설계수량) 5) 본당천공길이:10,500m/1,000본=10.5m/본 2. 시공능력 T1(준비시간:본 작업전 이동, 위치잡기) = 2분 T2(시공시간) = 10.5m(천공길이)×1.0분/m= 10.5분 f = 0.8, T = (2분 + 10.5분) / 0.8 = 15.63분/본 Q = 60분×10.5m/15.63분/본 = 40.31m/hr 3. 작업조 편성 1) 보링공:1인/8hr/40.31m/hr = 0.0031인/m 2) 특별인부:1인/8hr/40.31m/hr = 0.0031인/m 3) 보통인부:1인/8hr/40.31m/hr = 0.0031인/m 4. 장비편성 1) 다짐말뚝(100ton):40.31m/hr 2) 진동파일해머(90㎾):40.31m/hr 3) 공기압축기(17㎥/min):40.31m/hr 4) 발전기(350㎾):40.31m/hr 5) 로더(1.34㎥):40.31m/hr 6) 부속장비(스킵버킷,공기탱크,자동기록 장치 등)의 기계경비 및 소모자재 (용접봉,호스 등) : 인력품의 9%로 계상 5. 모래 구입 및 투입 1) 모래 구입 및 운반 ∴ 수량산출:(π×0.70m^2/4×10.00m×1.10(할증))/10.50m = 0.403㎥/m 2) 모래투입(로더(타이어),1.34㎥) : 장비편성에 포함	[공통]5-2-4 다짐말뚝
c	플라스틱 보드 드레인 (PBD)	m	1. 시공능력 1) 총 연 장:10000m(설계수량) 2) 총 본 수:1000본(설계수량) 3) 평균길이:10000m/1000본 = 10m/본 4) 작업효율:0.75 (시설물 및 지형조건등에 의한 작업방해 없이 연속적인 천공이 가능한 경우에는 항만/매립지의 작업효율 0.85 적용가능) 5) 준비 및 이동시간:27초 N<5, N>5구분하여 타입속도 비율 산정 6) 표준타입속도:(2.54+1.52)/2=2.03m/초 7) 표준인발속도:(2.33+1.40)/2=1.87m/초 8) 타입시간:10.00m/2.03m/초 = 4.93초 9) 인발시간:10.00m/1.87m/초 = 5.35초 Cm = 27초+4.93초+5.35초 = 37.28초 Q = 3600초×10.00m×0.75/37.28초 = 724.25m/hr 2. 재료비 1) Drain Board:((10.00m+0.50m)×1.04(할증))/10.00m=1.092m 2) Shoe:1개 3. 작업조 편성 1) 특별인부:2인/8hr/724.25m/hr = 0.00034인/m 2) 보통인부:1인/8hr/724.25m/hr = 0.00017인/m 4. 항타 및 인발 1) PBD 천공기((147Kw, 38m):724.25m/hr 2) Steel Plate(6100×6100×30㎜):724.25m/hr 3) 부속장비(자동기록기,계측기,멘들릴 등)의 경비:인력품의 15%	[공통]5-2-3 플라스틱 보드드레인(PBD)

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
d	메나드 드레인 (수평,D50㎜)	m	1. 시공능력 ∴ 로더(타이어) 1.34㎥ + 보통인부 5인이 1500m 부설 2. 재료비(Menard cylindrical drain,D50㎜):1.08m(할증) 3. 중기사용료(로더 1.34㎥):8hr/1500m = 0.0053hr/m 4. 작업조편성(보통인부):5인/1500m = 0.0033인/m 5. Drain 배열 및 고정 1) 보통인부:2인/1500m = 0.0013인/m 2) 고정핀(철선 #8) ∴ 수량산출:0.50m×0.10㎏/m/2.50m(간격으로설치) = 0.020㎏	견적단가
e	메나드 드레인 (수직,D50㎜)	m	1. Casing 제작 1) 총 연 장:10000m 2) 총 본 수:1000본 3) 평균길이:10000m/1000본 = 10m/본 2. 시공능력 L = 10.00m(평균길이)+0.50m(샌드매트두께)=10.5m(타설길이) Cm = 2+0.012×10.50m = 2.13분 , E = 0.90 Q = 60분×10.50m×0.90/2.13분 = 266.20m/hr	견적단가
f	장비조립 및 해체	회	1. 작업조건 1) 본 품은 PBD천공기를 1회 조립 및 해체하는 기준이며, 시공조건(외부 반입/반출)에 따라 조립 ․ 해체를 반복 적용한다 2) 크레인 규격은 양중능력 및 현장조건에 고려하여 적용한다. 2. 장비조립 및 해체(조립2일,해체1일) 1) 인 건 비 ① 기계설비공: 1인×3일 ② 철 공: 2인×3일 ③ 특별 인부: 1인×3일 2) 중기사용료 ① 크레인:1대×3일 3) 공구손료 및 경장비(발전기 등)의 기계경비: 인력품의 3%로 계상	[공통]5-2-3 플라스틱 보드드레인(PBD)
g	장비조립 및 해체 （다짐말뚝,외부 반출/반입）	회	1. 작업조건 1) 본 품은 말뚝 시공장비(전용장비 조립 및 부대설비 설치 등)를 1회 조립 및 해체하는 기준이다. 2) 크레인 규격은 양중능력 및 현장조건에 고려하여 적용한다. 2. 장비조립 및 해체(조립3일,해체1.5일) 1) 인 건 비 ① 기계설비공: 1인×4.5일 ② 철 공: 2인×4.5일 ③ 특별 인부: 1인×4.5일 2) 중기사용료 ① 크레인:1대×4.5일 3) 공구손료 및 경장비(발전기,전동드릴 등)의 기계경비: 인력품의 3%로 계상	[공통]5-2-4 다짐말뚝

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
h	장비조립 및 해체 （다짐말뚝,작업구간 이동）	회	1. 작업조건 1) 본 품은 말뚝 시공장비(전용장비 조립 및 부대설비 설치 등)를 1회 조립 및 해체하는 기준이다. 2) 크레인 규격은 양중능력 및 현장조건에 고려하여 적용한다. 2. 장비조립 및 해체(조립1.5일,해체1일) 1) 인 건 비 ① 기계설비공: 1인×2.5일 ② 철 공: 2인×2.5일 ③ 특별 인부: 1인×2.5일 2) 중기사용료 ① 크레인:1대×2.5일 3) 공구손료 및 경장비(발전기,전동드릴 등)의 기계경비: 인력품의 3%로 계상	[공통]5-2-4 다짐말뚝
7	품질관리비
a	Mat시험비 (20000㎡마다)	회	∴ 시험횟수산출:(PP Mat수량+PET Mat수량)/20000㎡ = 회 1. 인장강도및신율: 회 2. 봉합강도시험: 회 3. 투수시험: 회 4. 무게측정시험: 회	견적단가
b	Sand Mat시험 (1000㎥마다)	회	∴ 시험횟수산출:Sand Mat수량/1000㎥ = 회 1. 체가름시험:회 2. 체통과율시험(0.08㎜):회	견적단가
c	드레인보드시험비 (20000㎡마다)	회	∴ 시험횟수산출:PP Mat수량/20000㎡ = 회 1. 인장강도및신율시험:회 2. 무게측정시험:회 3. 유효구멍크기시험:회 4. 내약품성시험:회 5. 투수시험:회	견적단가
d	실내토질시험비	회	1. 입도시험비:설계수량(회) 2. 액성한계시험비:설계수량(회) 3. 소성한계시험비:설계수량(회) 4. 비중시험비:설계수량(회) 5. 함수시험비:설계수량(회) 6. 일축압축강도시험비:설계수량(회) 7. 압밀시험비:설계수량(회) 8. 비압밀비배수시험비(UU시험):설계수량(회) 9. 압밀비배수시험비(CU시험):설계수량(회)	견적단가

RECORD HISTORY

Rev.0('14.12.31) 철도건설공사 수량 및 단가산출 표준의 구성체계를 KR CODE집에 맞추어 항목별 체계로 개정하여 사용자가 손쉽게 이용하는데 목적을 둠.

Rev.1('15.12.31) 2015년 하반기 건설공사 표준품셈 개정분을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.2('16.04.30) 2016년 상반기 건설공사 표준품셈 개정분을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.3('16.12.31) 2016년 하반기 건설공사 표준품셈 개정분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.4('17.05.29) 2017년 상반기 건설공사 표준품셈 개정분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.5('17.09.12) 2017년 하반기 건설공사 표준품셈 개정분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.6('18.03.19) 2018년 상반기 건설공사 표준품셈 개정분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.7('19.04.02) 2019년 상반기 건설공사 표준품셈 개정분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.8('21.05.18) 2021년 상반기 표준품셈 개정, 감사처분, 현장VOC 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.9('21.12.29) 공단 명칭, CI 변경분 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev10('23.03.31) 2023년 상반기 건설공사 표준품셈 개정분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev11('26.01.14) 2025년 건설공사 표준품셈 개정분, 감사처분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공