실명제 사업내역서

사업실명제

등록번호

2020-11

담당부서

작성자

기술본부 / 전철처

강현구/042-607-3513/10000852@kr.or.kr

사 업 명

광양~진주 복선전철화 사업

사업개요

및

추진경과

○ 노선도

○ 사업개요

- 사업목적 : 광양항 개발에 따라 증가하는 물동량 수송을 위해 경전선 광양~진주간의 선로용량 확충

- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년

- 총사업비 : 2,402억원

○ 주요내용

- 전  력 : 송변전 1식, 전철전력 51.5km

- 신  호 : ATP 57km

- 통  신 : 역무용통신설비 1식

- 시  설 : 궤도 캔트조정 19.4,  분기기 개량 12틀, 건축 5동

○ 추진경과

- `00. 3.~12.      기본계획 및 타당성 조사 (B/C = 1.12)

- `03. 6~2006.12.  노반 기본 및 실시설계 시행

- `10. 1.∼12.     (간이)타당성재조사

* 수요를 고려한 사업의 적정규모를 결정하여 사업추진 필요

- `11. 4.       제2차 국가철도망구축계획(2011~2020, 국토해양부)

* 일반철도 신규사업 중 전철화사업 계획됨

- `15. 1.       광양~진주 전철화 예비타당성조사 의뢰

- `16. 7. 15.    광양~진주 복선화사업 개통

- `17. 09. 28.    전철화사업 예비타당성조사 결과

(B/C 1.54, AHP 0.704, KDI⇒기재부)

- `18. 5.         실시설계 발주(궤도, 전력, 통신, 신호)

- ‘19. 11.   사업실시계획 승인

- ‘19. 12.   공사(전철전력, 신호통신) 및 감리(전철전력) 착공

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 처  장 박민주

- 최종 결재자 : 이사장 김상균

○ 사업관련자

구 분	성명	직급	수행기간	담당업무
기술본부	박민주	본부장	’18.04∼현재	업무 총괄
사업관리	양인동	처장	’19.08∼현재	사업 총괄
사업관리	박병곤	부장	’18.05∼현재	사업 담당
설계	강인석	부장	’19.09∼현재	건 축 담당
설계	박병귀	부장	’20.01∼현재	송변전 담당
설계	오재훈	부장	’19.09∼현재	전차선 담당
설계	정선호	부장	‘20.02.∼현재	배 전 담당
설계	윤학선	부장	`19.01~현재	신 호 담당
설계	이정호	부장	’20.02∼현재	통 신 담당
설계	박종승	부장	’19.01∼현재	궤 도 담당

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 국토부 철도국 : 철도건설과장 임종일, 사무관 천홍식

○ 계약상대자

구 분	설계	공사	감리
궤 도	㈜동명기술공단종합건축사사무소
건 축	-
전철전원	세종기술㈜
전철전력	세종기술㈜
신 호	벽산파워㈜
통 신	문엔지니어링㈜

추진실적

○ ‘18.  2.   종합추진계획 수립

○ ‘18.  5.   실시설계 발주(궤도, 전력, 통신, 신호)

○ ‘19.  3.   건축분야(변전건물) 설계 발주

○ ‘19.  8.   설계완료 및 실시설계결과 총사업비 협의완료

○ ‘19. 11.   사업실시계획 승인

○ ‘19. 12.   공사(전철전력, 신호통신) 및 감리(전철전력) 착공