실명제 사업 내역서

사업실명제

등록번호

2020-05

담당부서

작성자

(건설본부 / 일반철도처)

(김규/042-607-3483/zemy1629@kr.or.kr)

사 업 명

동해선 포항~삼척 철도건설사업

사업개요

및

추진경과

ㅇ 노선도

ㅇ 사업개요

- 사업내용 : 동해선 포항∼삼척간 166.3km 단선철도 건설

- 사업기간 : ˊ02년 ∼ ˊ22년

- 총사업비 : 3조 4,081억원 (국고 100%)

- 사업효과 : 환동해권 철도망으로 구축 국가기간철도망 확충, 동해안 관광통행 수요분담 및 지역개발 촉진

(선로용량 : 17회/일, 편도)

* 포항～삼척 1시간 50분 단축(버스 3시간 10분 → 열차 1시간 20분)

ㅇ 추진경과

- ˊ 96. 7∼ˊ 97. 5 : 타당성 조사

- ˊ 00. 3∼ 12    : 기본계획수립 (철도청, B/C 1.054)

- ˊ 04.12    : 노반 기본설계 완료

- ˊ 06.12    : 노반 실시설계 완료

- ˊ 08. 3.20 : 사업실시계획(제1~3공구) 승인 및 노반1공구 착공

- ˊ09. 4.27  : 사업실시계획 승인(제4공구~16공구)

- ˊ 09. 5. 4 : 1단계 구간(포항∼영덕) 노반 착공(2∼5공구)

- ˊ 10. 1∼ ˊ 11. 3  : 기재부 간이타당성재조사 (KDI, B/C 0.31)

- ˊ 14.11∼ ˊ 15. 2  : 2단계 구간(영덕∼삼척) 노반 착공 (6∼17공구)

- ˊ 15. 3.31 : 노반 1공구 준공( ́15.4.2 포항역 KTX 영업 개시)

- ˊ 18. 1.26 : 1단계 구간(포항~영덕) 개통(영업 개시)

* 영덕～포항 26분 단축(버스 60분 → 열차 34분), 운행횟수 : 14회/일

* 영덕～서울 1시간 16분 단축

(고속버스 4시간 20분 → 무궁화+고속열차(KTX) 환승 3시간 4분)

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

ㅇ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 처장 장봉희

- 최종 결재자 : 이사장 김상균

ㅇ 사업관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
건설본부	이종윤	본부장	'20.5.11~현재	건설본부 사업 업무 총괄
	한상연	처 장	'19.2.25~현재	일반철도처 소관사업 업무 총괄
	이규삼	부장	'20.1.29~현재	포항∼삼척 철도건설 건설사업관리업무
영남본부	이계승	본부장	'20.9.23~현재	영남본부 소관사업 업무총괄
	이창현	단 장	'20.1.2∼현재	동해북부사업단 소관사업 업무총괄
	장동삼	부 장	'20.1.29~현재	포항~삼척 PM1 사업총괄
	유일륜	부 장	'20.1.29~현재	포항~삼척PM2 사업총괄

다른기관 또는

민간인 관련자

ㅇ 국토교통부 : 철도건설과장 김민태, 담당사무관 신용섭

ㅇ 설계사 : ㈜KRTC, ㈜신성ENG 등 7개사

ㅇ 시공사 : (주)대우건설, ㈜포스코건설, GS건설(주) 등 11개사

ㅇ 감리사 : ㈜수성ENG, ㈜대한콘설탄트, 유신 등 9개사

추진실적

ㅇ ‘18.01.   1단계 구간(포항~영덕) 개통(영업 개시)