서해선 복선전철 공정률(2021년 4월)

□ 공정현황

분야		공정률(%)
계		74.9
설계		58.4
감리		49.3
용지		95.7
노반	1공구	87.8
	2공구	91.4
	3공구	91.3
	4공구	94.4
	5공구	94.6
	6공구	82.2
	7공구	97.7
	8공구	93.2
	9공구	87.0
	10공구	86.6
	기타	73.7
	소계	88.7
궤도		45.3
건물		22.3
전력		18.3
통신		12.1
신호		10.6
차량기지		44.2
부대		55.1