<경부고속철도>

□ 사업개요

[ 노선도 ]

○ 사업내용 : 169.5㎞ 신선 건설

- 동대구~부산 128.6km, 대전․대구도심 40.9km(지상건설)

- 역사 7개역(증축 3개역 포함) 및 차량기지

중정비시설

○ 사 업 비 : 7조 7,496억원

○ 사업기간 : 2002~2014년(대구이남 2010년, 대전․대구도심 2014년)

○ 사업비 집행계획

(단위 : 억원)

구 분	총소요	‘09 까지	‘10 예산	‘11 예산	‘12년이후
계	77,496	50,248 (64.8%)	8,969 (11.6%)	3,600 (4.6%)	14,679 (20.0%)
국 고	37,645	21,217	2,500	3,200	10,728
자 체	39,851	29,031	6,469	400	3,951

□ 공정추진실적

❍ '11. 3월말 공정 : 75.8% (목표 75.5% 대비 100.4%)

❍ ‘11년 월별/구간별 공정계획 및 실적

(단위:%)

구 분		2011. 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	계획	74.7	74.9	75.5	76.0	76.5	77.2	77.7	78.3	78.9	79.5	80.1	81.1
	실적	74.7	75.3	75.8
	대비	100.0	100.5	100.4
도심 구간	계획	40.4	40.9	42.3	43.3	44.5	45.8	46.8	48.0	49.4	50.4	51.8	54.0
	실적	40.4	41.6	42.5
	대비	100.0	101.7	100.5
연결선	계획	3.5	3.5	3.7	3.9	5.7	7.6	9.5	11.4	13.1	14.7	16.4	17.9
	실적	3.5	3.6	3.6
	대비	100.0	102.8	97.3
대구이남	실적	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

※ 2010년 개통구간 추진현황

분 야	완료일정	비 고
노 반	2009. 12월	'09. 9월 본선구간 완료 후 궤도로 인계 완료
궤 도	2010. 3월	'10. 2.28 부설 완료 후 전기분야로 인계 완료
시 스 템	2010. 5월
종합시험운행	2010. 6 ～ 10월	차량(KTX)투입 : ‘10. 6. 3
완공․개통	2010. 11월

❍ 분야별 세부공정현황

(단위:%)

구간	분 야	10년 까지 (A)	11년 계획	11년 누계계획	11년 실적				누 계
					3월	3월 까지			계획 (A+b)	실적 (A+B)	대비(%)
						계획 (b)	실적 (B)	대비(%)
합계	계	74.5	6.6	81.1	0.5	1.0	1.3	130.0%	75.5	75.8	100.4%
	용지	87.8	5.4	93.2	0.2	0.6	0.6	100.0%	88.4	88.4	100.0%
	노반	71.2	9.5	80.7	0.8	1.5	2.0	133.3%	72.7	73.2	100.7%
	궤도	77.7	3.2	80.9	0.1	0.4	0.2	50.0%	78.1	77.9	99.7%
	건물	85.8	1.2	87.0	0.0	0.1	0.6	600.0%	86.0	86.4	100.5%
	차량기지	97.0	0.0	97.0	-	-	-	0.0%	97.0	97.0	100.0%
	전력	66.0	8.8	74.8	0.6	1.3	1.0	76.9%	67.3	67.0	99.6%
	통신	52.6	0.4	53.0	0.1	-	0.1	0.0%	52.6	52.7	100.2%
	신호	80.8	2.1	82.9	0.2	0.4	0.5	125.0%	81.2	81.3	100.1%
도심 구간	계	40.0	14	54.0	0.9	2.3	2.5	108.7%	42.3	42.5	100.5%
	용지	80.0	20.0	100.0	0.2	2.2	0.8	36.4%	82.2	80.8	98.3%
	노반	28.6	21.6	50.2	1.9	3.8	4.9	128.9%	32.4	33.5	103.4%
	궤도	35.9	4.6	40.5	0.0	0.1	0.1	0.0%	36.0	36.0	100.0%
	건물	30.1	0.6	30.7	-	0.1	-	0.0%	30.2	30.1	99.7%
	전력	9.9	13.5	23.4	0.7	1.4	1.3	92.9%	11.3	11.2	99.1%
	통신	9.3	9.8	19.1	0.3	1.2	0.6	50.0%	10.5	9.9	94.3%
	신호	5.1	15.3	20.4	0.9	2.0	1.3	65.0%	7.1	6.4	90.1%
연결선	계	3.5	14.4	17.9	-	0.2	0.1	50.0%	3.7	3.6	97.3%
	용지	-	100.0	100.0	-	-		-	-	-	-
	노반	0.7	15.9	16.6	-	-		-	0.7	0.7	100.0%
	궤도	22.6	0.0	22.6	-	-		-	22.6	22.6	100.0%
	전력	2.8	0.0	2.8	-	-		-	2.8	2.8	100.0%
	통신	2.8	0.0	2.8	-	-		-	2.8	2.8	100.0%
	신호	31.5	0.0	31.5	-	-		-	31.5	31.5	100.0%
대구 이남	계	100.0	0	0.0	-	-	-	100.0%	-	-	100.0%