2023년 사업실명제 대상사업 사업내역서

사업실명제

등록번호

2023-01

담당부서

작성자

(건설본부/고속일반철도처)

(이준희/042-607-4723/leejh@kr.or.kr)

정 책 명

호남고속철도 2단계 (고막원∼목포) 건설사업

사업개요

및

추진경과

ㅇ 추진배경

- 경부고속철도와 더불어 우리나라의 양대 기간망으로서 교통 및 생활 축 형성

- 국토의 균형발전을 통해 효율적이고 합리적인 교통수단간 분담 및 연계가 가능한 통합 국가교통체계 구축

- 광주송정 이후 구간 고속철도시설 구축을 통해 지역주민의 철도교통 편의제공

ㅇ 추진기간 : 2017.11.30. ~ 2025.12.31.

ㅇ 총사업비 : 2조 6,921억원

ㅇ 주요내용

- 고막원~목포간 51.9km 철도건설

* (신선) 고막원∼무안공항∼임성리 44.6km
(기존선 활용) 임성리～목포 7.3km

ㅇ 추진경과

- 2015.09.07. : 호남고속철도 기본계획 변경고시(3차)

* 광주송정∼고막원 구간 기존선 고속화 우선 추진

- 2016.08.～2017.10. : 호남고속철도 2단계(고막원~목포) 사업계획 적정성 재검토(KDI)

- 2017.11.30. : 무안공항 경유노선 결정(기재부, 국토부)

- 2018.08.06. : 호남고속철도 기본계획 변경고시(4차)

* 고막원∼목포 구간 무안공항 경유노선 확정, 고시

- 2018.11.～2020.12. : 노반 기본 및 실시설계

- 2020.12.23. : 노반공사(1,3,6,7공구) 계약 체결 및 착수

- 2021.05.12. : 사업실시계획 승인 고시

* 국토교통부 고시 제2021-690호

- 2021.06.28. : 노반공사(2,4,5공구) 계약 체결 및 착수

- 2022.01.26. : 사업실시계획 변경 승인 고시

* 국토교통부 고시 제2022-48호

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

ㅇ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 국가철도공단 처장 김종호

- 최종 결재자 : 국가철도공단 이사장 김상균

ㅇ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
본사 건설본부	손병두	본부장	’22.8.29.~현재	건설본부 사업 업무 총괄
	한상연	처장	’23.1.18.~현재	고속일반철도 사업 업무총괄
	황병복	부장	`23.01.18∼현재	호남권 소관사업 업무 총괄
지역 호남본부	유성기	본부장	‘22.9.1.~현재	호남본부 사업 업무총괄
	김겸연	처장	‘22.3.2.~현재	호남고속철도 사업 관리업무 총괄
	변태윤	부장	‘22.3.2.~현재	호남고속철도 사업 노반업무 총괄

다른기관 또는

민간인 관련자

ㅇ 국토교통부 : 철도건설과장 오송천, 담당사무관 이동호

ㅇ 고막원~목포 구간

공구	설계사	시공사	감리사
1공구	㈜동일기술공사 등	㈜포스코건설 등	㈜서현기술단 등
2공구	㈜동일기술공사 등	동부건설㈜ 등	㈜서현기술단 등
3공구	㈜케이알티씨 등	두산중공업㈜ 등	㈜케이알티씨 등
4공구	㈜유신 등	디엘이앤씨㈜ 등	㈜동명기술공단 등
5공구	㈜서현기술단 등	㈜태영건설 등	㈜케이알티씨 등
6공구	㈜동명기술공단 등	현대엔지니어링㈜ 등	㈜도화엔지니어링 등
7공구	㈜삼보기술단 등	삼부토건㈜ 등	㈜수성엔지니어링 등

추진실적

ㅇ ‘18.  8. : 고막원~목포 구간 기본계획 확정

ㅇ ‘18. 11. : 노반분야 기본 및 실시설계 착수

ㅇ ‘20. 11. : 노반분야 기본 및 실시설계 완료

ㅇ ‘20. 12. : 고막원~목포 구간 기타공사(1,3,6,7공구) 착공

ㅇ ‘21.  6. : 고막원~목포 구간 기술제안(2,4,5공구) 착공