2024년 사업실명제 대상사업 사업내역서

사업실명제

등록번호

2024-17

담당부서

작성자

(건설본부 / 고속일반철도처)

(박영록/042-607-3963/funor@kr.or.kr)

정 책 명

평택∼오송 2복선화 건설사업

사업개요

및

추진경과

ㅇ 노선도

ㅇ 사업개요

- 사업목적: 선로용량이 부족한 평택∼오송 구간 용량 확충을 위해 고속철도 복선을 추가로 건설(2복선화)하여 고속철도 이용객 편의 제고

ㅇ 사업기간: 2020 ∼ 2027

ㅇ 총사업비: 3조 238,428백만원

ㅇ 주요내용

- 경부고속선 평택∼오송 간 46.4km 2복선 고속철도 신설

ㅇ 추진경과

- 2016. 8.∼2017. 12. : 사전타당성조사 시행(B/C 1.17, 공단)

- 2017. 9. : 예비타당성조사

- 2019. 1. : 국가균형발전 프로젝트 예타면제 대상사업 선정

- 2019. 2∼2019. 8. : KDI 사업계획적정성 검토

- 2019. 11.: 타당성조사 및 기본계획 착수

- 2020. 10.∼2021. 4. : 사업계획적정성 재검토(KDI)

- 2021. 6. : 기본계획 고시

* 국토교통부고시 제2021-911호

- 2021. 9.∼ : 전 공구 T/K(5개 공구) 입찰공고

* 제4공구는 유찰 2회로 입찰공고 재시행(2021. 11. 15.)하여 사업추진

- 2022. 5.∼ : T/K 실시설계 적격자 선정 후 실시설계 추진

- 2022. 5.∼2022. 7.: 궤도·시스템 분야 기본설계 착수

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

ㅇ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
본사 건설본부	손병두	본부장	’22.8.29.∼현재	건설본부 소관사업 업무총괄
	한상연	처 장	’23.1.18.∼현재	고속일반철도처 소관사업 업무총괄
	안성진	부 장	`23.1.18.∼현재	중부권부 소관사업 업무총괄
지역 충청본부	김윤양	본부장	‘22.9.1.∼현재	충청본부 소관사업 업무총괄
	백효순	단 장	‘24.2.19.∼현재	충청권사업단 소관사업 업무총괄
	김영철	부 장	‘23.1.18.∼현재	토목1부 소관사업 업무총괄

다른기관 또는

민간인 관련자

국토교통부
철도건설과장	오송천	담당사무관	이동호

ㅇ 공구별 업체 현황

구 분	제1공구	제2공구	제3공구	제4공구	제5공구
설계사	㈜삼안	㈜서현 기술단	㈜서현 기술단	㈜KRTC	㈜동부 엔지니어링
시공사	㈜대우건설	㈜SK 에코플랜트	㈜태영건설	㈜동부건설	㈜쌍용건설
감리사	㈜동명 기술공단	㈜유신	㈜도화 엔지니어링	㈜천일	㈜서현 기술단

추진실적

ㅇ 2019. 1.   : 국가균형발전 프로젝트 예타면제 대상사업 선정

ㅇ 2021. 6.   : 기본계획 고시

* 국토교통부고시 제2021-911호

ㅇ 2021. 9.∼ : 전 공구 T/K(5개 공구) 입찰공고

ㅇ 2022. 5.∼ : T/K 실시설계 적격자 선정 후 실시설계 추진

ㅇ 2023. 9. 8. : 사업실시계획 승인

* 국토교통부고시 제2023-504호