서해선 복선전철 공정률(2020년 11월)

□ 공정현황

분야		공정률(%)
계		69.7
설계		57.9
감리		41.4
용지		98.3
노반	1공구	87.7
	2공구	90.7
	3공구	93.0
	4공구	95.1
	5공구	92.6
	6공구	79.4
	7공구	94.9
	8공구	92.4
	9공구	84.9
	10공구	86.3
	기타	62.9
	소계	86.1
궤도		22.5
건물		7.5
전력		4.3
통신		3.0
신호		5.2
차량기지		21.2
부대		53.1