보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	자료배포일 2023. 9. 8. (금)	총 매수 2매
	배포부서 홍보실 (042-607-3085)
담당부서 충청본부 충청권사업단 / 단장 우기하, 토목3부장 김정석 (042-607-5121)
김한영 이사장, 이천~문경 철도건설사업 적기개통 당부 - 2024년 개통을 위한 공정·안전관리 등 공사현장 점검 -

□ 국가철도공단 김한영 이사장은 이천～문경 철도건설사업 공사현장을 직접 방문하여 철저한 공정․안전관리로 적기 개통에 만전을 기할 것을 당부하였다고 8일(금) 밝혔다.

○ 이천～문경 철도건설사업은 사업비 2조 5,467억 원을 투입해 여주에서 문경까지 93.2km 구간을 단선전철로 연결하는 사업으로,

○ 전체 구간 중 이천～충주(54km) 구간은 2021년 12월에 개통하여 열차(EMU-260)가 운행 중이며, 충주～문경(39.2km) 구간은 2024년 10월 개통 예정이다.

□ 국가철도공단 이사장(김한영)은 “이천～문경 철도구간은 수도권과 중부내륙을 이어 거제까지 이어지는 중앙간선축으로 전 구간이 개통되면 지역주민들의 교통편의 개선과 지역경제 발전에 기여할 것이다.”며,

○ “안전관리에 최선을 다하여 2024년 개통 일정에 차질이 없도록 하고 적극적인 공정추진에 만전을 기해주길 바란다.”고 당부했다.

참고		이천~문경 철도건설사업 사업개요

ㅇ (사업내용)	이천∼문경간 단선전철 건설(93.2km)
ㅇ (사업기간)	2005년∼2025년	ㅇ (총사업비)	2조 5,467억원
ㅇ (공 정 률)	89.6% (`23.08월)	ㅇ (23년예산)	1,487억원 (본)
ㅇ (개통일정)	1단계 (이천~충주) ’21.12월, 전 구간(이천~문경) ’24.10월

□ 사업효과

ㅇ 충북 및 경북 내륙지역 부존자원 개발 및 지역발전 도모

□ 추진경위

ㅇ ‘02. 7. ∼ ‘03. 6.	: 예비타당성조사
ㅇ ‘06.12.	: 문경∼충주∼여주 타당성조사 및 기본계획 완료
ㅇ ‘11. 8 ∼ ‘12. 8.	: 타당성재조사 (복선→단선, 이천～충주 0.81, 충주～문경 0.96)
ㅇ ‘14.12.	: 이천∼충주 노반공사 착공 (1, 3, 4공구)
ㅇ ‘14.12.	: 사업실시계획 고시
ㅇ ‘15. 6. 8.	: 이천∼충주 노반공사 착공 (5, 2공구)
ㅇ ‘17. 3. 6.	: 충주∼문경 노반공사 착공 (8, 6공구)
ㅇ ‘18. 5.	: 충주∼문경 노반공사 착공 (7, 9공구)
ㅇ ‘21.12.	: 1단계 구간 개통 (이천∼충주)
ㅇ ‘22. 6.	: 총사업비 기간 연장 (‘23 → ‘24)
ㅇ ‘23. 6.	: 총사업비 기간 연장 (‘24 → ‘25)