사 업 개 요

[ 노선도 ]

○ 사업내용 : 169.5㎞ 신선 건설

- 동대구~부산 128.6km, 대전․대구도심 40.9km(지상건설)

- 역사 7개역(증축 3개역 포함) 및 차량기지 중정비시설

○ 사 업 비 : 7조 7,972억원

○ 사업기간 : 2002~2014년(대구이남 2010년, 대전․대구도심 2014년)

○ 사업비 집행계획

(단위 : 억원)

구 분	총소요	‘08 까지	‘09 예산	‘10 예산	‘11년이후
계	77,972	35,389 (45.4%)	14,859 (19.0%)	8,969 (11.5%)	18,755 (24.1%)
국 고	37,887	16,532	4,685	2,500	14,170
자 체	40,085	18,857	10,174	6,469	4,585

□ 공정추진실적

❍ '10. 11월말 공정 : 73.0% (목표 73.0% 대비 100.0%)

❍ ‘10년 월별/구간별 공정계획 및 실적

(단위:%)

구 분		2010. 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	계획	66.7	67.3	67.9	68.6	69.3	70.2	70.8	71.3	71.9	72.4	73.0	74.5
	실적	66.6	67.6	68.0	68.7	69.3	70.5	70.9	71.2	72.4	72.9	73.0
	대비	99.9	100.4	100.1	100.1	100.0	100.4	100.1	99.9	100.6	100.7	100.0
대구 이남	계획	88.0	89.2	90.3	91.6	92.9	94.1	95.1	95.9	96.8	97.7	98.5	100
	실적	88.0	90.0	90.6	92.1	93.2	95.1	95.7	96.1	99.0	99.8	99.8
	대비	100	100.9	100.3	100.5	100.3	101.1	100.7	100.2	102.2	102.1	101.3
도심 구간	계획	30.8	31.3	31.9	32.4	33.0	34.4	35.0	35.5	36.2	36.8	37.5	40.0
	실적	30.6	31.4	31.7	32.2	32.7	33.9	34.6	35.1	35.4	35.8	36.3
	대비	99.4	100.3	99.4	99.4	99.0	98.5	99.1	98.9	97.8	97.3	97.1

※ 2010년 완공구간 추진일정

분 야	완료일정	비 고
노 반	2009. 12월	'09. 9월 본선구간 완료 후 궤도로 인계 완료
궤 도	2010. 3월	'10. 2.28 부설 완료 후 전기분야로 인계 완료
시 스 템	2010. 5월
종합시험운행	2010. 6 ～ 10월	차량(KTX)투입 : ‘10. 6. 3
완공․개통	2010. 11월