2024년 사업실명제 대상사업 사업내역서

사업실명제

등록번호

2024-19

담당부서

작성자

민자

(건설본부 / 광역민자철도처)

(이종권/042-607-3973/ljk@kr.or.kr)

재정

(건설본부 / 광역민자철도처)

(김지영/042-607-3975/10002088@kr.or.kr)

정 책 명

수도권 광역급행철도 B노선

사업개요

및

추진경과

ㅇ 사업개요

- 사업목적: 수도권 주민들의 교통복지 증진과 교통난 해소를 위해 주요 거점역을 30분대에 연결하는 광역급행철도망 구축

ㅇ 사업기간: 2022 ∼ 2030

ㅇ 총사업비: 7조 478억원

· (민자구간) 4조 2,894억원, (재정구간) 2조 7,584억원

ㅇ 주요내용

- (사업내용) 인천 인천대입구∼남양주 마석 간 82.7km, 정거장 14개소

· 민자구간(L=62.8㎞) : 인천대입구역∼용산역, 상봉역∼마석역 (정거장 10개소, 차량기지 1개소)

· 재정구간(L=19.9㎞) : 용산역∼상봉역(정거장 4개소)

- (서비스수준) 표정속도 80km/h 이상

ㅇ 추진경과

- 민자구간

· 2011. 4. : 제2차 국가철도망 구축계획(2011∼2020)에 반영

· 2011. 12.∼2014. 2. : 예비타당성조사* 실시(KDI)

* (B/C) A노선 1.33 / B노선 0.33 / C노선 0.66

· 2019. 8. : 예타통과(3기 신도시 개발계획 반영 시 B/C 1.00, AHP 0.540)

· 2020. 1.∼2021. 8. : 타당성조사 및 기본계획 용역

· 2021. 8. : 민자·재정 구간 분리 추진 결정

* (민자) 인천대입구∼용산, 상봉∼마석 / (재정) 용산∼상봉

· 2022. 7. : 민자구간 민간투자시설사업기본계획(RFP) 고시

· 2022. 11.: 민자구간 민간투자시설사업기본계획(RFP) 재고시

· 2023. 1. : 우선협상대상자 선정

* (가칭) 수도권광역급행철도B노선㈜ [대표사: 대우건설 컨소시엄]

· 2024. 2. : 실시협약(안) 민간투자사업심의위원회 의결

- 재정구간

· 2019. 8.	: 예비타당성 통과(B/C 1.00, AHP 0.540)

· 2022. 3.	: 기본계획 고시

· 2022. 4.	: 대형공사 등의 입찰방법 심의(1∼4공구 입찰방법(T/K) 결정)

· 2022. 8.	: 1∼4공구 설계시공일괄입찰(T/K) 발주

· 2022. 8.∼ 10. : 1∼3공구 T/K 유찰(3회)

· 2022. 9.	: 4공구(T/K) 기본설계 착수

· 2022. 11.	: 대형공사 등의 입찰방법(변경) 심의[1∼3공구 입찰방법 변경 T/K→기타)]

· 2022. 11.	: 1∼3공구(기타) 노반 설계 입찰 공고

· 2023. 1.	: 1∼3공구(기타) 노반 설계 착수

· 2023. 12. : 4공구(T/K) 우선 시공분 착공

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

ㅇ 사업관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
본사 건설본부 (민자/재정)	손병두	본부장	’22.8.29.∼현재	건설본부 소관사업 업무총괄
	송혜춘	처 장	’22.8.29.∼현재	광역민자철도처 소관사업 업무총괄
	이승훈	부 장	`22.7.31.∼현재	민자사업부 소관사업 업무총괄

다른기관 또는

민간인 관련자

국토교통부
수도권광역급행철도과장	안재혁	담당사무관	배정호, 박정호

ㅇ 민자구간

사업시행자

수도권광역철도B노선 주식회사

ㅇ 재정구간

구 분	제1공구	제2공구	제3공구	제4공구
설계사	㈜유신	서현기술단㈜	㈜동명기술공단	KCC건설

추진실적

민자구간

- 2023. 1. ∼ 10. : 우선협상대상자 선정 후 실시협약 체결을 위한 협상

- 2024. 2. : 실시협약(안) 민간투자사업심의위원회 의결

재정구간

- 2023. 1. ∼ : 1∼3공구(기타) 노반 설계 중

- 2023. 12. : 4공구(T/K) 우선 시공분 착공