경부고속철도 공정현황

□ 공정추진실적

❍ '09년 공정목표 : 65.9% (대구이남 : 85.8%, 대전․대구도심 : 31.8%)

❍ '09. 9월말 공정 : 61.6% (목표 61.6% 대비 100%)

□ 년차별 투자계획

구분		'08년까지	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년
합계	년간	49.2%	16.7%	12.9%	7.7%	5.8%	4.5%	3.3%
	누계		65.9%	78.8%	86.4%	92.2%	96.7%	100.0%
대구 이남	년간	66.8%	19.0%	14.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	누계		85.8%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
대전 대구 도심	년간	16.4%	15.4%	10.5%	20.9%	15.7%	12.3%	8.9%
	누계		31.8%	42.3%	63.2%	78.9%	91.1%	100.0%

□ 월별/구간별 공정 계획 및 실적

(단위:%)

구 분		2009. 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	계획	49.9	51.9	53.1	54.4	55.9	58.4	59.6	60.7	61.6	63.1	64.4	65.9%
	실적	50.3	51.9	53.3	54.4	55.5	58.4	59.5	60.7	61.6%
대구 이남	계획	67.6	70.1	71.5	73.2	74.7	76.8	78.7	80.1	81.3	82.8	83.9	85.8%
	실적	68.6	70.1	71.8	73.2	74.8	76.8	78.8	80.2	81.3%
도심 구간	계획	17.3	18.4	19.5	20.5	22.1	25.6	26.0	26.5	27.1	29.0	30.9	31.8%
	실적	16.9	18.4	19.7	20.5	20.8	25.6	25.7	26.4	27.1%