보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	자료배포일 2013.12.23.(월)	총매수 2 매
	배포부서 홍보실(042-607-3082)
담당부서 호남지역본부/본부장 김계웅, 건설/기술처장 오세영(061-840-5003)
호남고속철도 건설사업 차질없이 추진중! - 동절기 콘크리트궤도 품질관리 철저히 시행 -

□ 한국철도시설공단 호남본부(본부장 김계웅)는 충북오송역에서 광주광역시 광주송정역을 잇는 호남고속철도사업을 2009년 착공했으며, 내년말 완공을 목표로 사업을 추진중이다, 총사업비 8조8000억원중 금년말까지 6조4000억원이 투입되며 현재까지 공정율은 80%에 이르고 있다고 밝혔다.

□ 호남고속철도가 개통이되면 서울에서 광주송정까지 소요시간이 159분에서 93분으로 66분이 단축되면서 전국 반나절 생활권에 한발 더 다가가게 되면 호남지역 주민들에게 많은 교통편익의 제공이 기대 된다.

□ 현재 호남고속철도사업은 선행공정인 노반(路盤)분야의 주요공정은 대부분 완료되어 마무리단계를 진행중에 있으며, 고속열차의 운전에 직접적으로 관계되는 궤도, 전철/전력, 신호/통신분야의 작업이 활기차게 진행중에 있다.

□ 특히 궤도분야는 전체노선이 콘크리트궤도로 되어 있으며, 동절기에 콘크리트의 완벽한 품질확보를 위하여 자체 개발한 보온 천막(보온 하우스)를 설치하여 콘크리트궤도의 품질확보에 만전을 기하고 있다.

□ 호남고속철도사업은 2014년 4월 시제차량투입을 시작으로 2014년 7월부터 종합시험 및 시설물검증시험을 시행하고, 2014년 11월부터 상업시운전을 시행하여 2014년말 완공할 예정이다.

보온 천막 설치하여 품질관리 시행중	정읍~익산간 장대레일 부설작업