KRQP C-13040

Rev.12, 14. January 2026

화물정거장

2026. 1.

REVIEW CHART

개정 번호	개정 일자	개정사유 및 내용(근거번호)	작성자	검토자	승인자
0	2014.12.31	신규제정	류완상	김대원 백효순	이동렬
1	2016.12.31	2016년 하반기 건설공사표준품셈 등 변경분 반영	백진호	손병두 백효순	김영하
2	2017.05.29	2017년 상반기 건설공사표준품셈 등 변경분 반영	이진균	이만수 백효순	김영하
3	2017.09.12	2017년 하반기 건설공사표준품셈 등 변경분 반영	이진균	이만수 백효순	김영하
4	2018.03.19	2018년 상반기 건설공사표준품셈 등 변경분 반영	이진균	조순형 백효순	김영하
5	2019.04.02	2019년 상반기 건설공사표준품셈 등 변경분 반영	이진균	민병균 박진용	손병두
6	2020.06.30	2020년 상반기 건설공사표준품셈 등 변경분 반영	한익표	박창완 이상현	이계승
7	2021.05.18	2021년 상반기 건설공사 표준품셈 등 변경분 반영	한익표	이창현 심형환	최원일
8	2021.12.29	2021년 감사처분사항 등 반영	한익표	이창현 심형환	유성기
9	2022.06.03	2022년 상반기 건설공사 표준품셈 개정분 반영	한익표	이창현 심형환	유성기
10	2023.03.31	2023년 상반기 건설공사표준품셈 등 변경분 반영	한익표	안기성 이창현	김종호
11	2024.07.15	2024년 상반기 건설공사표준품셈 변경분, 감사처분 반영	임승빈	백효순 지연희	손병두
12	2026.01.14	2025년 건설공사표준품셈 변경분, 감사처분 반영	임승빈	박진용 지연희	(代)우기하

KRQP C-13040

목   차

Ⅰ. 수량조서(예시)	1

Ⅱ. 수량산출(예시)	2

1. 저상홈및적하장	2

Ⅲ. 단가산출(예시)	5

RECORD HISTORY	12

Ⅰ. 수량조서(예시)

KRQP C-13040

-  -

-  -

번 호	공 종	규 격	단위	수 량	비 고
1	저상홈및적하장
1.01	승강장옹벽설치
a	콘크리트타설
a-1	콘크리트타설	무근,펌프차사용	㎥	1
a-2	콘크리트타설	철근,펌프차사용	㎥	1
b	거푸집
b-1	유로폼	벽체,보통,H=0～7m	㎡	1
b-2	합판거푸집	6회,H=0～7m	㎡	1
b-3	합판거푸집	4회,H=0～7m	㎡	1
b-4	합판거푸집	3회,H=0～7m	㎡	1
c	구조물 비계
c-1	강관 비계	3개월
1)	강관비계	H=10m이하	㎡	1
2)	강관비계	H=10m초과~20m이하	㎡	1
c-2	시스템 비계	3개월
1)	시스템비계	H=10m이하	㎡	1
2)	시스템비계	H=10m초과~20m이하	㎡	1
c-3	가설계단	3개월
1)	경사형	H=6m이하	㎡	1
d	신축이음	합판,T=12mm	㎡	1
e	배수시설
e-1	배수뒷잡석채움	소형장비	㎥	1
e-2	배수뒷잡석채움	대형장비	㎥	1
e-3	부직포설치	300g/㎡	㎡	1
e-4	드레인보드설치	T=20mm	㎡	1
e-5	배수공설치	PVC PIPE,D65mm	m	1
e-6	배수공설치	PVC PIPE,D75mm	m	1
f	스페이서설치
f-1	스페이서설치	벽체	㎡	1
f-2	스페이서설치	슬라브및기초	㎡	1
g	철근현장가공및조립	Type-Ⅰ-1	ton	1

Ⅱ. 수량산출(예시)

1. 저상홈및적하장

가. 승강장옹벽설치

1) 콘크리트타설

가) 콘크리트타설 - 무근, 펌프차 사용(㎥)

나) 콘크리트타설 - 철근, 펌프차 사용(㎥)

가)~나) 공통

(1) 콘크리트 펌프차를 이용한 타설로, 붐타설이 적용가능한 구간에 적용한다.

(2) 체적으로 수량을 산출한다.

(3) 시설유형 적용기준에 따라 구분하여 적용한다.

구 분	시설유형 적용기준
TYPE-Ⅰ	매트기초 등 펌프차 작업에 제약이 없는 시설물
TYPE-Ⅱ	벽, 기둥, 보, 슬라브, 교대, 교각 등 펌프차 작업에 큰 지장이 없어 일반적인 시공이 가능한 시설물
TYPE-Ⅲ	옹벽, 줄기초, 슬래브 없는[월거더]구조의 기둥과 보 등 펌프차 작업에 제약을 받는 타설부위가 좁거나 깊은 시설물
TYPE-Ⅳ	절/성토부 비탈면에 시공되는 구조물 등 펌프차 작업에 제약이 매우 큰 시설물

2) 거푸집

가) 유로폼 – 벽체,보통,H=0～7m(㎡)

(1) 콘크리트 타설면의 면적으로 수량을 산출한다.

(2) 연직높이 0～7m를 기준으로 매 3m 증가마다 수량을 별도 산출한다.

(3) 유로폼의 인력투입은 아래표를 기준으로 하며, 구조물 형상 또는 현장 조건에 제한을 받는

경우에는 이를 고려하여 결정할 수 있다.

구분	유형
복잡	토목 : 교대, 날개벽 등 복잡하고 보강이 많은 구조 건축 : 외부 벽체, 보/기둥
보통	측구, 수로, 옹벽, 일반적인 벽체, 박스 등
간단	수문 또는 관의 기초, 건축 매트기초 등 간단한 구조

나) 합판거푸집 - 6회, H=0～7m(㎡)

다) 합판거푸집 - 4회, H=0～7m(㎡)

라) 합판거푸집 - 3회, H=0～7m(㎡)

나)~라)공통

(1) 콘크리트 타설면의 면적으로 수량을 산출한다.

(2) 연직높이 0～7m를 기준으로 매 3m 증가마다 수량을 별도 산출한다.

(3) 구조물 형상에 따른 사용횟수와 유형은 아래 표를 고려하여 결정한다.

사용횟수	유형	구조물
1∼2회	제물치장	제물치장 콘크리트
2회	매우복잡	T형보, 난간, 복잡한 구조의 교각, 교대, 수문관의 본체 등 매우 복잡한 구조
3회	복잡	교대, 교각, 파라펫트, 날개벽 등 복잡한 벽체 구조 건축 라멘구조의 보, 기둥
4회	보통	측구, 수로, 우물통 등 비교적 간단한 벽체 구조, 교량 및 건축 슬래브
6회	간단	수문 또는 관의 기초, 호안 및 보호공의 기초 등 간단한 구조

3) 신축이음 - 합판, T=12mm(㎡)

가) 신축이음의 간격은 20m 이내로 한다.

나) 수량은 신축이음면의 면적으로 산출한다.

4) 배수시설

가) 배수뒷잡석채움 - 소형장비(㎥)

(1) 수로콘크리트나 옹벽공의 배수공등 배수에 필요한 잡석채움에 적용한다.

(2) 수량은 체적으로 산출한다.

나) 배수뒷잡석채움 - 대형장비(㎥)

(1) 수로콘크리트나 옹벽공의 배수공등 배수에 필요한 잡석채움에 적용한다.

(2) 수량은 체적으로 산출한다.

다) 부직포설치 - 300g/㎡(㎡)

(1) 배수뒷잡석이나 드레인보드를 부직포로 감싸는 수량이다.

(2) 배수뒷잡석이나 드레인보드의 겉면적으로 수량을 산출한다.

(3) 드레인보드에 부직포를 설치시는 부직포를 100mm 겹치게 한다.

라) 드레인보드설치 - T = 20mm(㎡)

(1) 드레인보드의 설치수량은 면적으로 산출한다.

(2) 배수공 상단에서 50cm, 하단에서 50cm 연장된 길이에 옹벽연장을 곱하여 산출한다.

마) 배수공설치 - PVC PIPE, D65mm(m)

바) 배수공설치 - PVC PIPE, D75mm(m)

마)~바)공통

(1) 배수공은 수평에서 10°기울어진 상태로 설치한다.

(2) 배수공 수량은 기울어진 상태를 감안한 연장으로 산출한다.

5) 스페이서설치

가) 스페이서 설치 - 벽체(㎡)

(1) 벽체의 내측 및 외측은 별도로 산출하지 않는다. 즉, 내측 및 외측 2개소를 합쳐 1개소로 한다.

(2) 스페이서의 설치간격은 평면상에서는 주철근 배치간격의 4배이거나 1.0m 이하로 하고, 단면상에서는 배력철근 배치간격의 4배이거나 1.0m 이하로 한다.

(3) 수량은 스페이서 설치 면적으로 산출한다.

나) 스페이서 설치 - 슬래브 및 기초(㎡)

(1) 스페이서의 설치간격은 종방향 및 횡방향 주철근 배치간격의 4배이거나 0.60m 이하가 되도록 한다.

(2) 수량은 스페이서 설치 면적으로 산출한다.

6) 철근 현장가공 및 조립 – Type-Ⅰ-1(ton)

가) 수량은 도면(구조도)에 의해 산출된 철근의 NET ton수로 한다.

나) 철근 가공 및 조립의 Type은 아래 표 유형의 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우에 적용한다.

구 분		유 형
Type-Ⅰ	Ⅰ-1	- 철근가공 및 조립 작업이 일반적인 토목시설 (반중력식 옹벽, L형 옹벽, 교량 슬래브, 매트기초, 수문 등)
	Ⅰ-2	- 특정위치에서 철근의 가공 및 조립이 반복되는 경우 (빔제작, 철근망 등)
Type-Ⅱ	Ⅱ-1	- 철근가공 및 조립 작업이 복잡한 토목시설(라멘교, 교대, 암거, 지하차도, 부벽식옹벽 등) - Type-Ⅰ 시설에서 직경 13mm이하 철근이 전 철근중량의 50%이상인 경우
	Ⅱ-2	- 콘크리트대비 소량의 철근이 사용되는 경우(측구/개거, 중력식 옹벽, 일체형 중앙분리대 등)
Type-Ⅲ	Ⅲ	- 철근가공 및 조립 작업이 매우 복잡한 토목시설 (교각, 구주식 교대 - 특수 구조시설물에서 철근직경 35mm를 초과하여 인력에 의한 단독시공이 어려운 경우(플랜트, 원자력 발전소 등)

Ⅲ. 단가산출(예시)

단가적용시 현장여건에 따라 작업효율, 적용장비, 운반거리 등을 고려하여야 하며, 건설공사 표준품셈의 개정, 공단기준의 변경 등을 반영한 최신의 품을 적용하여야 한다.

번호

공      종

단위

단 가 산 출 (예 시)

비  고

1

저상홈및적하장

1.01

승강장옹벽설치

a

콘크리트타설

a-1

콘크리트타설

(무근,펌프차,슬럼프 15cm, Type-Ⅲ)

㎥

1. 적용범위

본 품은 콘크리트펌프차(80㎥/hr이상)를 활용한 콘크리트

타설에 적용하며 나머지 조건은 건설표준품셈을 참고하여

슬럼프치, 시설유형 및 현장조건에 따라 조정한다.

2. 일일시공량

(일당)

슬럼프	기준 시공량(㎥)
	무근구조물	철근구조물
8~12cm	130	125
15cm	135	130
18cm이상	145	140

가. 시공량(㎥) : 기준시공량 × f1(시설유형) × f2(현장조건)

※ 펌프차의 타설범위(타설높이 및 수평거리)를 초과하여

펌프차 이동 및 재셋팅이 필요한 경우 회당 시공량의

5%을 감하여 적용한다.

나. 시설유형(f1)

유형	Type-Ⅰ	Type-Ⅱ	Type-Ⅲ	Type-Ⅳ
f1	1.4	1.0	0.8	0.3

다. 현장조건(f2)

유형	조건-1	조건-2	조건-3
f2	1.2	1.0	0.8

∴ Q(시공량)= 135㎥/일 × 0.8(f1) × 1.0(f2) = 108.0㎥/일

3. 인력 및 장비 편성

1) 노무비

가. 콘크리트공 : 3인/일 / Q㎥/일

나. 특별인부 : 1인/일 / Q㎥/일

다. 보통인부 : 1인/일 / Q㎥/일

라. 형틀목공 : 1인/일 / Q㎥/일

* 본 편성인력은 콘크리트 진동기 사용 기준으로

진동기를 사용하지 않는 경우 콘크리트공과 특별

인부를 각 1인 제외한다.

* 콘크리트 타설작업 시 거푸집 및 동바리의 변형·변위 침하 발생에 따른 거푸집 작업 등 별도 인력이 필요하다고 판단되는 경우 형틀목공을 추가 계상한다.

2) 콘크리트펌프차(80㎥이상)

: 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일

3) 공구손료 및 경장비(콘크리트 진동기 등)의

기계경비는 : 노무비의 5%

4) 타설 후 발생하는 잔여 콘크리트(배관 내 잔여물 등)의

재료비는 : 노무비의 5%

4. 양생비(무근)

1) 특별인부:0.22인/10㎥=0.022인

2) 제잡비(양생손료,기구손료):인력품의 31%

[공통] 6-1-4

콘크리트

펌프차타설

2025년건설

표준품셈     6-1 콘크리트 및 2016년건설

표준품셈     6-1-2-2 양생비

번호

공      종

단위

단 가 산 출 (예 시)

비  고

a-2

구체콘크리트

(철근,펌프차,슬럼프 15cm, Type-Ⅲ)

㎥

1. 적용범위

본 품은 콘크리트펌프차(80㎥/hr이상)를 활용한 콘크리트

타설에 적용하며 나머지 조건은 건설표준품셈을 참고하여

슬럼프치, 시설유형 및 현장조건에 따라 조정한다.

2. 일일시공량

(일당)

슬럼프	기준 시공량(㎥)
	무근구조물	철근구조물
8~12cm	130	125
15cm	135	130
18cm이상	145	140

가. 시공량(㎥) : 기준시공량 × f1(시설유형) × f2(현장조건)

※ 펌프차의 타설범위(타설높이 및 수평거리)를 초과하여

펌프차 이동 및 재셋팅이 필요한 경우 회당 시공량의

5%을 감하여 적용한다.

나. 시설유형(f1)

유형	Type-Ⅰ	Type-Ⅱ	Type-Ⅲ	Type-Ⅳ
f1	1.4	1.0	0.8	0.3

다. 현장조건(f2)

유형	조건-1	조건-2	조건-3
f2	1.2	1.0	0.8

∴ Q(시공량)= 130㎥/일 × 0.8(f1) × 1.0(f2) = 104.0㎥/일

3. 인력 및 장비 편성

1) 노무비

가. 콘크리트공 : 4인/일 / Q㎥/일

나. 특별인부 : 1인/일 / Q㎥/일

다. 보통인부 : 1인/일 / Q㎥/일

라. 형틀목공 : 1인/일 / Q㎥/일

* 본 편성인력은 콘크리트 진동기 사용 기준으로

진동기를 사용하지 않는 경우 콘크리트공과 특별

인부를 각 1인 제외한다.

* 콘크리트 타설작업 시 거푸집 및 동바리의 변형·변위 침하 발생에 따른 거푸집 작업 등 별도 인력이 필요하다고 판단되는 경우 형틀목공을 추가 계상한다.

2) 콘크리트펌프차(80㎥이상)

: 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일

3) 공구손료 및 경장비(콘크리트 진동기 등)의

기계경비는 : 노무비의 5%

4) 타설 후 발생하는 잔여 콘크리트(배관 내 잔여물 등)의

재료비는 : 노무비의 5%

4. 양생비(철근)

1) 특별인부:0.07인/10㎥=0.007인

2) 제잡비(양생손료,기구손료):인력품의 41%

[공통] 6-1-4

콘크리트

펌프차타설

2025년건설

표준품셈     6-1 콘크리트 및 2016년건설

표준품셈     6-1-2-2 양생비

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
b	거푸집
b-1	유로폼 (벽체,보통,H=0~7m)	㎡	1. 유로폼(H=0∼7m이하) 1) 재료비 - 패널(600×1200㎜):0.89매/10㎡ - 내부패널((200+200)×1,200㎜):0.03매/10㎡ - 부자재(웨지핀, 플랫타이, 강관파이프,후크):주자재비의 52% - 소모재료(박리재 등) : 주자재비의 5% 2) 설치 및 해체(보통) ∴ Q(시공량) = 35㎡/일 ① 형틀목공: 4인/일 / Q㎡/일 ② 보통인부: 1인/일 / Q㎡/일 ③ 공구손료 및 경장비 기계경비:인력품의 3% ※ 참조 - 현장여건(고소작업, 거푸집 적재공간 협소 등)에 따라 상시적인 크레인을 활용한 시공이 필요한 경우 해당 장비를 작업조에 추가하여 계상하고, 시공량은 감하지 않는다. - 본 품은 수직고 7m까지 적용하며, 양중장비를 활용하지 않고 수직고가 7m를 초과하는 경우 매 3m마다 시공량을 9%까지 감한다.	[공통] 6-3-3 유로폼 설치 및 해체
b-2	합판거푸집 (6회,H = 0～7m)	㎡	1. 합판거푸집(H=0∼7m이하) 1) 재료비 - 합판(12㎜):1.030㎡×32.7/100 - 각재:0.038㎥×32.7/100 - 소모자재(박리재 등):주자재비의 11%적용 2) 설치 및 해체(6회,간단) ∴ Q(시공량) = 50㎡/일 ① 형틀목공: 5인/일 / Q㎡/일 ② 보통인부: 2인/일 / Q㎡/일 ③ 공구손료 및 경장비 기계경비:인력품의 1% ※ 참조 - 현장여건(고소작업, 거푸집 적재공간 협소 등)에 따라 상시적인 크레인을 활용한 시공이 필요한 경우 해당 장비를 작업조에 추가하여 계상하고, 시공량은 감하지 않는다. - 본 품은 수직고 7m까지 적용하며, 양중장비를 활용하지 않고 수직고가 7m를 초과하는 경우 매 3m마다 시공량을 9%까지 감한다.	[공통] 6-3-1 합판거푸집 설치 및 해체

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
b-3	합판거푸집 (4회,H = 0～7m)	㎡	1. 합판거푸집(H=0∼7m이하) 1) 재료비 - 합판(12㎜):1.030㎡×38.0/100 - 각재:0.038㎥×38.0/100 - 소모자재(박리재 등):주자재비의 9%적용 2) 설치 및 해체(4회,보통) ∴ Q(시공량) = 45㎡/일 ① 형틀목공: 5인/일 / Q㎡/일 ② 보통인부: 2인/일 / Q㎡/일 ③ 공구손료 및 경장비 기계경비:인력품의 1% ※ 참조 - 현장여건(고소작업, 거푸집 적재공간 협소 등)에 따라 상시적인 크레인을 활용한 시공이 필요한 경우 해당 장비를 작업조에 추가하여 계상하고, 시공량은 감하지 않는다. - 본 품은 수직고 7m까지 적용하며, 양중장비를 활용하지 않고 수직고가 7m를 초과하는 경우 매 3m마다 시공량을 9%까지 감한다.	[공통] 6-3-1 합판거푸집 설치 및 해체
b-4	합판거푸집 (3회,H = 0～7m)	㎡	1. 합판거푸집(H=0∼7m이하) 1) 재료비 - 합판(12㎜):1.030㎡×44.3/100 - 각재:0.038㎥×44.3/100 - 소모자재(박리재 등):주자재비의 8%적용 2) 설치 및 해체(3회,복잡) ∴ Q(시공량) = 30㎡/일 ① 형틀목공: 5인/일 / Q㎡/일 ② 보통인부: 2인/일 / Q㎡/일 ③ 공구손료 및 경장비 기계경비:인력품의 1% ※ 참조 - 현장여건(고소작업, 거푸집 적재공간 협소 등)에 따라 상시적인 크레인을 활용한 시공이 필요한 경우 해당 장비를 작업조에 추가하여 계상하고, 시공량은 감하지 않는다. - 본 품은 수직고 7m까지 적용하며, 양중장비를 활용하지 않고 수직고가 7m를 초과하는 경우 매 3m마다 시공량을 9%까지 감한다.	[공통] 6-3-1 합판거푸집 설치 및 해체

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
c	구조물비계
c-1	강관비계
1)	강관비계 (3개월, H=10m이하)	㎡	1. 본 품은 비계(발판 및 이동용 내부계단)설치, 해체 작업이 포함되어 있다. 2. 재 료 비 재료비(설계수량 적용):건설표준품셈[공통] 2-2-5 구조물비계 손율 적용 3. 설치 및 해체 1) 비 계 공 : 0.05인 2) 보통인부 : 0.02인 3) 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비 : 인력품의 2%	[공통] 2-2-5 구조물 비계 [공통] 2-7-1 강관비계 설치 및 해체
2)	강관비계 (3개월, H=10m초과∼20m이하)	㎡	1. 본 품은 비계(발판 및 이동용 내부계단)설치, 해체 작업이 포함되어 있다. 2. 재 료 비 재료비(설계수량 적용):건설표준품셈[공통] 2-2-5 구조물비계 손율 적용 3. 설치 및 해체 1) 비 계 공 : 0.06인 2) 보통인부 : 0.02인 3) 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비 : 인력품의 2%	[공통] 2-2-5 구조물 비계 [공통] 2-7-1 강관비계 설치 및 해체
c-2	시스템비계
1)	시스템비계 (3개월, H=10m이하)	㎡	1. 적용기준 1) 본 품은 비계(발판 및 내부계단 포함)설치, 해체 작업이 포함되어 있다. 2) 현장여건에 따라 장비(크레인 등)가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다. 2. 재 료 비 재료비(설계수량 적용):건설표준품셈[공통] 2-2-5 구조물비계 손율 적용 3. 설치 및 해체 1) 비 계 공 : 0.04인 2) 보통인부 : 0.01인	[공통] 2-7-2 시스템비계 설치 및 해체
2)	시스템비계 (3개월, H=10m초과∼20m이하)	㎡	1. 적용기준 1) 본 품은 비계(발판 및 내부계단 포함)설치, 해체 작업이 포함되어 있다. 2) 현장여건에 따라 장비(크레인 등)가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다. 2. 재 료 비 재료비(설계수량 적용) : 건설표준품셈[공통] 2-2-5 구조물비계 손율 적용 3. 설치 및 해체 1) 비 계 공 : 0.05인 2) 보통인부 : 0.01인	[공통] 2-7-2 시스템비계 설치 및 해체

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
c-3	가설계단
1)	경사형 (3개월, H=6m이하)	㎡	1. 본 품은 6m이하에서 강관(Φ48.6mm), 조립형 발 판을 사용하여 가설계단을 경사형태로 조립·설 치 하는 기준이고, 가설계단의 폭은 0.9m이하를 기준으로, 비계 및 발판 설치·해체 작업이 포함 되어 있다. 2. 재 료 비 재료비(설계수량 적용) : 건설표준품셈[공통] 2-2-5 구조물비계 손율 적용 3. 설치 및 해체 1) 비 계 공 : 0.27인 2) 보통인부 : 0.09인 3) 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비 : 인력품의 2%	[공통] 2-7-5 경사형 가설계단 설치 및 해체
d	신축이음 (합판,T = 12mm)	㎡	1. 재료비(합판,1210×2420㎜):1.03㎡ 2. 설치비 ※ 시공 난이도를 고려하여 건축목공 제외 1) 보통인부 : 0.006인 2) 공구손료 및 경장비 기계경비(인력품의 2%)	[건축] 4-2-3 벽체합판설치
e	배수시설
e-1	배수뒷잡석채움 (소형장비)	㎥	1. 잡석구입 및 운반:1.04㎥(할증) 2. 작업조건 1) 본 품은 대형 다짐장비를 사용한 구조물 뒤채움 기준이다. 2) 본 품은 포설 및 고르기, 다짐 작업을 포함한다. 3) 투입장비는 작업여건에 따라 장비조합을 변경하여 적용할 수 있다. 4) 진동롤러(핸드가이드식) 기계경비 산정시 조정원은 계상하지 않는다. 5) 일당 시공량 Q = 110㎥/일 3. 인건비 1) 특별인부: 1인/일 / Q㎥/일 2) 보통인부: 1인/일 / Q㎥/일 4. 중기사용료 1) 굴착기(0.2㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일 2) 진동롤러(핸드가이드식,0.7Ton): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일 3) 살수차(5500ℓ): 0.5대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일	[공통] 3-4-4 뒤채움 및 다짐(소형장비)
e-2	배수뒷잡석채움 (대형장비)	㎥	1. 잡석구입 및 운반:1.04㎥(할증) 2. 작업조건 1) 본 품은 대형 다짐장비를 사용한 구조물 뒤채움 기준이다. 2) 본 품은 포설 및 고르기, 다짐 작업을 포함한다. 3) 투입장비는 작업여건에 따라 장비조합을 변경하여 적용할 수 있다. 4) 진동롤러(핸드가이드식) 기계경비 산정시 조정원은 계상하지 않는다. 5) 일당 시공량 Q = 250㎥/일 3. 인건비 1) 특별인부: 1인/일 / Q㎥/일 2) 보통인부: 1인/일 / Q㎥/일 4. 중기사용료 1) 굴착기(0.6㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일 2) 진동롤러(10Ton): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일 3) 진동롤러(핸드가이드식,0.7Ton): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일 4) 살수차(5500ℓ): 0.5대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일	[공통] 3-4-5 뒤채움 및 다짐(대형장비)
e-3	부직포설치 (300g/㎡)	㎡	1. 재료비 1) 부직포(300g/㎡):1.05㎡ 2) 잡재료비(재료비의 2%) 2. 설치비 1) 특별인부 : 0.07인/100㎡ = 0.0007인/㎡ 2) 보통인부 : 0.04인/100㎡ = 0.0004인/㎡ 3) 굴착기(0.40㎥) : 0.10hr/100㎡ = 0.001hr/㎡ 4) 공구손료 및 경장비(봉합기)의 기계경비:인력품의 4%	[공통] 5-2-1 매트부설

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
e-4	드레인보드설치 (T=20mm)	㎡	1. 드레인보드 설치 1) 재료비:1.05㎡ 2) 설치비(보통인부):0.006인 2. Pin 설치(콘크리트 Gun 사용기준) 1) 재료비:0.667개/㎡×1.03(할증) = 0.687개/㎡ 2) 설치비(특별인부):1인/500㎡ = 0.002인/㎡ 3) 기구손료(재료비의 5%)	견적단가
e-5	배수공설치(PVC PIPE,D65mm)	m	1. 재료비(D65㎜) : 1.05m 2. 설치비(재료비의 5%)
e-6	배수공설치(PVC PIPE,D75mm)	m	1. 재료비(D75㎜) : 1.05m 2. 설치비(재료비의 5%)
f	스페이서설치
f-1	스페이서설치 (벽체)	㎡	1. 재료비: 벽체형 8개 2. 설치비(재료비의 5%)
f-2	스페이서설치 (슬라브및기초)	㎡	1. 재료비: 슬래브형 4개 2. 설치비(재료비의 5%)
g	철근현장가공조립 (Type-Ⅰ-1)	ton	1. 현장가공 ∴ Q(시공량) = 4.5ton/일 1) 철 근 공: 3인/일 / Qton/일 2) 보통인부: 1인/일 / Qton/일 3) 공구손료 및 경장비(철근 가공기 등)의 기계경비 : 인력품의 9% 2. 현장조립 ∴ Q(시공량) = 3.5ton/일 1) 철 근 공: 6인/일 / Qton/일 2) 보통인부: 2인/일 / Qton/일 3) 공구손료 및 경장비의 기계경비 : 인력품의 2% 4) 결속선(#20 0.9㎜):6.50㎏ ※ 참조 - 개소별 소량(0.5ton미만)의 시공 위치가 산재하는 경우 시공량의 50%까지 감하여 적용한다. - 현장여건(고소작업, 철근 적재공간 협소 등)에 따라 상시적인 크레인을 활용한 시공이 필요한 경우 해당 장비를 작업조에 추가하여 계상하고, 시공량은 감하지 않는다.	[공통] 6-2-2 현장가공 [공통] 6-2-3 현장조립

RECORD HISTORY

Rev.0('14.12.31) 철도건설공사 수량 및 단가산출 표준의 구성체계를 KR CODE집에 맞추어 항목별 체계로 개정하여 사용자가 손쉽게 이용하는데 목적을 둠.

Rev.1('16.12.31) 2016년 하반기 건설공사 표준품셈 개정분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.2('17.05.29) 2017년 상반기 건설공사 표준품셈 개정분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.3('17.09.12) 2017년 하반기 건설공사 표준품셈 개정분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.4('18.03.19) 2018년 상반기 건설공사 표준품셈 개정분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.5('19.04.02) 2019년 상반기 건설공사 표준품셈 개정분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.6('20.06.30) 2020년 상반기 건설공사 표준품셈 개정분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.7('21.05.18) 2021년 상반기 표준품셈 개정, 감사처분, 현장VOC 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.8('21.12.29) 2021년 감사처분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.9('22.06.03) 2022년 건설공사 표준품셈 개정분 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.10('23.03.31) 2023년 상반기 건설공사 표준품셈 개정사항 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.11('24.07.15) 2024년 상반기 건설공사 표준품셈 개정분, 감사처분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.12('26.01.14) 2025년 건설공사 표준품셈 개정분, 감사처분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공