2023년 사업실명제 대상사업 사업내역서

사업실명제

등록번호

2023-13

담당부서

작 성 자

(건설본부/고속일반철도처)

(오지수/042-607-3917/10003424@kr.or.kr)

정 책 명

춘천~속초 철도건설

사업개요

및

추진경과

ㅇ 노선도

ㅇ 사업개요

- 사업목적

ㆍ 고속화 철도 교통망 구축으로 동서도시 활성화 및 동해선, 남북 및 대륙횡단(TSR) 철도를 연계한 교통물류망 구축

- 사업기간 : 2016~2027년

- 총사업비 : 2조 4,444억원

* 백담정거장의 신호장 외 역 설치 추가비용 70억원 지자체(강원도, 인제군) 부담

ㅇ 주요내용

- 춘천~속초간 93.7km 철도건설

ㅇ 추진경과

- ‘16. 7 : 예비타당성조사(기재부, B.C 0.79,AHP=0.518) 통과

* ‘01년, ’10년, ‘12년 : 예타 조사 3회 시행(B/C 0.49, 0.73, 0.67)

- ‘16.11. : 타당성 조사 및 기본계획 용역 착수

- ‘20. 2. : 기본계획 고시

- ‘20. 6. : 일괄입찰공사(T/K) 1,7공구 입찰공고

- ‘20.12. : 일괄입찰공사(T/K) 1,7공구 실시설계 적격자 선정

- ‘21. 7. : 기타설계 6개(2,3,4,5,6,8)공구 노반 기본설계 완료

- ‘21.11. : 기타설계 6개(2,3,4,5,6,8)공구 실시설계 착수

- ‘21.12. : 7공구 실시설계 적격심의 및 계약체결

- ‘22. 6. : 춘천~속초 1,7공구 사업실시계획 승인

- ‘22. 9. : 1공구 실시설계 적격심의 및 계약체결

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
본사 건설본부	손병두	본부장	`22.08.29∼현재	건설본부 사업 업무총괄
	한상연	처장	`23.01.18∼현재	고속일반철도 사업 업무총괄
	황지광	부장	`23.01.18∼현재	강원권 고속일반철도사업 업무총괄
지역 강원본부	양인동	본부장	`22.01.17∼현재	강원본부 사업 업무총괄
	장동삼	처장	`22.09.26∼현재	강원본부 강원권사업단 업무총괄
	이민우	부장	`22.01.17∼현재	춘천∼속초 철도건설 업무총괄

다른기관 또는

민간인 관련자

ㅇ 국토교통부 : 철도건설과장 오송천, 담당사무관 김용래

ㅇ 공구별 업체 현황

공구	설계사	시공사	감리사
1공구	㈜수성엔지니어링 등	㈜한진중공업 등	㈜유신 등
2공구	㈜케이알티씨 등	-	-
3공구	㈜대한콘설탄트 등	-	-
4공구	㈜도화엔지니어링 등	-	-
5공구	㈜동일기술공사 등	-	-
6공구	㈜서현기술단 등	-	-
7공구	㈜동부엔지니어링 등	㈜한화건설 등	㈜케이알티씨 등
8공구	㈜유신 등	-	-

추진실적

- ‘16. 7 : 예비타당성조사(기재부, B.C 0.79,AHP=0.518) 통과

- ‘20. 2. : 기본계획 고시

- ‘21. 7. : 기타공구(6개) 노반 기본설계 완료

- ‘21.12. : 7공구 실시설계 적격심의 및 계약체결

- ‘22. 6. : 춘천~속초 1,7공구 사업실시계획 승인

- ‘22. 9. : 1공구 실시설계 적격심의 및 계약체결