보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	자료배포일 2018. 3. 28.(수)	총 매수 2매
	배포부서 홍보실 (042-607-3082)
담당부서 강원본부 원주강릉사업단 / 단장 김태희, 노반PM부장 임명규(033-810-5191)
3월 27일(화) G1 8시 뉴스에서 보도한 <경강선 – 영동선 연결 ‘난항’> 보도와 관련하여 아래와 같이 알려드립니다.

□ 철도공단은 경강선과 영동선을 연결하기 위해 동해연결선 공사를 시행 중임.

ㅇ 지역주민, 강릉시, 철도공단은 토공구간 일부 교량화 및 교량하부 공간에 주민편의시설 설치 등 철도시설계획에 대하여 협의 완료 단계에 있음.

ㅇ 다만, 토지 보상에 대하여는 일부 주민들이 보상가저렴 등의 사유로 손실보상 협의에 불응하여 부득이, 중앙토지수용위원회에 토지 수용재결을 신청(’18년 2월 7일)하였고, 현재 강릉시 열람공고 진행 중(’18년 3월 28일∼4월 16일)에 있으며,  ’18년 6월 수용개시 예정임.

□ 철도공단은 ’18년 4월부터 토지가 매수된 구간부터 순차적으로 동해연결선 공사를 착수하여 ’19년 상반기 개통 예정임.

참 고		동해연결선 공사 관련 주요 추진경위 및 향후 계획

□ 추진경위 및 향후 계획

ㅇ ’17년 7월 14일 : 토지 경계·분할측량 및 지장물 조사 완료

ㅇ ’17년 10월 16일∼11월 3일 : 토지보상계획 열람

ㅇ ’17년 12월 21일∼’18년 1월 22일 : 손실보상 협의

ㅇ ’18년 1월 30일 : 주민설명회 개최(환경영향평가 협의내용 설명 등)

ㅇ ’18년 2월 07일 : 토지 수용재결 신청(철도공단→중앙토지수용위원회)

ㅇ ’18년 2월 13일 : 수용재결 신청에 따른 열람공고 의뢰(중앙토지수용위원회→강릉시)

ㅇ ’18년 2월 19일 : 열람공고 의뢰에 대한 회신(강릉시→중앙토지수용위원회)

ㅇ ’18년 3월 28일∼4월 16일 : 수용재결내용 열람공고(강릉시→주민)

ㅇ ’18년 4월 중 : 주민, 강릉시, 철도공단 3자간 양해각서 체결 예정