보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다	자료배포일 2014. 6. 13 (금)	총 매수 1 매
	배포부서 홍보실(042-607-3082)
담당부서 건설본부 일반철도처/ 처장 장 봉희, 부장 최 원일(042-607-3962)
한국철도시설공단은 2014. 6. 13(금) 경북매일“동해중부선 예산삭감·공기지연 가능성 커” 보도내용에 대하여 아래와 같이 해명합니다.

□ 보도 요지

`14.12월말 개통예정이던 KTX 포항연결선 사업이 예산삭감으로  내년 3월로 연기

□ 해명 내용

○ 포항∼서울간 KTX 포항연결선 사업의 예산은 당초 계획대로 반영되어 있음

○ KTX 포항연결선 사업은 `14. 12월말 예정으로 복선전철 공사를 시행중에 있으나,

○ 제산터널 등 4개 터널 굴착시 지하수 용출, 암질불량으로 안전하게 시공하기 위하여 부득이 굴진속도를 조정(당초: 7∼5m/일 → 변경 5∼2m/일) 하였으며

○ 철도안전법의 종합시험운전지침(`14.3.19) 개정 따른 열차운행 안전관리 강화를 위한 단계별 점검 절차 강화로 2개월이 추가 소요됨에 따라, `15. 3월 개통 예정으로 추진하고 있음.