호남선 익산~부용간 만경강제2교 개량공사

가설교량 특정공법 심의대상 공모

2022. 03.

만경강제2교 교량개량공사 사업개요

L=970m

□ 사업개요

○ 사업내용 : 현 교량(단선 병렬 555m) 상선 우측에 복선교량(615m) 신설

○ 사업목적 : 일반철도 노후화된 교량을 개량하여 철도 안전운행을 확보

- 하천설계기준을 만족하도록 하천제방 이격 거리 및 경간장 충분히 확보

○ 사업비 / 사업기간 : 1,199억원 / 2018~2027

□ 추진경위

○ ’18.02. : 2018년도 철도시설개량사업 세부시행계획 승인

○ '18.06. : 실시설계 착수

○ '19.12. : 단선(상선) 개량에서 복선 개량으로 사업계획 변경

○ '21.06. : 교량상부거더(10경간) 특정공법 심의 시행

○ '21.06. : 설계자문 시행(임시선 배제하고 현 교량 우측에 복선교량 신설)
○ ‘21.09. ~ `22. 1. : 하천관리기관 하천점용허가 사전 협의

□ 향후계획

○ ’22.07 : 실시설계 준공

특정 공법 심의대상

□ 가설 교량 계획

구 분	설계 계획
경 간	96.0m+100.0m=196.0m (폭14m)
평 면
종 단

* 위 삽도는 현황 참고를 위한 것으로 시공 전 준공성과품 확인이 필요함.

□ 가설 교량 특정 공법 심의대상

분 야	공 종	심의 대상	비 고
가설교량	가설공	하천구간 196m(96m+100m)	폭 14m 가설깊이 30~35.5m

□ 적용범위 및 기타

구 분	적 용 범 위
가설교량 설치 및 해체 (1구간)	⦁1구간은 교량시점부(A1 통과구간, L=96m)로 실시 할 것. ⦁1구간 설치는 상부거치 전에 설치하며 상부거치 후 철거 및 복구 실시 할 것. ⦁모든 구간의 가교는 우기(수방기간)동안 상부철거 및 재설치를 실시 할 것. ⦁가설교량 기초설치(파일)는 야간에 실시하고 수방기간을 고려하여 제내지와 제외지구간 유기적 시공 가능 하도록 장비운영을 실시 할 것. ⦁1년8개월(수방기간 1회 포함) 운영 기준으로 공정표, 가격견적서를 제시 할 것. ⦁시공사 운영계획에 따라 운영기간은 변경 가능하며 기간에 따라 정산 예정.
가설교량 설치 및 해체 (2구간)	⦁2구간은 유심부구간(L=100m)으로 실시 할 것. ⦁2구간 설치는 하부말뚝 시공전에 설치하며 상부거치 후 철거 및 복구 실시 할 것. ⦁모든 구간의 가교는 우기(수방기간)동안 상부철거 및 재설치를 실시 할 것. ⦁가설교량 기초설치(파일)는 야간에 실시하고 교량말뚝 및 기초 설치를 고려하여 1개월내 시공이 가능 하도록 장비운영을 실시 할 것. ⦁3년7개월(수방기간 3회 포함) 운영 기준으로 공정표, 가격견적서를 제시 할 것. ⦁시공사 운영계획에 따라 운영기간은 변경 가능하며 기간에 따라 정산 예정.
기 타	⦁특정공법 심의시 설치 및 해체 기간에 대해서 감안 평가 예정. ⦁월 20일(야간작업시 4시간, 열차차단시간 고려)기준으로 작업 및 장비운영을 편성 할 것. ⦁가설교량 설치 및 해체에 대한 공정표를 평가전 제출 할 것. ⦁가격견적서(내역)는 전체설치, 상부설치, 상부철거, 전체철거로 구분하여 산정 할 것. ⦁제공되는 공정표(첨부1)는 공정편성을 위한 참고용으로 시공전 준공성과품을 재확인 할 것. ⦁교량상부 형식별 가설방안을 고려하여 시공성이 우수하며, 경제적이고 안전성에 유리한 공법이어야 할 것.

□ 예정공정표

* 위 예정공정표는 가설교량 공정계획 산출을 위한 참교용으로 시공 전 준공성과품 확인이 필요함.

특정공법 공모 절차

□ 공모에 참여하고자 하는 업체는 업체명, 심의대상 특정 공법 및 담당자를 표기한 공모 참여 의사를 이메일 (공단 담당자 : 박근영 대리 pgy3378@kr.or.kr ☎062-602-5239)로 2022.3.17.(목) 18시까지 회신

□ 공모에 참여하는 업체는 설계사(별도 알림)와 사전 협의하여 특정 공법 심의자료를 2022.3.24.(목) 18시까지 공문으로 제출해야 합니다.

(유선으로 제출 확인 필요)

- 세부 절차 및 설계자료는 설계사에서 별도 제공 예정

□ 첨부1. 예정공정표