서해선 복선전철 공정률(2021년 5월)

□ 공정현황

분야		공정률(%)
계		75.9
설계		58.4
감리		50.7
용지		95.8
노반	1공구	88.3
	2공구	92.6
	3공구	91.6
	4공구	95.6
	5공구	95.5
	6공구	83.4
	7공구	97.9
	8공구	93.3
	9공구	87.8
	10공구	87.3
	기타	75.5
	소계	89.5
궤도		48.5
건물		28.2
전력		20.3
통신		14.4
신호		13.1
차량기지		44.2
부대		55.4