｢인천발 KTX 직결사업 노반신설 기타공사｣

특정공법 심의 대상 공모

[교량 말뚝공사]

2024. 3.

1		인천발 KTX 직결사업 현황

□ 사업개요

ㅇ 사업구간 : 인천광역시 연수구, 경기도 안산시, 화성시 일원

ㅇ 사업연장 : L=6.151km (단선 병렬, 기존역 개량 3개소)

ㅇ 총사업비 : 5,574억원 (연결선 : 국가 50%, 기존선 개량 : 국가 100%)

ㅇ 사업기간 : 2021년 4월 ～ 2025년 6월

ㅇ 사업효과 : 수인선과 경부고속선 연결선 건설로 KTX 직결운행을 통한 수도권 서남부지역 고속철도 서비스 확대

□ 추진경위

ㅇ ‘15.09∼’16.07  : 예비타당성조사 (B/C=1.19, AHP=0.582)

ㅇ ‘16.10 ∼      : 타당성조사 및 기본계획 착수 (국토교통부)

ㅇ ‘18.02.28.      : 기본계획 고시 (국토교통부 고시 제2018-121호)

ㅇ ‘18.09 ∼      : 노반 기본 및 실시설계 착수

ㅇ ‘20.12.21.      : 노반공사 착공

ㅇ ‘21.04.12.      : 사업실시계획 승인 (국토교통부 고시 제2021-299호)

2		특정공법 심의 공모내용

□ 개 요

ㅇ (공모대상) ’인천발 KTX 직결사업‘ 중 수인분당선 인접구간 4개소 및 경부고속선 인접구간 1개소의 강관파일 항타공법

ㅇ (적용사유) 운행선 인접공사로 말뚝공사 중 선로 안전성 확보 필요

- 운행선 및 주변 가옥과 축사에 대한 영향을 최소화할 수 있는 소음･진동 저감 가능 공법 요구

- 운행선 전철주 이격거리(최소 3.2m)를 고려한 장비 전도 시의 안전성 확보 및 주간작업 시행을 위한 장비 높이 최소화 필요

- 운행선 및 인접 도로와 하천 등을 감안하여 협소 공간에서의 시공성 확보 및 공사용 가도 최소화 필요

구분	현재 (S.D.A + T4)	특정공법 적용(안)
단면
시공 예시

□ 대상물량

ㅇ 심의 대상

분 야	공 종	심의 대상	비 고
교 량	말뚝기초	5개소	상단 평면도 참조

* 교량 말뚝기초 시공실적이 있으며, 경제적이고 유지관리에 유리한 공법이어야 할 것. 또한 특허와 관련하여 다른 회사와 분쟁의 소지가 없어야 함.

ㅇ 말뚝기초 세부현황

구 분		실시설계 반영현황		변 경	비고
		기성말뚝	현장타설말뚝 (RCD)	특정공법
어천 고가	상선	P5~P20, A2 (17개소)	P1~P4 (4개소)	A2 (1개소)	수인분당선 인접공사
	하선	P5~P19, A2 (16개소)	P1~P4 (4개소)	A2 (1개소)	수인분당선 인접공사
원평 고가	상선	A1, P1~P38, A2 (40개소)	-	A2 (1개소)	경부고속선 인접공사
	하선	A1, P1~P26, A2 (30개소)	-	P7,P8 (2개소)	수인분당선 인접공사
계		103개소	8개소	5개소

□ 추진일정

ㅇ ‘24.03.19.~04.01. : 특정공법 심의대상 공모 (공단 홈페이지, 14일간)

ㅇ ‘24.03.29.       : 현장설명회 (공단 수도권본부)

ㅇ ‘24.04.01.~04.03. : 참여의향서 접수 (현장설명회 참여업체에 한함)

* 1개 업체만 응모할 경우 재공모(7일) 시행

ㅇ ‘24.04.04.~04.09. : 1차 평가서류 접수

ㅇ ‘24.04.09.~04.15. : 1차 평가서류 검증 및 숏리스트 선정 (필요시)

ㅇ ‘24.04.16.~04.22. : 수량조서 제공 및 2차 서류 접수

ㅇ ‘24.04.22.~04.30. : 2차 서류 검증 및 기술심의 요청서류 작성

ㅇ ‘24.5월중       : 기술심의 시행 및 낙찰자 선정 (심의주관부서)

□ 지원방법

ㅇ 공모에 참여하고자 하는 업체는 현장설명회에 반드시 참석하여야 하며, 현장설명회 참석업체에 한하여 ’참여의향서‘를 기한 내(4/3 限) 아래 담당자 이메일로 제출

담 당 자	사무실	E-mail
수도권사업단 토목1부 서현오 대리	02-788-5208	seo@kr.or.kr

* ‘참여의향서’ 제출 후 담당자에게 접수 여부 유선확인 必 (제출여부 미확인에 따른 심의 참여 누락의 책임은 참여사에 있음)

* 기타사항은 우리 공단 수도권본부 수도권사업단 토목1부 이성도 차장(02-788-5202), 또는 서현오 대리(02-788-5208)에게 문의

□ 유의사항

① 현장설명회 참석 및 참여의향서 제출을 한 특정공법을 대상으로 심의대상 6개 후보공법 선정 후 2차 평가를 통해 1개의 특정공법 선정

- 참여의향서 제출, 단계별 평가서류 제출 등과 관련된 안내사항과 참여를 위한 설계자료 등은 참여의향서를 제출한 업체에 한하여 이메일로 별도 송부 예정 (참여의향서는 현장설명회 참석업체에 한하여 제출 가능)

② 단계별 평가 진행(1차 평가, 숏리스트 선정, 2차 평가 등)을 위하여 제출된 증빙서류(대표자, 자회사․그룹사 등의 관계 확인서류, 특허권 및 신기술 등 권리관계 확인서류, 장비 실보유현황 확인서류 등) 중 평가기준에 영향을 미칠 수 있는 내용이 사실과 다르거나 누락된 것이 확인될 경우 낙찰자 선정을 취소할 수 있음

③ 특허의 전용·통상 실시권자와 신기술 사용 협약자는 특허권자 또는 신기술 보유자의 특허·신기술 사용 동의서를 반드시 제출하여야 하며,

- 공단과의 협약 체결 예상시점 전까지 특허권(특허권자), 신기술 보호기간(신기술 보유자), 특허권자 또는 신기술 보유자와의 사용협약 기간(특허 전용․통상실시권자 또는 신기술 사용협약자) 등이 만료되는 경우는 특허 또는 신기술로 불인정

* 해당 공종의 공사 완료 이전 특허권 등의 만료가 예상되는 경우에는 반드시 공사 완료 시까지 반드시 해당 권리를 연장하여야 함.

- 특허권이 없고, 공단과의 협약 체결 예상시점 이전에 신기술 보호기간이 만료되는 경우는 특정공법으로 불인정하여 평가 대상에서 제외 (결격처리)

※ 현장설명회 참석 및 참여의향서를 제출한 업체에게 제시하는 안내자료 상 공사 물량 등은 본 공사 실시설계 자료로 추후 심의과정 및 관계기관 협의 등에 따라 일부여건 등이 변경될 수 있음

※ 평가기준은 우리 공단 ‘기술자문위원회 운영지침’ 등 관련규정에 따름.