보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	자료배포일 2017. 5. 8.(월)	총 매수 2매
	배포부서 홍보실 (042-607-3082)
담당부서 건설본부 고속철도처 / 처장 유성기, 원주강릉부장 하호태 (042-607-4712)
철도공단, 원주~강릉 철도사업 본격적인 개통준비 돌입 - 개통운영전담반 합동점검을 통해 사소한 사항까지 꼼꼼히 챙겨...-

□ 한국철도시설공단(이사장 강영일)은 평창 동계올림픽 지원사업인 원주～강릉 사업(경강선)의 완벽한 개통을 위해 운영자인 코레일과 함께 구성된 개통운영전담반을 구성하고 ‘17년 5월 10일〜 5월 19일까지 전 구간에 걸쳐 합동점검을 시행하여 본격적인 개통준비에 돌입한다고 밝혔다.

○ 공단은 개통준비를 위해 지난 5월 1일(월) 고속철도처장을 반장으로 2개팀(시설점검팀, 운영점검팀) 21개 분야 총 58명으로 개통운영전담반을 구성하였으며, 각 팀에는 운영자인 코레일 분야별 담당 직원도 포함하고 있음.

□ 이번 합동점검은 국토부의『철도건설사업 시행지침』에 따라 개통 6개월 전에 노반, 궤도, 건물, 전기 등 전 분야에 대해 설계도서와의 적합성, 필요시설 설치여부, 승하차 동선과 편의시설 위치의 적정성, 고객안전설비 상태 등 개통준비 상태와 안전을 점검 할 계획이다

□ 공단은 합동점검 이후 6월 1일부터 종합시험운행의 가능여부를 확인하기 위한 사전점검을 시행하고, 7월31일부터 시운전열차 단계별 증속시험, 궤도·전차선 동적시험 등 분야별 성능검증을 위한 시설물검증, 10월24일부터 영업시운전 등을 시행할 계획이며, 현재 공정율 91.6%로 12월 개통에 특별한 문제가 없는 것으로 보고 있다.

□ 강영일 이사장은 “공단의 모든 역량을 모아 사소한 사항까지도 꼼꼼히 챙겨 완벽한 개통을 이뤄 낼 것”이라며, “본 사업이 2018 평창올림픽을 지원하는 중요한 사업인 만큼, 자부심과 책임감을 가지고 개통 시까지 최선을 다 하겠다”고 말했다.

【참  고】개통운영전담반 조직도

															개통운영전담반 (고속철도처장)
	시설 점검팀 (9개분야)		안전			노반			건축			궤도			신호			통신				전력				전차선				송변전
	운영 점검팀 (12개분야)		안전			노반			건축			궤도			신호			통신				전력				전차선				송변전				차량			영업				운전