보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	자료배포일 2017. 8. 03.(목)	총 매수 2매
	배포부서 홍보실 (042-607-3082)
담당부서 기술본부 차량처 / 처장 최종호, 종합시운전부장 김형룡 (042-607-4522)
철도공단, 원주~강릉철도 처음으로 KTX 투입하여 시험운행 - 철저한 시설물 점검·영업 시운전으로 12월 안전하게 개통 예정 -

□ 한국철도시설공단(이사장 강영일)은 8월 3일(목) 원주∼강릉 복선철도(120.7km) 구간에 KTX를 처음으로 투입하여 시험운행을 시행한다고 밝혔다.

○ 공단은 이날 KTX가 시속 170km/h로 시험운행을 실시하며, 이달 8일까지 200, 230, 250km/h 단계적으로 속도를 높이고, 10월 11일까지 73일간 250km/h로 운행하면서 신호·전차선·차량 인터페이스 등 96개 항목을 검증한다.

○ 96개 항목 중 차량진동특성 등 핵심적인 15개 항목은 철도전문기관인 한국철도기술연구원에 의뢰하여 시험결과의 객관성과 신뢰성을 확보할 계획이다.

□ 공단은 시설물검증을 마치고, 10월 24일부터 11월 23일까지 31일간 실제 영업운행에 대비하여 인천공항역∼용산역(서울역)∼청량리역∼진부역∼강릉역 구간에 KTX를 투입하여 영업 시운전에 나선다.

○ 영업시운전에서는 열차운행 스케줄, 관제시스템, 역사 설비 등 54개 항목을 점검하고, 기관사의 노선 숙지 훈련도 실시한다.

□ 원주∼강릉 철도건설사업은 총사업비 3조 7,614억 원이 투입되는 사업으로, ’12년 6월 착공하여 ’17년 12월 개통 예정이다.

○ 이 구간이 개통되면, 현재 청량리에서 강릉까지 5시간 47분(무궁화호 기준)이 소요되나, 1시간 28분(1개역 정차 기준)으로 4시간 19분 단축되어, 강원지역도 반나절 생활권이 실현된다.

□ 이날 KTX에 탑승하여 현장 근로자들과 함께 시설물점검에 나선 강영일 이사장은 “오늘은 처음으로 강원도 강릉에 KTX가 운행한 역사적인 날”라며, “개통 때까지 종합 시운전을 철저히 시행하여 호남고속철도와 수서고속철도의 성공적인 개통 역사를 이어가자”고 역설했다.

참 고		금일 KTX 운행영상과 사진 다운로드

□ 원주∼강릉철도 KTX 운행 영상과 사진은 웹하드에 17시 경 업로드 예정입니다.

○ 웹하드 주소 : www.webhard.co.kr

○ 웹하드 ID : krkrkr

○ 웹하드 Password : kr042607