2023년 사업실명제 대상사업 사업내역서

사업실명제

등록번호

2023-17

담당부서

작성자

(건설본부/고속일반철도처)

(박영록/042-607-3484/funor@kr.or.kr)

사 업 명

동두천~연천 복선전철 건설사업

사업개요

및

추진경과

ㅇ 노선도

ㅇ 사업개요

- 사업목적

ㆍ남북철도 연계대비 및 철도수송능력 증강에 따른 철도수송 분담률 증가

ㆍ수도권 경기북부 접경지역 개발촉진 및 광역교통편의 제공

ㆍ철도네트워크 효율개선 및 지속발전가능한 철도망 구축

- 사업기간 : 2010 ~ 2024년

- 총사업비 : 4,836억원

ㅇ 주요내용

- 경원선 동두천~연천 복선전철 건설(20.87 km)

ㅇ 추진경과

- ‘10.  3. : 타당성조사 및 기본계획 착수

- ‘11. 11. : 타당성조사 및 기본계획 수립(B/C 1.07)

- ‘14.  4. : 노반 실시설계

- ‘14. 10. : 사업 실시계획 승인

- ‘14. 10. : 노반분야 착공

- ‘15.  2. ~ 2016. 8. : 교량화 변경 총사업비 조정 협의(4개소)

- ‘16. 10. : 교량화 총사업비 조정 승인(기획재정부)

- ‘18.  6. : 총사업비 기간 연장 조정 승인(2019 → 2021)

- ‘18. 10. : 사업 실시계획 변경(사업기간 연장 2019 → 2021)

- ‘20.  6. : 총사업비 기간 연장 조정 승인(2021 → 2023)

- ‘21. 11. : 사업 실시계획 변경(사업기간 연장 2021 → 2023)

- ‘22. 12.  : 사업 실시계획 변경(사업기간 연장 2023 → 2024)

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

ㅇ 사업관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
건설본부	손병두	본부장	`22.08.29∼현재	건설본부 사업 업무총괄
	한상연	처장	`23.01.18∼현재	고속일반철도 사업 업무총괄
	황도경	부장	`23.01.18∼현재	수도권 고속일반철도사업 업무총괄
수도권본부	이계승	본부장	`22.08.29∼현재	수도권본부 사업 업무총괄
	하호태	처장	`22.06.16∼현재	수도권본부 수도권사업단 업무총괄
	김정한	부장	`22.11.09∼현재	동두천~연천 복선전철 업무총괄

다른기관 또는

민간인 관련자

ㅇ 국토교통부 : 철도건설과장 오송천, 담당사무관 김은철

ㅇ 설계사 : ㈜서현기술단, ㈜동명기술공단종합건축사사무소, ㈜신성엔지니어링, ㈜대한콘설탄트

ㅇ 시공사

- 1공구 : ㈜한화건설, ㈜가야건설

- 2공구 : ㈜포스코건설, 태평양개발㈜

ㅇ 감리사 : ㈜동명기술공단종합건축사사무소, ㈜태조엔지니어링, ㈜서현기술단

추진실적

ㅇ ‘14. 9.   : 사업실시계획 승인

ㅇ ‘14. 10.  : 노반분야 착공

ㅇ ‘16. 10.  : 교량화 총사업비 조정 승인(기획재정부)

ㅇ ‘18. 8.   : 궤도분야 착공

ㅇ ‘19. 12.  : 전력분야 착공

ㅇ ‘20. 3~6. : 건물, 신호, 통신분야 착공